제4차 설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과

문서번호		요청부서		토목부 박웅교	요청일		2017년 04월
공 사 명	장안교(구교) 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 철거(B=17m, L=200m) - 교량신설 (B=17m, L=218m : 라멘교 + Pre-Flex Beam교) - 교통우회용 가교 : L=220m(TRIAS 공법)
	공사기간		2014. 12. 16. ~ 2017. 08. 31.
	감 리 사		㈜삼안, ㈜유신, ㈜경동엔지니어링
	설 계 사		㈜서영eng, ㈜삼보기술단
	시 공 사		새천년종합건설(주), ㈜서한기술공사
자문 안건명			교량 상부 보도부 시공방법 변경			요청금액		증 920,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 보행친화적 명품교량 건설과 도시경관 및 이용자 편의를 고려한 서울시민디자인위원회 심의 의결 내용 등을 반영하여 교량(장안교) 상부 보도부 시공방법(보도포장, 난간 등)을 변경함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 해당없음
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 자재비 견적처리 (3개 견적처리 필요) 보완하기 바람 ○ 자재비(No.10호표) 산출근거 누락으로 보완하기 바람