7차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부 박웅교	요청일		2017년 06월
공 사 명	장안교(구교) 성능개선공사(4차)
공사개요	공사규모		- 기존교량 철거(B=17m, L=200m) - 교량신설 (B=17m, L=218m : 라멘교 + Pre-Flex Beam교) - 교통우회용 가교 : L=220m(TRIAS 공법)
	공사기간		2014. 12. 16. ~ 2017. 08. 31.
	감 리 사		㈜삼안, ㈜유신, ㈜경동엔지니어링
	설 계 사		㈜서영eng, ㈜삼보기술단
	시 공 사		새천년종합건설(주), ㈜서한기술공사
자문 안건명			유지관리부서 요청에 따른 추가 시설물 설치			요청금액		증 490,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 시설물 유지관리부서(성동도로사업소 시설보수과)에서 요청한 시설물(조류방지시설, 중성화방지도장) 설치를 반영한 사항으로 장안교(신설교, 신교) 유지관리시 이용시민의 불편(조류배설물 낙하)과 정밀안전점검 외관조사결과 구조물의 장기적인 내구성 확보를 위함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ※ p43 중성화방지도장 투입물량(0.256×25%=0.064 → 0.256×20%=0.0512) 조정하기 바람 ※ p37, 389 도장에 사용되는 트럭탑재형 크레인은 10톤, 유해조류방지시설물에 사용되는 크레인은 5톤으로서 특별한 이유가 없다면 5톤으로 변경을 검토하기 바람 ※ p36 제2호표 기구손료(노무비2%)에서 크레인 연마공 노무비의 2%가 되도록 조치하기 바람