설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	SMIH-14-38008	요청부서		토목부		요청일			2014년 10월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		임광토건(주)
자문 안건명			본선교 P7 지장건물 철거					요청금액		증 197,100천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ☑ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 건물 확대보상 및 유관기관(한국철도공사)에 의하여 공법 및 철거수량이 변경이 됨.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 본선교 P7 저촉 지장건물의 확대보상으로 인한 건물 전체철거 작업 시 철도공사 협의 결과를 반영하여, 철도시설물의 안정성 확보차원에서 절단 후 인양하는 공법이 적합하다고 사료 됨.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: 브레이커 압쇄공법 - 변 경: Wheel Saw 절단 후 인양 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 지장 건물철거 [467㎡] - 변 경 : 지장 건물철거 [1,499.9㎡] - 증 감 : 지장 건물철거 [1,032.9㎡]					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 740 천원 - 변 경 : 197,100 천원 - 증 감 : 196,360 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 해체 및 철거공사
별첨서류	1. 감리검토의견서 1부. 2. 설계자의견서 1부. 3. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 4. 수량산출서 및 도면 1부. 5. 관련공문 1부.						▪ 공사예정시기 - 2014.07월중 ▪ 소요관급자재 - 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	167,433,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	임광토건(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의율	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎ 02-3708-8662)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ 기존가옥 철거 [브레이커 압쇄공법] - A=467㎡		○ 기존가옥 철거 [Wheel Saw절단 후 인양] - A=1,499.9㎡	증
공 사 비	740 천원		197,100 천원	196,360 천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	적용율 82.25%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부 SMIH-14-38008)
	관련규정	공사계약일반조건 제23조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 브레이커압쇄공법, A=467㎡(당초) → Wheel Saw절단 후 인양,A=1,499.9㎡(변경)
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 본선교 P7 지장건물 철거 실정보고 - 임광(강남) 제 2014-448호

· 본선교 P7 지장건물 철거 검토보고 - 서영강남 14-301호

· 실정보고 승인 및 설계변경 심의지시 - 도시기반시설본부 SMIH-14-38008,서영강남 14-305호