업무연락전
작 성 자	한종수	작성일자	2014-12-22	문서번호	도시기반시설본부-14-48033
대상현장	[용허리공원 빗물저류조 설치공사](주)신명건설기술공사
제 목	자문회의 결과 통보
내 용
1. 용허리공원 빗물저류조 돌관공사 관련 자문회의 결과를 아래와 같이 알려드리오니 설계변경 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. 가. 자문회의 일시 : 2014. 12. 16(화) 나. 자문결과 : 법정 쟁송 이전에 합리적인 수준에서 돌관공사비 지급 다. 조치사항 : 공사비 산정에 있어 과다 또는 허위 청구된 금액이 발생되지 않도록 객관적인 자료를 근거로 실비이내에서 돌관공사비를 산정 후 설계변경시 반영 끝.

서울특별시