설계변경 본부위원회 심의요청서 세부

요청부서		도시철도토목부 토목1과	요청일	2015. 05. 21
공사개요	공사명	서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사	설계사	㈜삼보기술단외 3개사
	공사규모	총연장 : 1,728m - 정거장(1개소) : 204m - 터널 : 410m - 본선개착 : 1,114m	감리사	㈜동명기술공단외 3개사
	사업기간	2010.09.20 ~ 2016.03.21	시공사	대림산업(주)외 5개사
	계약금액 (도급비)	당초 98,224,000,000원, 변경 101,288,000,000원 (증 3,064,000,000원)
심의요청사유		○ 실시설계중 정거장 규모변경, 정거장 위치이동, 출입구 위치이동 민원이 발생함에 따라 본부장방침(도시철도설계부-100326, ‘11.03.11)에 의거 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동한바, 유치선 확보를 위해 본선종점부를 54m 연장
심의요청내용	구 분	설계변경 전	설계변경 후
	변경개요	○ 토목 ∙ 굴착 13,314㎥ ∙ 버팀보설치 78본 ∙ 구체콘크리트 2,914㎥ ∙ 포장공 7a ∙ 차선도색 30㎡ ○ 전기 ∙ 전기분야 - 옥외용 비닐전선 5,484m - 조명기구 292개 - 노무비 135인 ∙ 소방분야 - 강제 전선관 5,281m - 절연전선 21,124m ○ 기계 ∙ 기계분야 - 본선장비 설치공사 · 노무비 210인 - 집수정 배관공사 · 배관용 스테인리스 강관 66m · 노무비 486인 ∙ 소방분야 - 배관용 탄소강관 3,108m	○ 토목 ∙ 굴착 24,948㎥ ∙ 버팀보설치 138본 ∙ 구체콘크리트 4,039㎥ ∙ 포장공 18a ∙ 차선도색 279㎡ ∙ 지장물이설 1식 ○ 전기 ∙ 전기분야 - 옥외용 비닐전선 5,948m - 조명기구 325개 - 노무비 146인 ∙ 소방분야 - 강제 전선관 5,464m - 절연전선 21,856m ○ 기계 ∙ 기계분야 - 본선장비 설치공사 · 노무비 212인 - 집수정 배관공사 · 배관용 스테인리스 강관 92m · 노무비 504인 ∙ 소방분야 - 배관용 탄소강관 3,172m
	도 급 공사비	98,224,000,000원	101,288,000,000원 (증 3,064,000,000원)
	공사기간	2010.09.20 ~ 2016.03.21	2010.09.20 ~ 2016.03.21
부서 검토의견		별첨서류
별첨서류		1. 설계변경 심의자료 요약 1부. 2. 신규공종 등 단가결정 근거 1부. 3. 설계내역서 1부. 4. 설계변경 도면(기제출)

서울지하철 9호선 3단계 923공구 설계변경 심의자료 요약

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

○ 위    치 : 강동구 둔촌동 산29번지 일원 ~ 보훈병원

○ 공사기간 : 2010. 09. 20 ~ 2016. 03. 31

○ 도 급 비 : 98,224백만원

○ 시 공 사 : 대림산업(주), 두산건설(주), 삼성중공업(주), (주)승영기술공사, (주)삼호, (주)삼진일렉스

○ 설 계 사 : ㈜삼보기술단,(주)에스오씨건설엔지니어링,(주)화신엔지니어링,(주)이가건축

○ 공사규모

● 총 연장 : L = 1,728m

▶ 본  선 : L = 1,524m (개착L=1,114m, 터널L=410n), 환기구 4개소

▶ 정거장 : L = 204m (1개소)

□ 주요변경내용

구 분	주요변경내용	공사비 증감
전 체	․ 실시설계중 정거장 규모변경, 정거장 위치이동, 출입구 위치이동 민원이 발생함에 따라 본부장방침(도시철도설계부-100326,‘11.03.11)에 의거 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동한바, 유치선 확보를 위해 본선종점부를 54m 연장	당초 : 98,224백만원 변경 : 101,288백만원 증감 : 증) 3,064백만원
토목분야	․ 토 공 : 굴착 (증) 11,634㎥ ․ 가시설 : 버팀보 (증) 60본 ․ 구조물 : 구체콘크리트타설 (증) 1,125㎥ ․ 포장공 : 11a ․ 차선도색 : 249㎡ ․ 지장물이설 : 1식	당초 : 72,800백만원 변경 : 75,770백만원 증감 : 증) 2,970백만원
전기분야	∙ 전기분야 - 옥외용 비닐전선 (증) 464m - 조명기구 (증) 33개 - 노무비 (증) 11인 ∙ 소방분야 - 강제 전선관 (증) 183m - 절연전선 (증) 732m	당초 : 5,919백만원 변경 : 5,996백만원 증감 : 증) 77백만원
기계분야	∙ 기계분야 - 본선장비 설치공사 · 노무비 (증) 2인 - 집수정 배관공사 · 배관용 스테인리스 강관 (증) 26m · 노무비 (증) 18인 ∙ 소방분야 - 배관용 탄소강관 (증) 64m	당초 : 13,181백만원 변경 : 13,198백만원 증감 : 증) 17백만원

938정거장 중심이동에 따른 종점부 54m 연장 설계변경 (토목분야)

□ 추진경위

○‘11.11.17 : 938정거장 유치선 유효장 연장 검토지시 [업무연락전 도시철도 설계부-79호]

○‘12.01.30 : 938정거장 유치선 유효장 연장 검토의견 제출 [서지 923공 12-37호]

○‘12.08.31 : 유치선연장 기본 및 실시설계 성과품 제출 [서지923공 12-263호, 시공사→설계부/설비부]

○‘12.12.17 : 유치선연장 기본 및 실시설계 설계비 요청 [서지923공 12-384호, 시공사→설계부]

○‘12.12.26 : 938정거장 위치이동 및 본선연장 설계완료 보고 [설계부-10100]

○‘13.01.11 : 938정거장 유치선연장 기본 및 실시설계 도서 검토지시 [공무부-241호, 서울시→감리단]

○‘13.03.18 : 설계도서 검토보고 [동명감923 제2013-046호]

○‘14.12.23 : 총사업비 조정결과 통보 [동명감923 제2014-335]

○‘15.03.26 : 유치선 연장관련 계약금액 조정신청 [서지 923공 15-141]

○‘15.04.03 : 변경계약 자문위원회 자료제출 통보 [동명감923 제2015-129]

○‘15.04.07 : 유치선 연장 우선시공 승인 [동명감923 제2015-130]

□ 설계변경 근거

○ 도시철도설계부-100326,‘11.03.11 : 938정거장 중심 종점측 이동에 따른 종점부 연장

○ 도시철도설계부-10100, ‘12.12.26 : 938정거장 위치이동 및 본선연장 설계완료 보고

□ 설계변경 현황

○ 실시설계중 정거장 규모변경, 정거장 위치이동, 출입구 위치이동 민원이 발생함에 따라 본부장방침

(도시철도설계부-100326,‘11.03.11) 에 의거 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동한바, 유치선 확보를 위해
본선종점부를 54m 연장

□ 설계변경 개요

○ 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동함에 따라 종점부를 54m 연장하여 토공/구조물/포장공등 수량 증가

□ 단가산출기준

◦ 설계완료 승인        : 2012.12.26.일              ◦ 공사원가계산         : 계약요율 적용

◦ 유류비               : 2012.12.26.일              ◦ 노임,중기,실적단가   : 2012년 하반기

◦ 환율 및 기초자재가격 : 2012.12월(가격정보, 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격)

◦ 증가물량              : (계약단가 + 설계단가)x50%, 단 신규비목은 설계단가 적용

◦ 감소물량              : 계약단가

□ 설계변경 주요내용

구 분	당 초	변 경	공사비 계
종점부 연장 54m	∙ 굴착 13,314㎥ ∙ 버팀보설치 78본 ∙ 구체콘크리트 2,914㎥ ∙ 포장공 7a ∙ 차선도색 30㎡	∙ 굴착 24,948㎥ ∙ 버팀보설치 138본 ∙ 구체콘크리트 4,039㎥ ∙ 포장공 18a ∙ 차선도색 279㎡ ∙ 지장물이설 1식	당초 : 72,800백만원 변경 : 75,770백만원 증감 : 증)2,970백만원
			직접공사비
			당초 : 50,096백만원 변경 : 52,048백만원 증감 : 증)1,952백만원
			간접비 및 물가변동액
			당초 : 22,704백만원 변경 : 23,722백만원 증감 : 증)1,018백만원

938정거장 중심이동에 따른 종점부 54m 연장 설계변경 (토목분야)

평 면 도 (당 초)	평 면 도 (변 경)
종 단 면 도 (당 초)	종 단 면 도 (변 경)

938정거장 중심이동에 따른 종점부 54m 연장 설계변경 (전기분야)

□ 추진경위

○‘11.11.17 : 938정거장 유치선 유효장 연장 검토지시 [업무연락전 도시철도 설계부-79호]

○‘12.01.30 : 938정거장 유치선 유효장 연장 검토의견 제출 [서지 923공 12-37호]

○‘12.08.31 : 유치선연장 기본 및 실시설계 성과품 제출 [서지923공 12-263호, 시공사→설계부/설비부]

○‘12.12.17 : 유치선연장 기본 및 실시설계 설계비 요청 [서지923공 12-384호, 시공사→설계부]

○‘12.12.26 : 938정거장 위치이동 및 본선연장 설계완료 보고 [설계부-10100]

○‘13.01.11 : 938정거장 유치선연장 기본 및 실시설계 도서 검토지시 [공무부-241호, 서울시→감리단]

○‘13.03.18 : 설계도서 검토보고 [동명감923 제2013-051호]

○‘14.12.23 : 총사업비 조정결과 통보 [동명감923 제2014-335]

○‘15.03.26 : 유치선 연장관련 계약금액 조정신청 [서지 923공 15-141]

○‘15.04.03 : 변경계약 자문위원회 자료제출 통보 [동명감923 제2015-129]

○‘15.04.07 : 유치선 연장 우선시공 승인 [동명감923 제2015-130]

□ 설계변경 근거

○ 도시철도설계부-100326,‘11.03.11 : 938정거장 중심 종점측 이동에 따른 종점부 연장

○ 도시철도설계부-10100, ‘12.12.26 : 938정거장 위치이동 및 본선연장 설계완료 보고

□ 설계변경 현황

○ 실시설계중 정거장 규모변경, 정거장 위치이동, 출입구 위치이동 민원이 발생함에 따라 본부장방침

(도시철도설계부-100326,‘11.03.11) 에 의거 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동한바, 유치선 확보를 위해
본선종점부를 54m 연장

□ 설계변경 개요

○ 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동함에 따라 종점부를 54m 연장하여 연장구간 전기분야 수량 증가

□ 단가산출기준

◦ 설계완료 승인        : 2012.12.26.일              ◦ 공사원가계산         : 계약요율 적용

◦ 유류비               : 2012.12.26.일              ◦ 노임,중기,실적단가   : 2012년 하반기

◦ 환율 및 기초자재가격 : 2012.12월(가격정보, 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격)

◦ 증가물량              : (계약단가 + 설계단가)x50%, 단 신규비목은 설계단가 적용

◦ 감소물량              : 계약단가

□ 설계변경 주요내용

구 분	당 초	변 경	공사비 계
종점부 연장 54m	∙ 전기분야 - 옥외용 비닐전선 5,484m - 조명기구 292개 - 노무비 135인 ∙ 소방분야 - 강제 전선관 5,281m - 절연전선 21,124m	∙ 전기분야 - 옥외용 비닐전선 5,948m - 조명기구 325개 - 노무비 146인 ∙ 소방분야 - 강제 전선관 5,464m - 절연전선 21,856m	당초 : 5,919백만원 변경 : 5,996백만원 증감 : 증)77백만원
			직접공사비
			당초 : 4,071백만원 변경 : 4,120백만원 증감 : 증)49백만원
			간접비 및 물가변동액
			당초 : 1,848백만원 변경 : 1,876백만원 증감 : 증)28백만원

938정거장 중심이동에 따른 종점부 54m 연장 설계변경 (전기분야)

당 초	변 경
(전기분야)	(전기분야)
(소방분야)	(소방분야)

938정거장 중심이동에 따른 종점부 54m 연장 설계변경 (기계분야)

□ 추진경위

○‘11.11.17 : 938정거장 유치선 유효장 연장 검토지시 [업무연락전 도시철도 설계부-79호]

○‘12.01.30 : 938정거장 유치선 유효장 연장 검토의견 제출 [서지 923공 12-37호]

○‘12.08.31 : 유치선연장 기본 및 실시설계 성과품 제출 [서지923공 12-263호, 시공사→설계부/설비부]

○‘12.12.17 : 유치선연장 기본 및 실시설계 설계비 요청 [서지923공 12-384호, 시공사→설계부]

○‘12.12.26 : 938정거장 위치이동 및 본선연장 설계완료 보고 [설계부-10100]

○‘13.01.11 : 938정거장 유치선연장 기본 및 실시설계 도서 검토지시 [공무부-241호, 서울시→감리단]

○‘13.03.18 : 설계도서 검토보고 [동명감923 제2013-051호]

○‘14.12.23 : 총사업비 조정결과 통보 [동명감923 제2014-335]

○‘15.03.26 : 유치선 연장관련 계약금액 조정신청 [서지 923공 15-141]

○‘15.04.03 : 변경계약 자문위원회 자료제출 통보 [동명감923 제2015-129]

○‘15.04.07 : 유치선 연장 우선시공 승인 [동명감923 제2015-130]

□ 설계변경 근거

○ 도시철도설계부-100326,‘11.03.11 : 938정거장 중심 종점측 이동에 따른 종점부 연장

○ 도시철도설계부-10100, ‘12.12.26 : 938정거장 위치이동 및 본선연장 설계완료 보고

□ 설계변경 현황

○ 실시설계중 정거장 규모변경, 정거장 위치이동, 출입구 위치이동 민원이 발생함에 따라 본부장방침

(도시철도설계부-100326,‘11.03.11) 에 의거 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동한바, 유치선 확보를 위해
본선종점부를 54m 연장

□ 설계변경 개요

○ 938정거장 중심을 종점측으로 60m이동함에 따라 종점부를 54m 연장하여 연장구간 전기분야 수량 증가

□ 단가산출기준

◦ 설계완료 승인        : 2012.12.26.일              ◦ 공사원가계산         : 계약요율 적용

◦ 유류비               : 2012.12.26.일              ◦ 노임,중기,실적단가   : 2012년 하반기

◦ 환율 및 기초자재가격 : 2012.12월(가격정보, 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격)

◦ 증가물량              : (계약단가 + 설계단가)x50%, 단 신규비목은 설계단가 적용

◦ 감소물량              : 계약단가

□ 설계변경 주요내용

구 분	당 초	변 경	공사비 계
종점부 연장 54m	∙ 기계분야 - 본선장비 설치공사 · 노무비 210인 - 집수정 배관공사 · 배관용 스테인리스 강관 66m · 노무비 486인 ∙ 소방분야 - 배관용 탄소강관 3,108m	∙ 기계분야 - 본선장비 설치공사 · 노무비 212인 - 집수정 배관공사 · 배관용 스테인리스 강관 92m · 노무비 504인 ∙ 소방분야 - 배관용 탄소강관 3,172m	당초 : 13,181백만원 변경 : 13,198백만원 증감 : 증)17백만원
			직접공사비
			당초 : 9,610백만원 변경 : 9,651백만원 증감 : 증)41백만원
			간접비 및 물가변동액
			당초 : 3,571백만원 변경 : 3,547백만원 증감 : 감)24백만원

938정거장 중심이동에 따른 종점부 54m 연장 설계변경 (기계분야)

당 초	변 경
(기계분야)	(기계분야)
(소방분야)	(소방분야)