자원회수시설 미활용 폐열회수 및 백연저감 사업 추진일정(안)

2014. 8       : 사업의향서 제출 및 서울시 검토

2014. 9       : 기후환경본부 기술 설명

2015. 1 ~ 3 : MOU 체결 및 Pilot Test 현장조사

2015. 4 ~ 9 : Pilot Plant 제작 및 설치

2015.10 ~ 4 : Pilot Test 실시(6개월)

2016. 5 ~ 6 : Test 결과보고, 기술검증 및 미비사항 보완

2016. 7 ~ 8 : 실제사업 협약 및 인허가

2016. 9 ~11 : 실시설계 및 제작 발주

2016.12 ~ 5 : 실제사업 설치시공(6개월)

2017. 6 ~ 7 : 시범운영

2017. 8      : 상업운전 실시