<서식 2>

2018 회계연도 사고이월 요구서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수도자재관리센터소장: 직 공업5 윤종민(인)

공 사  자재 관리팀장: 직 공업6 송영무(인)

작       성       자 : 직 공업7 윤승욱(인)

(단위 : 천원)

사 업 명 (사업코드)	예 산 과 목				예산 현액	지 출 원 인 행 위 (2018.12.31 기준)		지 출 액 (2018.12.31 기준)		2018 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	완공예정 연월일
	관	항	세항	목 (세목)		월일	금 액	월일	금액	목 (세목)	계 (국고)	원인행위 필 (국고)	원인행위 미필 (국고)
수도용 폴리에틸렌 피복강관 700mm 제작구매(대형106) (국사봉배수지 건설공사 21103)	자본적 지출	비가동 설비자산	건설 중인 자산	국사봉 배수지 건설 공사 (시설비및부대비)	355,841	2018. 08.16	315,252	2018. 12.13	157,626	국사봉 배수지 건설 공사 (시설비및부대비)	157,626	157,626		40,589	구매요구부서(시설과) 의 국사봉배수지 건설공사 송배수관 부설일정 변경에 의한 납품기한 연기요청 (2019.5.19.)으로 사고 이월함	2019. 05.19
수도용 폴리에틸렌 피복강관 700mm 외 1종 제작구매(대형197) (국사봉배수지 건설공사 21103)	자본적 지출	비가동 설비자산	건설 중인 자산	국사봉 배수지 건설 공사 (시설비 및 부대비)	56,596	2018. 12.12	50,245	.	0	국사봉 배수지 건설 공사 (시설비및부대비)	50,245	50,245		6,351	본부 시설과의 국사봉배수지 건설공사용 자재구매 요청에 의거 구매 발주한 건 으로서 입찰공고, 적격심사등에 기일이 소요되어 2018.12.12. 계약을 체결하였으나 납품기한 (계약일로 부터 30일)이 2019.01.11.이 되어 사고이월함.
수도용 폴리에틸렌 강이형관 제작구매(대형198) (국사봉배수지 건설공사 21103)	자본적 지출	비가동 설비자산	건설 중인 자산	국사봉 배수지 건설 공사 (시설비 및 부대비)	40,930	2018. 12.04	35,819	.	0	국사봉 배수지 건설 공사 (시설비및부대비)	35,819	35,819		5,111	본부 시설과의 국사봉배수지 건설공사용 자재구매 요청에 의거 구매 발주한 건 으로서 입찰공고, 적격심사등에 기일이 소요되어 2018.12.04. 계약을 체결하였으나 납품기한 (계약일로 부터 30일)이 2019.01.03.이 되어 사고이월함.	2019. 01.03

※ 1. 이월액은 원인행위 필‧미필금액을 구분하고, 국고보조금 이월액은 (   )로 별도 명기할 것.

2. 지출원인행위와 지출액이 수회에 걸쳐 이루어진 경우 해당일별로 기재

3. 이월사유란에는 당해사업 이월사유와 함께 미필이월 요지를 함께 명시할 것.

4. 사업코드는 5자리(예 : 노후 상수도관(송배수관) 정비 41101) 표기하고 목(세목)명은 예산과목 란에는 ’18년 목(세목)명, 이월예산 란에는 ’19년 목(세목)명 기재