“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	자전거도로 시공현황 협의 회신(창덕궁앞 도성한복판 돈화문로 도로정비사업)

1. 도시기반시설본부 토목부-4362(19.3.15)호 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 창덕궁앞 도성한복판 돈화문로 도로정비사업과 관련하여 다음과 같이 의견을 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 도시기반시설본부 검토의견

-(기존계획)돈화문로일부 구간에지장물(분전함)이 존치하고 있어 자전거도로 폭이 규정보다 30cm 협소한 1.2m(경계석포함)로 조성될 것으로 확인되어 지장물을 이설코자 계획하였음

-(변경계획)이전에 따른 비용이 과다하게 투입되고 장기간의 공사기간이 소요될 것으로 사료되어 지장물을 현 상태로 존치한 상태로 자전거도로를 설치함이 타당하다고 판단됨

나. 서울시 검토의견

-「서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼」에서는 자전거전용도로(보도높이형)의 설치 시 0.25m의 측방여유를  확보하도록 규정하고 있음. 즉 자전거도로는차도경계석을 제외한 1.2~1.5m의 유색포장도로로 규정하고 있음

-돈화문로의 분전함을 존치하여 기준미달인자전거도로폭원 0.9m를 확보할경우, 사고위험이 내재되어 있어기존계획대로 분전함을 이설하여 자전거이용자의 안전을 확보할 필요성이 있다고 판단됨

- 또한 석재판석으로 포장시미끄럼저항이 떨어져 자전거 주행 시 사고위험성이클 것으로 판단됨. 이에 「서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼」에 의거하여아스팔트 콘크리트 포장을 검토하기 바람

※「서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼」은 http://news.seoul.go.kr/traffic/

archives/33438?tr_code=sweb에서 다운가능함.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관										자전거시설팀장										자전거정책과장
협조자
시행			자전거정책과-3143									(	2019.03.25.					)		접수			토목부-4862								(	2019.3.25.					)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 4층 자전거정책과 (서소문동)															/
전화		02-2133-2769						/전송								/	ktl0213@seoul.go.kr												/	부분공개(5)