<첨부 #1>

신기술 사후평가서(최초)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	추진노즐을 이용한 응축수 배출과 자동압력조절장치를 적용한 상수도 비굴착 전체보수공법(APC)(지정번호 : 제393호 )
기술개발자	최철현/홍익산업개발(주)

공사개요	발주청 (명칭전체)	중부수도사업소	계약형태	■ 일반경쟁 □ 제한경쟁 □ 지명경쟁 □ 수의계약
	공사명 (계약시)	남대문로5가 478 ~ 후암동30-161간 배수관 정비공사(비굴착)
	현장주소	서울특별시 종로구 남대문로5가 ~ 용산구 후암동30의161
	총공사비	200,000,000원	신기술 적용공사비	69,982,000원
	공사기간	2013년 11월 26일 ～ 2013년 12월 26일	계 약 번 호	20131#######00
			입찰공고번호	제2013-18호
			사후평가일	2014년 6월 5일
	시공자	석영산업주식회사	감리자	서울특별시시설관리공단

2. 활용 평가

평가 항목	기존기술대비 수준(50～150)	평가내역(복수 체크 가능)
공사비절감	(130)	작업여건 등을 감안시 굴착 공사비 약 15% ~ 20% 절감 효과.
공기단축	(120)	교체 공사 기간 대비 약 10% ~ 15% 단축 판단됨.
시공성	(120)	■ 시공 난이도	■ 시공현장 관리 용이성
		□ 시공관련 계획 및 설계 편의성	□ 인적, 물적 자원 조달의 용이성
		□ 기타 : ( ※ 상기 이외의 내용이 있을 경우 간략히 기재)
품질향상	(130)	■ 사용성	■ 내구성
		■ 기능 및 외관 개선	■ 구조적 안정성
		□ 유지관리․보수 용이성	□ 자재(재료)의 규격화 ․ 표준화
		□ 기타 :
안전성	(130)	□ 작업자 안전성 개선	■ 시공현장 안전관리 개선
		■ 기계화 또는 자동화
		□ 기타 :
환경친화성	(150)	□ 인체․자연 친화성	■ 건설공해(소음/진동/먼지) 저감
		■ 에너지․자원 절감	■ 환경부하 저감(폐기물 발생 및 재활용, 수질개선 등)
		□ 기타 :
만족도	(130)	우수 (20%이상)
평 균	(130)

※ “기존기술대비 수준”에는 동종의 기존기술을 “100”으로 보고 신기술 적용시 해당 항목의 수준을 종합적으로 판단하여 신기술의 수준을 95, 110, 115, 120 등 숫자로 표기 (공사비절감, 공기단축 항목의 경우 절감금액, 단축일 내역 등을 기재)

3. 발주청 의견(유사한 현장에 적용시 참고할 수 있도록 상세히 기술)

신기술 채택 사유	□ 자체채택 □ 추천채택 ■ 기타(시범사업)
○ 세부 내용 : 차량통행이 빈번한 간선 및 지선 도로구간으로 차량소통원활 및 예산절감 등
시공조건(여건)
※ 차량통행량이 많은 도로로 교체공사에 어려움이 있는 공사임
하자발생여부 및 조치결과	□ 발생 ■ 미발생
○ 조치결과 :
신기술 적용 전․후의 기대 및 실제효과와의 비교
○ 적용 전 기대효과 : 예산절감 효과 20% ~ 30% 이상 기대 ○ 적용 후 실제효과 : 예산절감 효과 20% ~ 25% 정도 절감
다른 공사현장에의 추천 여부 및 그 사유		■ 추천 □ 미추천
※ 추천사유 : 공기단축, 예산절감, 민원최소화, 소음 및 폐기물 발생 등 환경발생요인 저감
문제점 및 개선요구사항
기타 참고사항

점 검 자     부서 : 시설관리과  직급 : 시설6급 성명 : 이병운

부서 : 시설관리과  직급 : 시설7급 성명 : 김선호