문서번호	공원녹지정책과-340
결재일자	2020.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
협조

자치구 공원 대상 주민참여예산사업 추진계획

푸 른 도 시 국

공원녹지정책과

자치구 공원 대상 주민참여예산사업 추진계획

자치구 공원을 대상으로 선정된 주민참여예산 사업에 대하여 제도의 취지에 부합하고 주민과 협업하여 사업을 적기에 추진함으로써 사업효과를 제고하고자 함

□ 사업개요

□ 효창어린이공원 정비

○ 사업위치 : 용산구 임정로11길9,  525㎡

○ 사업내용 : 바닥포장 교체, 운동시설․의자 설치, 수목 정비 등

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

○ 사 업 비 : 150백만원천원

□ 사도감어린이공원 정비

○ 사업위치 : 서초구 서초동 1359-12,  946㎡

○ 사업내용 : 그네 설치, 미끄럼틀 정비 등

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

○ 사 업 비 : 50백만원

□ 개롱근린공원 산책로 정비

○ 사업위치 : 송파구 가락동 동남로 178,  21,544㎡

○ 사업내용 : 노후 산책로 바닥(보도블록)을 친환경 소재로 재조성

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

○ 사 업 비 : 190백만원

□ 공원 내 위험수목 정비

○ 사업위치 : 양천구 관내 공원

○ 사업내용 : 폭우, 강풍 등에 대비 위험수목 사전 제거

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

○ 사 업 비 : 200백만원

□ 추진방향

○ 주민의 의견을 충분히 수렴하여 이용자 요구를 최대한 반영

○ 전 과정에서 주민 협치로 주민자치 이념을 공원분야에서 구현

○ 사업을 조기 추진하여 공원이용 성수기인 가을철 이전 사업완료

□ 추진절차

자체 사업계획 수립

(설계비 교부요청)

구→시

계획 타당성 검토

설계비 교부

시→구

공사설계 및

설계심의 요청

구→시

설계심사결과 통보

시→구

⇨

⇨

⇨

설계심사 결과 반영

공사비 배정요구

구→시

공사비 재배정

시→구

시설공사 시행

자치구

준공보고 및 정산

구→시

⇨

⇨

⇨

※ 공원조성계획 변경을 수반하는 설계인 경우 설계완료 전 도시공원위원회 심의 이행

□ 추진 주안점

○ 사업의 취지를 살려 주민설명회 3회 이상 개최(위험수목 정비사업 제외)

□ 주민설명회는 설계착수 및 공사착수 단계, 공사 준공전 각 1회씩 개최

･ 공사 준공전 주민설명회는 준공검사를 겸한 것으로 필히 현장에서 시행

□ 어린이, 인근 주민 등 실제 이용자를 대상으로, 이용자 참석이 수월한 시간 선택

○ 위험수목 정비사업은 위험수목이 누락되지 않도록 필수적으로 홍보

□ 방법) 구청 홈페이지(필수), 현수막, 반상회보 등 2가지 이상

□ 내용) 위험수목 정비사업 일정 및 위험수목을 제보해 달라는 내용

○ 모든 사업은 조기에 집행하여 다음의 시한 이전에 준공

□ 위험수목 정비사업 : 2020. 6. 31.까지(강풍 발생시기 이전)

□ 기타 정비사업     : 2020. 8. 31.까지

□ 추진일정

○ 2020. 1월 : 설계비 교부

○ 2020. 3월 : 설계심의(위험수목 정비사업은 2월)

○ 2020. 4월 : 공사비 교부 및 공사발주

○ 2020. 8월 : 공사준공(위험수목 정비사업은 6월)

○ 2020. 9월 : 준공 및 정산보고

□ 행정사항

○ 2020. 1. 23.(목)까지 설계비 교부 요청(자치구 → 서울시)

□ 구비서류 : 자체 사업계획서 및 기술용역 타당성 심사결과서

○ 2020. 3. 20.(금)까지 설계심의 요청(자치구 → 서울시)

□ 구비서류 : 원가계산서, 설계 설명자료(pt), 설계도, 주민설명회 결과보고서

○ 2020. 3. 31.(화)까지 공사비 교부 요청(자치구 → 서울시)

□ 구비서류 : 심의결과를 반영한 설계서(원가계산서, 설계도)

○ 2020. 9. 29.(화)까지 준공보고

붙임 : 1) 2020. 주민참여예산 사업제안서

2) 준공 정산보고서(양식)