[첨부 2] - ‘17년 주요시책사업분석‧평가사업 작성서식(서식 변경 불가)

			사당배수지 건설공사

(환경수자원위원회, 소관부서 : 상수도사업본부 시설과)

방배가압장에서 직접 급수하는 동작구 사당2동 등 4개동의 고지대에 배수지를 통한 간접급수방식으로 전환하여 누수, 정전 등 사고 시에도 단수 없는 무단수 급수체계를 구축하여 아리수의 안정적 공급 및 시민불편 해소

Ⅰ		사업개요

추진개요

❍ 사업내용

- 공사위치 : 관악구 남부순환로251길 20-1(봉천동 산66-3)

- 사업내용 : 배수지건설 용량 5,000㎥

송배수관 부설 구경 400~500㎜, 연장 1.7㎞

❍ 사업기간

- 2015년 3월~2019년 5월

❍ ‘17년도 사업예산

(단위 : 백만원)

예산과목		2017예산	2016예산	증감	산출내역
계		3,642	2,000	1,642
	시설비	3,431	1,913	1,541	배수지 건설공사비 1식
	감리비	201	84	117	건설사업관리비 1식
	시설부대비	10	3	7	시설부대비 1식

※ 총사업비 : 10,003백만원

- ’15년이전 : 440백만원 ,  ’16년 : 2,000백만원 ,  ’17년 이후 : 7,563백만원

❍ 사전절차 이행여부

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	□	□	□	□	□	□	□
		2014년 4차(9월) 투자심사 결과 : 적정
경상	투자
□	☑

❍ 추진방식

- 직접사업 수행

2017년 추진실적

❍ 세부추진실적(계속사업인 경우 그간 추진실적 포함)

- 지방재정 투자사업 심사 완료 :                     2014.10.13.

- 기본 및 실시설계 용역 착수 :                      2015.05.13.

- 도시계획시설(수도공급설비) 결정 고시 :            2016.03.24.

- 기본 및 실시설계 용역 준공 :                      2016.05.18.

- 사당배수지 건설공사 계약 :                        2016.12.05.

- 주민설명회 개최(2회) 및 공사전 주민 홍보 : 2016.12. ~ 2017.3

※ 배수지 건설 반대 민원 발생

- 본청 갈등조정담당관 갈등조정 요청 :               2017.04.03.

- 민원해결을 위한 조정 진행중(갈등조정담당관 주관) : 2017.09. 현재

❍ 예산집행현황

- ‘17년도(9월 현재)

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․ 변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2017	3,642	-	-	3,642	64	-	3,578	1.8

※ ’17년 차년이월액은 기재하지 않아도 무방, ’17년 집행률은 9월 현재기준

- 최근 3년간 예산집행실적

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이‧전용‧변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2014
2015	444			444	31	263	150	7.0
2016	2,000	263		2263	2052		211	90.7

향후 추진일정(향후계획)

❍ 원활한 사업추진을 위해 갈등조정담당관에서 이해관계자 및 관계기관간 갈등조정을 통한 민원 해소 : ’17.10

❍ 배수지 건설 토공, 가시설공 시행 : ’17.10 ~ 12.

Ⅱ		성과분석

잘된 점

❍ 배수지 건설 반대민원에 대해 적극 대처하기 위하여 지역주민, 자치구, 발주처 등 주요 이해관계인이 참여하는 갈등조정 과정(갈등조정담당관 주관)을 통해 원만한 갈등해결 방안 모색

보완할 점

❍ 사업 시행전 갈등이 예상되는 사업의 경우 원활한 사업추진을 위해 주민의견 수렴 등의 갈등예방 활동 강화 필요