노후 옥내급수관 교체사업 추진 보고

중부수도사업소

최상의「아리수」를 음용 할 수 있는 급수환경 조성을 위해 추진한 노후 옥내급수관 교체사업 추진 현황 보고임

□ 추진목표 및 전망

○ 추진목표 : 3,000가구

○ 추진실적 및 달성률 : 935가구, 31.2% (작성기준 16.7.31)

○ 추진 전망

목표	예상 실적	추진 실적 (7.31 현재)			추진 예정 (8월～12월)			비고
		소계	세대배관	공용배관	소계	세대배관	공용배관
3,000	3,004	935	458	477	2,069	375	1,694

□ 추진 내용

○ 아파트 공용급수관 교체 공문 및 홍보 안내문 발송 (2회) : 20개 단지 6,021가구

○ 자치구 민원실 홍보문 비치 및 홍보 요청 (3회) : 4개 구청 및  68개 주민센터

○ 수도 관련 업체 홍보 요청(2회) : 관내 수도설비 업체 107개 업체

○ 옥내급수관 미 교체된 주택(8,676동)에 대해 공사비 지원안내 발송

□ 추진상 문제점 및 애로사항

○ 지역여건상 상가 및 빌딩 밀집지역으로, 타 사업소에 비해 아파트가

상대적으로 적어 공용배관 교체에 한계가 있음.

○ 대규모의 재개발 대상지역(장위재정비, 한남재정비 등)이 많고, 세입자       주거비중 과다로 옥내배관 교체 관심 부족

□ 대 책

○ 7월말까지 노후 옥내급수관 교체실적은 저조 하였으나,

하반기에는 공용배관 (7개단지 1,690여 가구) 교체 및 예정으로

금년도 목표 달성이 가능할 것으로 예측됨

【 공사중 및 공사예정 공동주택 】

연번	구 별	아파트명	가구수	추진현황
계			1,694
1	용산구	한남동 한성아파트	125	9월 공사완료
2	성북구	정릉동 우성아파트	823	설계 중 (9월 신청)
3	종로구	신영동 완성빌라	72	9월 공사 착공
4	용산구	이촌동 중산시범아파트	228	9월 공사신청
5	용산구	이촌동 왕궁아파트	250	주민 동의중
6	용산구	한강로 삼익아파트	131	주민 동의중
7	중부관내	소규모 연립, 다세대 등	65	공사 및 예정

□ 연차별 교체계획

구분	계	교체 실적	정비계획						멸실 대상
			공용배관	세대배관
				소계	아파트	연 립 다세대	단독	다가구
계	20,152	20,152	10,525	9,627	847	1,783	1,847	5,150	3,870
’15년 이전	11,152	11,152	4,925	6,227	537	1,043	1,397	3,250	1,870
’16년	3,000	3,000	2,000	1,000	100	200	150	550	500
’17년	2,000	2,000	1,200	800	70	180	100	450	500
’18년	2,000	2,000	1,200	800	70	180	100	450	500
’19년	2,000	2,000	1,200	800	70	180	100	450	500