서울특별시 소관사업 추진상황(총괄)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
광역철도	진접선 (당고개~진접)	14.5km	당초 : ‘12 - ’19	당초 : 403,700 (차량기지건설공사비)	서울시 추진상황 : 차량기지건설공사 설계 중
	하남선 (상일~검단산)	7.7km	당초 : ‘11 - ’20	당초 : 357,530	공사착공
광역도로	동부간선도로	서울시 5.45km (6-7차로) 총연장:11.14㎞	당초 : 04.10 - 15.12 변경 : 04.10 - 17.12	당초 : 242,692 변경 : 269,808	지하차도 공사중
	덕송~상계	서울시 0.84km (4차로) 총연장:2.38㎞	당초 : 05.12 - 13.12 변경 : 05.12 - 15.06	당초 : 23,882 변경 : 23,882	터널공사 공사중
	고양시 화전동 ~신사사거리	서울시 1.07km (4차로) 총연장:5.0㎞	당초 : 04.01 - 15.12 변경 : 04.04 – 16.12	당초 : 44,813 변경 : 48,293	터널공사 공사중
	감일~초이	서울시 0.14km (6차로) 총연장:5.2㎞	당초 : 04.04 - 15.12 변경 : 04.04 - 15.12	당초 : 14,749 변경 : 14,749	서울시구간 완료
	사가정~암사	총연장 2.74km (4-6차로)	당초 : 06.04 - 13.12 변경 : 06.04 - 15.12	당초 : 309,350 변경 : 432,159	개통 후 부대공사중
	태릉~구리IC	총연장 4.67km (8차로)	당초 : 12.01 - 19.12 변경 : 12.01 - 19.12	당초 : 117,184 변경 : 117,184	기본계획 용역중
	상도교~호장교간 도로확장	서울시 0.65km (4차로) 총연장:1.47㎞	당초 : 08.07 - 15.12 변경 : 08.07 - 17.12	당초 : 10,000 변경 : 17,116	공사착공 준비중

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
환승 주차장	광나루역 환승주차장	200면	당초 : 15.1. - 17.12. 변경 : 15.7. - 18.12	26,300	타당성용역 추진중
	강동대로역 환승주차장	200면	당초 : 15.1. - 17.12. 변경 : 17.1. - 19.12.	10,016	시기 미도래
	신방화역 환승주차장	200면	당초 : 14.1. - 15.12 변경 : 14.1. - 16.7.	19,218	실시계획 작성고시 후 착공준비중
환승 시설	도봉산역 환승센터	364면	당초 : 08.1. - 13.5.	36,846	사업완료
	사당역 복합환승센터	200면	당초 : 15.1. - 17.12. 변경 : 15.6. - 18.12.	당초 : 48,780 변경 : 미정	서울메트로 사업참여 예정
	개화역 환승센터	399면	당초 : 08.5. - 12.4	36,076	사업완료
	복정역 환승센터	530면	당초 : ′15. - ′18. 변경 : ′16. - ′19.	당초 : 29,900 변경 : 미정	도시철도공사 사업참여 예정
공영 주차장	구리 토평 공영차고지	198면	당초 : ′16.1. -	10,355	시기 미도래
	서울 서초 (우면) 공영차고지	400면	-	43,200	사업보류 (주민반대)
	서울 금천 공영차고지	80면	-	35,000	사업보류 (석수역정거장 건립예정지구)
	서울 구로 공영차고지	100면	-	35,000	사업보류 (주민반대)
	서울 서초 (염곡) 공영차고지	156면	당초 : 10.1. - 17.12. 변경 : 10.1. - 18.12	139,077	2단계 매입비 지급중
	서울 상계 공영차고지	30면	당초 : ′16. -	10,865	시기 미도래

진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사

(담당자 : 박창복, 도시철도계획부, 772-7141)

○ 사업개요

- 위    치 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 일원

- 규    모 : 차량기지 신설 254,666㎡, 인입선 3.07km, 창동차량기지 철거 1식 등

- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2019. 12

- 총사업비 : 4,037억원(설계비 155억, 공사비 3,559억, 감리비 153억,보상비 134억, 부대비 36억 등)

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘10년 09월               : 예비타당성 조사 완료

- ‘12년 12월 ∼ ‘13년 12월 : 타당성조사 및 기본계획

- ‘12년 12월               : 기본계획고시(국토교통부 제2013-806호)

○ 추진현황(정상․부진․시기미도래 등으로 표기)

- 설  계 : 기본 및 실시설계 용역업체 선정 중

- 공  사 : 시기미도래

- 보  상 : 시기미도래

※ 전체 공정율 :  %(계획대비가 아닌 실제 공정율 기재)

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 정상추진

- 향후계획

· `15. 04. : 기본 및 실시설계 계약 및 착수

· `16. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

· `16. 12. : 차량기지건설공사 계약 및 착공

· `19. 12. : 차량기지건설공사 완료

하남선(5호선연장) 건설공사

(담당자 : 신상형, 도시철도계획부, 772-7130)

○ 사업개요

- 위치 및 규모

․ 토목, 건축, 정거장전기, 기계설비 : 상일동 ~ 서울시계

(본선연장 1.099㎞, 정거장 1개소(168m), 차량기지 입출고선 1.365㎞)

․ 궤도, 시스템 등 : 상일동 ~ 하남시 창우동

(연장 7.725㎞, 정거장 5개소, 차량기지 입출고선 시스템)

․ 차량구입, 전동차 및 종합사령실 개량 등

- 사업기간 : 2015년 ～ 2020년

- 총사업비 : 3575.3억원(공사비 3,182.3, 설계비 97.6, 감리비 101.6, 시운전비 등 141.6, 시설부대비 5.2)

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘15년 03월               : 공사계약

- ‘15년 04월               : 공사착공

- ‘15년 04월 ∼ ‘19년 03월 : 공사시행

- ‘16년                    :  궤도시스템분야 공사착수

- ‘20년 12월               : 공사완료

○ 추진현황(정상․부진․시기미도래 등으로 표기)

- ‘14년 04월 08일 : 설계용역 계약 및 착수(’14.4 ~‘15.07. 신성엔지니어링외 7)

- ‘15년 03월 27일 : 공사계약 체결

※ 전체 공정율 :  0%(계획대비가 아닌 실제 공정율 기재)

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 정상추진

- 향후계획

· ‘15년 04월               : 공사착수

· ‘19년 03월               : 공사준공

동부간선도로

(담당자 : 조선휘, 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 동부간선도로 월계1교 ~ 의정부시계

- 규    모 : 도로확장 폭 4 → 6~7차로, 연장 5.45km(총연장 11.14㎞)

- 사업기간 : 2007 ~ 2017.

- 총사업비 : 269,808백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정 :

- ‘15년’01월 ∼  ‘17년’12월 : 공사

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 도봉지하차도 시공중 (공정 : 46%)

- 보  상 : 전체물량대비/2014.12. 31까지( 80%)

※ 전체 공정율 :  43%

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 중랑천 하천 하월 도봉지하차도 시공중으로 갈수기 공사로 절대 공기 부족

- ‘17.12 공사완료

덕송~상계

(담당자 : 윤갑진, 서울시 도로계획과, 02-2133-8088)

○ 사업개요

- 위    치 : 남양주시 별내동 ∼ 서울시 노원구 상계동

- 규    모 : L=0.84km, B=25m(총연장 2.38㎞)

- 사업기간 : 2005 ∼ 2015

- 총사업비 : 23,882백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘07년’04월 ∼  ‘08년’09월 : 기본설계

- ‘08년’10월 ∼  ‘09년’06월 : 타당성 재조사

- ‘07년’04월 ∼  ‘11년’06월 : 실시설계

- ‘11년’06월 ∼  ‘15년’06월 : 공사중

○ 추진현황 : 정상

- 설  계 : 실시설계 완료

- 공  사 : 공정률 74%

○ 토    공 : 흙깍기127,8426㎥,  흙쌓기34,055㎥

○ 구조물공 : 덕송1교 psc beam교 30m

덕송Ramp-A교 psc beam교 30m

덕송Ramp-B교 psc beam교 30m

○ 터 널 공 : 덕능터널 남양주방향 L=1,815m, 서울방향 L=1,850m

- 보  상 : 보상완료

※ 전체 공정율 : 74%

○향후계획

- 2015.04. : 터널내 포장

- 2015.05. : 터널관리동 완료

- 2015.06. : 공사 완료

고양화전~신사

(담당자 : 정재훈, 서울시 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 고양시 덕양구 화전동～서울시 은평구 신사동

- 규    모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 1,07㎞(총연장 5.0㎞)

※ 미개설 터널구간 총 867m(서울 366m, 고양시 501m)

- 사업기간 : 2004.1.1 ~ 2016.12.31

- 총사업비 : 48,293백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진일정

- '04.04.21	: 광역도로 지정(국토부)

- '04.04.21	: 기본계획구상(KOTI)

- '05.09.16	: 예비타당성조사(KDI)

- '05.12.~'07.02.	: 터널구간 기본 및 실시설계 시행

- '11.10.19	: 공사시행 및 관리에 관한 협약 체결

- '12.12.27	: 공사 착공(현대건설)

- '14.05.	: 터널굴착 완료

- '15.04월 현재	: 터널 공사 중

○ 추진현황(정상추진)

- 설  계	: 완료(100%)

- 보  상	: 전체물량대비/2014.12.31까지(100%)

- 공  사	: 개착구간 터널공사 시행 중 (공 정 : 69%)

※ 전체 공정율 : 69%

○향후계획

- '15.05.	: 총사업비 협의조정 요청

- '15.12.	: 터널 개통

- '16.06.	: 기타 부대시설 마무리, 공사 준공예정

감일~초이

(담당자 : 김대희, 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 상일동(천호대로) ~ 하남시 감북동 감북보금자리

- 규    모 : 도로개설 폭 6차로 연장 0.14㎞(총연장 5.20㎞)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2015년

- 총사업비 : 14,749백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘04년 04월 : 광역도로 지정

- ‘07년 12월 : 대도시권 광역교통시행계획 고시(건고시 제2007-658호)

- ‘11년 12월 : 서울신 구간 사업시행 협약체결(서울시↔하남시)

- 보상 및 공사시행 : 하남시, 비용부담 : 서울시가 하남시에 납부

- ‘12년 02월 : 공사 착공(하남시)

- ‘15년 12월 : 준공예정

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료(하남시)

- 공  사 : 서울시 구간 완료(연장 0.14㎞) (공정 : 98%)

- 보  상 : 보상완료

※ 전체 공정율 :  75%(하남시 구간 60%)

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 부진사유 : 해당없음

- 향후계획 : ‘15년 12월 준공

사가정~암사

(담당자 : 김대희, 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 암사동 414-22 ~ 구리시 아천동 58-1

- 규    모 : 도로개설 폭 4~6차로 연장 2.74㎞(서울시 2.1㎞, 구리시 0.64㎞)

- 사업기간 : 2001년 ~ 2015년

- 총사업비 : 432,159백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘01년 01월 : 사가정길~암사동간 도로건설 추진 검토(시장방침)

- ‘04년 04월 : 제2차 수도권 광역교통5개년계획 계속사업으로 지정

- ‘06년 04월 : 보상 및 공사착공

- ‘14년 11월 : 개통

- ‘15년 12월 : 준공예정

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료(‘05. 9)

- 공  사 : 교량 및 연결도로 완료(연장 2.74㎞) 후 개통(‘04. 11) (공정 : 97%)

- 보  상 : 전체물량대비/2014.12. 31까지( 97%)

※ 전체 공정율 :  97%

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 부진사유 : 해당없음

- 향후계획 : ‘15년 12월 준공

태릉~구리IC

(담당자 : 정재훈, 서울시 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 중랑구 묵동 ~ 경기도 구리시 인창동

- 규    모 : 폭 6차로→8차로, 연장 4.67㎞(총연장 4.67㎞)

※ 총 연장 중 「구리~포천 민자고속도로」에서 중랑IC 2㎞구간 공사시행

- 사업기간 : 2012~2019

- 총사업비 : 117,184백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진일정

- '07.12.31	: 광역도로 지정(국토부)

- '09.03.~'09.07.	: KDI 예비타당성조사(기획재정부)

- '09.06.~'14.	: 사업시행방안 회의(국토해양부, 서울시, 구리시)

- '14.08.19.	: 국비보조금 서울시 교부(3억원)

- '14.12.22	: 기본계획 용역 착수

- '15.04월 현재	: 기본계획 용역 수행 중

○ 추진현황(정상추진)

- 설  계	: 기본계획 시행 중으로 공사비 및 재원분담계획을 수립하여 구리시와 사업비분담 지속 협의(설계 공 정 : 45%)

- 보  상	: 현재 설계 중 ( 0%)

- 공  사	: 현재 설계 중 (공 정 : 0%)

※ 전체 공정율 : 10%

○향후계획

- '15.06.	: 기본계획 용역 준공예정

- '16.~'17.	: 기본 및 실시설계 시행 예정

상도교~호장교

(담당자 : 조선휘, 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 도봉구 도봉동 4번지 ~ 의정부시계간

- 규    모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 0.65㎞(총연장 1.47㎞)

서울시구간 연장 650m (1단계 완료 280m, 2단계 추진 370m)

- 사업기간 : 2008. 7 ~ 2017. 12

- 총사업비 : 17,116백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정 :

- ‘15년’ 1월 ∼  ‘15년’ 3월 : 도시계획시설(도로) 변경 결정

- ‘15년’ 3월 ∼  ‘15년’ 4월 : 실시계획인가

- ‘15년’ 4월 ∼  ‘15년’12월 : 보상 및 개발제한구역훼손부담금 납부

○ 추진현황(시기미도래)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 착공준비중 (공 정 :  -  %)

- 보  상 : 전체물량대비/2014.12. 31까지( - %)

※ 전체 공정율 :  -    %

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 향후계획

‘15년’12월 : 보상 및 개발제한구역훼손부담금 납부

광나루역 환승주차장

담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 광진구 광장동 307-3 일대

- 규    모 : 지하2층, 연면적 6,800㎡, 주차면 200면

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

- 총사업비 : 26,300백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘15년7월∼ ‘16년8월 : 중기지방재정계획에 포함, 타당성 용역, 투자심사, 설계용역

- ‘16년8월∼ ‘18년12월 : 공사시행

○ 추진현황 및 향후계획

- 광나루역 환승주차장은 체육공원 부지내 지하에 주차장 중복결정(4,913㎡)되어 있으며, 그동안 사유지 보상문제로 사업추진이 지연되다가 ′14.5. 전체 사유지를 매입함으써 보상문제 해결됨

- 2009년 실시계획 작성고시후 5년이 경과되었으므로, 향후 투자심사(재심사) 및 여건변화를 반영한 환승주차장 수요분석 및 기본설계 용역 시행 필요

강동대로역 환승주차장

담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 송파구 방이동 433-1번지 일대

- 규    모 : 연면적 5,800㎡, 주차면 200면

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

- 총사업비 : 10,016백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진현황 및 향후계획

- 강동대로역 환승주차장은 지하철 9호선 건설에 따른 중앙교통영향심의위원회(2002.9.6.) 의결사항으로서, ′07년 12월 대도시권 광역교통시행계획에 반영됨

- 올해 4월 지하철9호선 2단계 사업(종합운동장역까지)이 마무리 되었고, 강동대로역은 3단계 구간에 포함되어 당해 사업과 연계추진

신방화역 환승주차장

담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 강서구 방화동 217-96일대(마곡지구 주차장용지 I2)

- 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 9,563㎡, 주차면 200면

- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

- 총사업비 : 19,218백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘13년7월∼ ‘13년12월 : 건립계획 방침수립, 투자심사, 대행위탁계약체결(SH공사)

- ‘14년1월∼ ‘14년 7월 : 기본설계 완료, 토지매입계약체결(SH공사)

- ‘14년11월∼ ‘15년4월 : 실시계획작성 고시, 실시설계, 계약발주 및 착공준비중

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 기본설계 완료 및 실시설계 진행중

- 공  사 : 계약 발주 및 착공준비중

- 보  상 : 85%(계약금․중도금) 지급완료/′15.4.30.까지 잔금(15%) 예정

○ 향후계획

- ‘16년7월 완공 목표로 추진중

도봉산역 환승센터

담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉동 288-19일대

- 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 16,597㎡, 주차면 364면

- 사업기간 : 2008년 ~ 2013년

- 총사업비 : 36,846백만원

○ 연차별 투자실적 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진 실적(정상)

- ‘08년4월∼ ‘10년1월 : 건립계획 방침수립, 기본 및 실시설계용역, GB관리계획 승인

- ‘10년1월∼ ‘10년11월 : 공사계약 및 착공, 인허가 협의 완료

- ‘10년11월∼ ‘13년6월 : 공사시행, 준공 및 시운전

○ 참고사항

- ‘13년7월 개관

사당역 복합환승센터

담당자 : 김병곤(교통정책과, 2133-2246)

임종민(주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 서초구 방배동 507-1 일대

- 규    모 : 대지면적 17,777㎡, 주차면수 200면

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

- 총사업비 : 48,780백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

※서울메트로의 사업참여 규모에 따라 총사업비 및 환승센터 규모 변경 예정

○ 추진(예정) 일정

- ‘15년7월∼‘15년12월 : 서울메트로 사업참여 규모 확정, 국토부 복합환승센터 지정요청

- ‘16년1월∼‘16년12월 : 기본 및 실시설계, 관련 인허가 절차 이행

- ‘17년1월∼‘18년12월 : 공사 발주 및 공사시행

○ 추진현황 및 향후계획

- 사당역 복합환승센터는 사당이수지구단위계획상 최고높이 100m, 최대 용적률 930% 규모로 건축할 수 있는 부지로서, 현재 서울메트로에서 지구단위계획(특별계획구역) 및 건축계획 수립을 위한 용역 추진중이며, 향후 국토교통부에 복합환승센터 지정 요청 등 정상적으로 사업추진 예정임

개화역 환승센터

담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 강서구 개화동 490일대

- 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 16,788㎡, 주차면수 399면

- 사업기간 : 2008년 ~ 2012년

- 총사업비 : 36,076백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진 실적(정상)

- ‘08년5월∼ ‘09년10월 : 건립계획 방침수립, 투자심사, 기본 및 실시설계용역

- ‘09년11월∼‘10년1월 : GB관리계획 승인, 공사계약 및 착공

- ‘10년 2월∼ ‘12년 4월 : 공사시행, 준공 및 시운전

○ 참고사항

- 2012.4월 개관

복정역 복합환승센터

담당자 : 최조웅(교통정책과, 2133-2238)

임종민(주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 송파구 장지동 600-2 일대(위례택지지구내 주차장용지)

- 규    모 : 대지면적 18,459㎡, 주차면수 530면

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

- 총사업비 : 29,900백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

※ 도시철도공사의 사업참여 규모에 따라 총사업비 및 환승센터 규모 변경 예정

○ 추진(예정) 일정

- ‘08년 3월∼ ‘10년10월 : 위례신도시 광역교통개선대책 수립(국토부)

복합환승센터 시범사업(사당․복정) 참여계획 수립(시)

- ‘14년 6월∼ ‘14년 9월 : 도시철도공사의 사업참여 요청 및 타당성조사 지시

- ‘14년10월∼ ‘15년10월 : 도시철도공사의 예비 타당성 용역 추진

- ‘15년11월∼ ‘16년10월 : 기본 및 실시설계, 관련 인허가 절차 이행

- ‘16년11월∼ ‘18년12월 : 공사시행 및 준공

○ 추진현황 및 향후계획

- 복정역 복합환승센터는 현재 도시철도공사의 사업참여에 따른 타당성 용역 추진중이고, 그 결과에 따라 기본 및 실시설계 추진 예정임

구리 토평 공영차고지

담당자 : 박형서, 주차계획과, 2133-2374

○ 사업개요

- 위    치 : 경기도 구리시 토평동 465-39일원

- 규    모 : 대지면적 9,954㎡, 차고지 198면

- 사업기간 : 2016년 ~

- 총사업비 : 10,355백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진현황 및 향후계획

- 향후 차고지 매입계획에 따라 추진 예정

서울 우면 공영차고지

담당자 : 박형서, 주차계획과, 2133-2374

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 서초구 우면동 547일대

- 규    모 : 차고지 400면

- 사업기간 : 2012년 ~

- 총사업비 : 43,200백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업보류 : 주민 반대로 도시계획시설 입안 보류

서울 금천 공영차고지

담당자 : 박형서, 주차계획과, 2133-2374

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 금천구 시흥동 980일대

- 규    모 : 대지면적 8,900㎡, 차고지 80면

- 사업기간 : 2012년 ~

- 총사업비 : 35,000백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업보류 : 신안산선 석수영정거장 건립 예정지구

서울 구로 공영차고지

담당자 : 박형서, 주차계획과, 2133-2374

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 구로구 천왕동 6-2

- 규    모 : 대지면적 11,000㎡, 차고지 100면

- 사업기간 : 2012년 ~

- 총사업비 : 35,000백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업보류 : 주민반대로 도시계획시설 입안철회

서울 염곡 공영차고지

담당자 : 박형서, 주차계획과, 2133-2374

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 서초구 염곡동 300 일대

- 규    모 : 차고지 156면

- 사업기간 : 2010년 ~ 2018년

- 총사업비 : 139,077백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- ‘15년 8월 : 중기지방재정계획 포함 및 투자심사 등

- ‘16년 1월∼ ‘18년 12월 : 매입비 지급

○ 추진현황 및 향후계획

- 2009년 ‘공영차고지 조성현황 및 추가조성계획’에 따라 염곡동 300 일대(면적 16,204㎡)를 연차적으로 매입하여 공영차고지를 조성(총 3단계)하는 계획으로 현재는 2단계를 추진(잔금 지급)중에 있으며 나머지 3단계도 추진계획에 있음

서울 상계 공영차고지

담당자 : 박형서, 주차계획과, 2133-2374

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 노원구 상계동 690

- 규    모 : 대지면적 2,892㎡, 차고지 30면

- 사업기간 : 2016년 ~

- 총사업비 : 10,865백만원

○ 연차별 투자계획 ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진현황 및 향후계획

- 시기미도래 : 향후 차고지 매입계획에 따라 추진 예정