작업 계획서(D200분기 연결공사)

□ 공사명 : 화곡배수지 배수관망 형성공사

◦ 위    치 : 강서구 화곡동 56-524

◦ 공사 개요 :    1차) 연결공사 1개소 (D200/200 )

2차) 연결공사 1개소 (D250/200)

3차) S게이트밸브 설치공사 1개소 (D200)

1) 1차 연결공사

- 일     시 : 2016. 06.25(토) 09:00 ~ 18:00 (9시간)

- 위     치 : 화곡배수지 앞

- 공사 내용 : 200/200연결공사 - 화곡배수지 앞

- 단수 여부 : ‘단수없음’

2) 2차 연결공사

- 일     시 : 2016. 06.25(토) 22:00 ~ 익일06:00 (8시간)

- 위     치 : 화곡동 56-524

- 공사 내용 : 250/200연결공사

- 단수 여부 : ‘단수없음’

3) S게이트밸브 설치공사

- 일     시 : 2016. 06.27(월) 09:00 ~ 18:00 (9시간)

- 위     치 : 화곡배수지 앞

- 공사 내용 :  200mm S게이트밸브 설치공사

- 단수 여부 : ‘단수없음’

	① 배관 ② 배관
위치도	공사상세도

1

2

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
안전시설설치 및 터파기	3시간
부단수기계 장착	1시간
천 공	1시간
배관	1시간
세척 및 통수	1시간	공사 시행전 사전 접합
되메우기(다짐)	1시간
현장정리 및 청소	1시간
합 계	8시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	양수기	5HP	〃	2	〃
3	람마기	80KG	〃	1	〃
4	백호	0.2	〃	1	〃
5	관절단기		〃	2	〃
6					〃

※ 공통사항

□ 인력확보 계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부 (용접공)
계	7명
소장	심규동	경기 포천 이동면 기산리 708	*******1******
배관공	한일현	서울시 금천구 시흥동 843-6	*******1******
배관공	이석희	인천시 계양구 작전동 580-1	*******1******
배관공	이종만	서울시 양천구 곰달래로9길 58	*******1******
배관공	홍사선	경기 화성 송산면 육일리 40	*******1******
배관공
배관공
특별인부
보통인부

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

◦ 관계기관 공문발송 및 승인 현황

- 굴착허가 : 강서구청

- 교통협의 : 강서경찰서

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독자 : 시설관리공단 권욱천 담당자 : 강서수도사업소 오승미	************* 02-3146-4009
업 체	회 사 명 : 한신포장건설 대표 김동원 현장소장 : 금재기	*************

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

◦ 공사안내간판

◦ 휀스, 유도등

◦ 교통안내원 배치 등

※ 교통협의 내용에 따라 시행

□ 기타사항 : 홍보계획

◦ 공사 안내문 부착 및 배부 및 단수 세대 : 06월 20일 공사안내문 부착

※ 물사용이 없는 시간대, 즉 야간 공사를 시행하여 민원 최소화