“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”
		서울특별시시설관리공단
수신	서울특별시강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	작업기한연기요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리공단에서 공사감독 수행중인『2014년 강남구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』의 작업지시(소화전보수6)에 대한 작업기한연기을 아래과 같이 요청합니다.

가. 작업지시：소화전보수6(대치동 935-11)

나. 공    종：소화전 철개 교체 재지시(소방서 요청사항)

다. 작업기한：당 초－2014. 8. 6~ 8. 18

변 경－2014. 8. 6~ 8. 26

라. 연기사유：잦은우천과 교황방문에 따른 작업일수 부족

마. 귀책소재：발주청(지체상금 미부과).  끝.

							서울특별시시설관리공단 이사장
										팀장
협조자
시행			공사감독2처-13491									(	2014.08.18.					)		접수			급수운영과-16933								(	2014.8.19.					)
우	133-050					서울시 성동구 마장동 청계천로 540															/			홈페이지
전화		02-2290-6028						/전송			02-2290-6033					/	weejung2005@hanmail.net												/	공개