작 업 요 청 서

지시번호 : 제 2015 - 1차

공 사 명 : 2015년도 도로시설물 일상유지보수공사(강서)

계 약 자 : (주)메트로종합건설, 탑건설(주)

지시일자 : 2015. 04. 13

작업기간 : 2015. 04. 14 ~ 2015. 05. 29

작업근거 : ‘15년 해빙기 안전점검 및 상반기 정기점검 결과 지시

지시내용 : 목동교외 24개 시설물에 대하여 다음과 같이 작업 지시                     하니 작업완료 후 전․중․후 사진 첨부하여  완료보고서를 제출                 하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 :  238,260천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위치 및 내용	작업방법(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	목동교	P3 도장부 박락	그라인딩 (박락도장제거)	20.3	㎡	○
2		P3 수위표 정비	수위표 제작 설치(함석)	1	개	○
3		P3 교각하부 철근노출	철근노출단면보수 30mm	0.4	㎡	○		EG
4	개봉철도고가	S1 슬라브하면 보수부 백태, 박리	그라인딩 (보수재 제거)	4.0	㎡	○
5	오류IC	A2 슬래브 하면누수	그라인딩(백태제거)	0.4	㎡	○
6	시흥IC 보도부측	방호책 연석부(외측)열화	단면보수 10mm	169.68	㎡		○	리플레쉬
		방호책 연석부(차도측)열화	단면보수 20mm	103.86	㎡	○
7
8		A2 연석부 철근노출	철근노출 단면보수 30mm	0.3	㎡	○
9	등촌지하차도	타일탈락	타일보수	3.35	㎡	○
10	개봉교	A1 교명주 틈발생	손상물 철거후 강판설치	1	식	○
11		A2 슬라브하면박리	표면보수	8.82	㎡	○
12	화곡고가차도	주형하부 차량추돌	높이제한표지판 설치	1	개소	○
13	행주1교	주형하부 차량추돌	높이제한표지판 설치	2	개소	○
14	오목교	오목교 측면램프 슬래브	철근노출 단면보수 30mm	1	㎡	○
15	가리봉철도고가	P3 신축이음부 파손	신축이음후타재 보수	22	m		○
16	공단IC	램프2 초입 포장파손	소규모도로긴급복구	20	㎡		○
17		하부교각 배수구 설치오류	배수파이프 정비	1	식	○
18	구로역지하차도	보도부 점자블록 파손	점자블록 재설치	0.27	㎡	○
19	개화IC	날개벽 측면 파손	단면보수 10mm	1.32	㎡	○
20	도림천좌안복개	P136 위치표지판 이탈	표지판 정비	1	식	○
21		교각부 단면파손	단면보수 20mm	0.16	㎡	○
22	도림천하류복개	바닥 수로 덮개 망실, 손상	배수덮개 재설치	1	식	○
23	화곡터널	배수구 덮개 망실	배수덮개 재설치	1	개소	○
24		목동방향출구 누수	물끊기공설치	15	m	○
25	가마산고가차도	A2 캔틸레버부 균열, 박리	단면보수 10mm	0.56	㎡	○
26	개화지하차도	상하류 터널 시, 종점부 보수부 박락	단면보수 10mm	4.4	㎡	○
27	외발산지하차도	상부 대리석 파손	대리석 재설치	0.14	㎡	○
28	가마산지하차도	보도상부 누수, 백태	그라인딩, 배수팩커설치	1	식	○
29	구로지하차도	부천방향 초입 후타재 파손	신축이음후타재 보수	1	m	○
30	오목지하차도	상부 슬래브 누수, 백태	습식균열보수	8	m	○

연번	시설물명	위치 및 내용	작업방법(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
31	오금지하차도	광명방향 그레이팅 망실	그레이팅 재설치	6	ea	○
32	염창IC하부복개	복개 슬래브 상부 열화	표면보수	676.5	㎡	○		리플레쉬
33		조인트 하부 누수, 백태	물끊기공 설치	1	식	○
34	집수정준설	외발산지하차도	집수정 준설	7.5	㎥		○
		오금지하차도	"	7.88	㎥		○
		구로지하차도	"	45.2	㎥		○
		공항입구지하차도	"	66.12	㎥		○
		등촌지하차도	"	10.4	㎥		○
		오목지하차도	"	6.4	㎥		○
		신도림지하차도	"	107.64	㎥		○
		가마산지하차도	"	60.09	㎥		○
		국회앞지하차도	"	32.1	㎥		○
		고척2지하차도	"	8.55	㎥		○
		구로역지하차도	"	62.6	㎥		○
		개화지하차도	"	26.56	㎥		○

공사방법 적용

* 목동교

- 표면도장 박락부 : 하천구역으로 침수에 의한 손상으로 도장 불필요

- 수위표 설치 : 도장박락으로 수위표 훼손으로 도금판으로 제작 설치

- 철근노출부 : 파손, 재료분리에 의한 철근노출로 일반공법 적용

* 개봉철도고가

- 슬라브하면 보수부 박락 : 누수가 발생하는 지역으로 보수재에 의한 손상이 발생하므로  누수부위보수재를 제거(그라인딩)하고 누수균열부에 누수유도 팩커(천공5cm-팩커설치)를 설치하여 누수유도, 차후 상부 방수보수후 표면보수 실시

* 오류IC

- 슬라브하면 누수 백태 : 누수로 인한 백태 발생부로 백태 제거후 누수유도 팩커 설치

* 시흥 IC

- 기존 연석부 폴리우레아 도막재 시공으로 하부에서 침투된 습기로 인하여 콘크리트 열화가 진행된 상태로 손상상태에 따라 외측은 10mm 단면복구, 차도측은 20mm 단면복구를 시행하며, 보수시 열화깊이에 따라 차등적용토록함

* 등촌지하차도

- 탈락된 타일 재시공, 시공시 추가 불량부 확인하여 시공

* 개봉교

- 슬라브 하면 손상부에 대하여 전면 표면보수를 시행하고 작업중 그라인딩으로 오염부위제거후 나타나는 철근노출부에 대하여는 단면복구히행

- 교대측면부의 불안정한 구조물을 철거후 틈새에 강판을 설치하여 낙하물 예방

* 화곡고가차도

- 교대하부 주형부에 차량추돌이 빈번하므로 주형부에서 5~10M 떨어진지점에 통과제한높이시설 설치, 설치시 통과높이를 재 측정하여 설치토록함.

* 행주1교

- 교대하부 주형부에 차량추돌이 빈번하므로 주형부에서 5~10M 떨어진지점에 통과제한높이시설 설치, 설치시 통과높이를 재 측정하여 설치토록함.

* 오목교

- 일반적인 단면손상이므로 단면복구 시행.

* 가리봉철도고가

- 후타재에 균열이 다수발생하여 차후 파손이 우려되므로 금차 파손부 보수시 전폭에 대하여 후타재 보수시행

* 공단IC

- 램프초입부 포장파손부에 대하여 방수, 포장을 실시

- 배수구 오류부는 하단에서 50cm를 절단하고 엘보를 설치

* 개화IC

- 균열 및 파손된 보수부를 철거하고 기존바탕면 상태에 따라 보수두께 결정토록 함

* 도림천 좌안복개

- 교각부 단면손실부는 충돌등 기타 원인에 의한 파손으로 보수부위를 최대한 적게 하여 시공토록함

* 도림천하류복개

- 배수구 덮개는 현재 철재로 녹등이 발생하여 미관상 좋지 않으므로 녹이슬지 않는 재질로 제작 설치토록함.

* 화곡터널

- 배수구 덮개 제작 재설치

- 터널출구부에 누수부에 대하여 반원구간에 물끊기공을 설치하여 측면으로 떨어지도록 유도

* 가마산고가차도

- 누수 및 균열부에 흡수 팽창으로 인한 파손부이므로 공사시 손상깊이을 확인하여 보수토록 하며, 지속적으로 누수가 발생하는 부위이므로 배수 팩커를 설치하여 누수 유도

* 개화지하차도

- 터널과 옹벽간 접속지점으로 우수유입 및 신축이동이 발생할수 있으므로 간격을 유동적으로 하여 기존 보수재를 완전 철거하고 단면보수 재시행

* 오목지하차도

- 균열부 누수로 인한 백태로 방향성이 없기에 균열보수를 시행하고 팩커를 설치하여 배수유도

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록

할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과