작 업 일 보

현장대리인	건설 사업관리자	책임건설 사업관리자
000		000
19.09.30		19.09.30

▷ 현  장 :

0000 공사현장

▷ 일  자 :

2019년 09월30일

▷ 날  씨 :

맑음 (최저 : 16℃ ∼ 최고 : 27℃)

서울특별시 도시기반시설본부

서울특별시 도시기반시설본부

1.공정 진도율

전일까지			금일			누계
목표	실적	대비(%)	목표	실적	대비(%)	목표	실적	대비(%)
70.436	72.343	102.707	0.039	0.022	58.196	70.475	72.366	102.683

2.공종별 진도율

공종명	단위	설계수량	전일까지			금일			누계
			목표	실적	대(%)	목표	실적	대비(%)	목표	실적	대(%)
배수공-터파기,되메우기,다짐		0	0.03116	0.03102	99.55087	0.00012	0.00026	215.12411	0.03129	0.03129	100.00216

3.작업내용

전일작업사항	금일작업사항
◎ 00지하차도 - 000사거리 주형보 설치 - BOX 15, 16BL 되메우기	◎ 00지하차도 - 00교 사거리 주형보 및 복공판 설치 (반장1, 가시설7, 보인4) - BOX 20BL 동바리 보강 및 슬라브 거푸집 설치 (반장1, 목수13)

4.자재투입현황

자재명		단위	전일까지	금일(투입예정)	누계

5.인원투입현황

명칭		단위	전일까지	금일(투입예정)	누계
1003	형틀목공	인	51917	13	51930

6.장비투입현황

장비명		규격	전일까지	금일(투입예정)	누계
02010100	굴삭기(유압식백호)	0.6~1.0㎥	20938.5	9	20947.5
06020150	덤프트럭	15톤,24톤	7516.3	4	7520.3

7.특기사항

내          용

예시)

◯ 감리원 7·4제 시행

- 김00 감리원 : 7시 출근 4시 퇴근

- 박00 감리원 : 8시 출근 5시 퇴근