작   업   지   시   서

(도림고가 정밀점검 지적사항 보수)

□ 수    신 : 2015년 도로시설물일상유지보수공사(연간단가)-남부 현장대리인

□ 작업지시번호 및 지시일자 : 도로시설물 2015-13차(2015.07.24)

□ 작업지시근거 : 정밀점검 지적사항 보수 (시설물명 : 도림고가)

□ 작업기간     : 2015. 07. 24 ~ 2015. 09. 25

□ 개략 공사비  : 추후정산

□ 작업지시내역

시설물명	공 종	위치	규 모	작업방법(공법)	작업조건		비고
					주간	야간
도림고가	아스팔트포장공	램프~P9	46a	절삭재포장		○
	교면방수공	A1~P9	3,444㎡	도막식 교면방수		○
	신축이음장치공	A1~P9	87m	신축이음장치교체		○
	상판보수공	A1~P9	10㎡	교량상판보수		○
	콘크리트 보수공	P8~P11	257㎡	표면 및 단면보수		○
	교통안전시설공	A1~P9	1식	표지병,시선유도봉등		○

□ 추정 공사비 : 602,800천원

공 종	규 격	수 량	단위	금 액(천원)	비고
계				602,800
아스팔트포장공	절삭후 덧씌우기, 차선도색 등	46	a	105,687
교면방수공	도막식	3,444	㎡	154,729
신축이음보수공	#80, 방호벽차수조인트 등	87	m	106,636
상판보수공	T=30㎜	10	㎡	2,268
콘크리트보수공	표면보수 및 단면보수 등	257	㎡	27,158
가시설공	강관비계, 크레인, 철거 등	1	식	4,993
교통안전시설공	표지병,시선유도봉,사인보드 등	1	식	6,039
소 계				407,510
제 경 비				195,290

□ 조치사항

○ 추정공사비에 미반영 및 신규공종, 변경된 공종은 완료보고 시 포함하여 제출 할 것

○ 시설물 보수공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전협의 및 인·허가를 득하여 시행할 것

○ 공사완료 보고시 동일위치에서 보수 사진을 촬영후 첨부할 것

○ 보수공사 시행중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물보수 알림표시를 설치할 것

○ 순찰중 긴급사항 발생시 선조치 후 보고 할 것.  끝