작   업   지   시   서

시설물담당 : 시설6급 김종범(인)

□ 공 사 명 : 2016 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)-동부

□ 수    신 : 오에스유지관리(주) 대표

□ 작업지시번호 : 2016 – 20차

□ 작업교량 : 매봉터널

□ 작업기간 : 2016년 11월 18일 ~ 2016년 12월 9일

□ 작업지시내역 (공사비 : 92,250천원)

연번	위치 및 공종		수량	규격	작업방법 (공법)	작업조건		단가 (천원)	금액 (천원)	비고
						주간	야간
1	매봉터널	아스팔트누수	12a		절삭후재포장		ㅇ		10,204
		아스팔트파손	175.6㎡	T=5cm	인력식포장복구		ㅇ		5,333
		균열보수	8.4m	에폭시,CW=0.3mm	균열보수		ㅇ		227
		표면보수	377㎡		표면보수		ㅇ		15,990
		단면보수	4.5㎡	T=10mm,벽체	단면보수		ㅇ		424
		상판보수	80.1㎡	T=15cm,	상판보수		ㅇ		15,080
		실링보수	72m		실링보수		ㅇ		1,699
		사면 및 배수로정비	1식		청소,준설		ㅇ		1,674
		교통 및 안전시설외	1식				ㅇ		10756
	순공사비								61,387
	총공사비								92,250

※ 관급자재비(아스콘) 및 폐기물처리비: 12,942,000원

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고,

교통통제가 필요한 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전․ 중․ 후사진을 첨부할 것

○ 신규 공종 발송시 감독청에 즉시 보고하여 지시에 따를 것.

○ 공사완료 후 반드시 시설물담당자에게 완료보고서를 경유하여 제출할 것.

위 치 도

매 봉 터 널

사 진 대 지

시점부 갱문(하행선)균열	시점부 갱문(상행선)균열

시점부 갱문(하행선)토사퇴적	상행선 도로부(망상균열)

상행선 도로부(망상균열)	하행선 도로부(아스팔트패임)