작  업  지  시  서(변경)

시설물담당 : 시설6급 정병윤(인)

□ 공 사 명 : 2014년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)-동부

□ 수    신 : 이안종합건설 주식회사 귀하

□ 작업지시번호 : 2014 - 3차

□ 작업교량 : 가락지하차도

□ 작업기간 :  2014년 08월 26일 ~ 2014년 10월 20일

□ 작업지시 변경 내역

연번	위치 및 공종		수량	규격	작업방법 (공법)	작업조건		단가 (천원)	금액 (천원)	비고
						주간	야간
1	BOX부,옹벽부 양방향	들뜸 및 박락	80.0㎡	t=1mm (벽체)	표면보수 레미가드	○		40	3,200	당초
2		들뜸 및 박락	80.0㎡	t=1mm (벽체)	표면보수 레미가드		○	59	4,720	변경
	당초 총공사비								4,800	당초
	변경 총공사비								7,080	변경

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고,

교통통제가 필요한 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전․ 중․ 후사진을 첨부할 것

○ 신규 공종 발송시 감독청에 즉시 보고하여 지시에 따를 것.

○ 공사완료 후 반드시 시설물담당자에게 완료보고서를 경유하여 제출할 것.

위 치 도

사  진  대  지

가락방향 BOX 시점부 들뜸 및 박락	가락방향 옹벽부 0~180m, 수서IC 옹벽부 180~300m지점 들뜸 및 박락