작 업 지 시 서

□ 지시번호 : 2014 - 3

□ 공 사 명 : 2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)  대표 정연용

□ 지시일자 : 2014. 07. 16

□ 작업기간 : 2014. 07. 17 ~ 2014. 09. 30

□ 내   용 : 청계천 살곶이공원 횡단차집관로 건너편(청계3구역) 매몰

되어 있는 맨홀3개소 인상 및 맨홀3개소 신설과 우이천

차집관로 상부(H=0.1m), 측면 B=0.15m 및 누수·세굴 연장

(L=640m,H=0.75~0.85m*W=1.1~2.8m)과 맨홀, 우수토실 등

보수·보강 시설공사를 작업지시하니 기한내 완료하고, 조치

결과를 2014.09.30.까지 제출하시기 바랍니다.

□ 작업지시내역
연 번	위 치	현 황	공사개요	개략공사비 (천원)
	계			202,700
1	청계천 (좌안)	준설 방법 변경에 따른 맨홀 인상 3개소 및 신설 3개소	가로3.0*세로3.0* 높이(1.5m~3m)*6개	156,800
2	우이천 (우안)	관로 상판 보호콘크리트 부식 및 하부 세굴·누수 보강작업	ㆍ상판 L=640*0.1 ㆍ하부 세굴 및누수보강 - H=0.75*W=2.8*L=70 - H=0.85*W=1.6*L=340 - H=0.85*W=1.1*L=230	45,900

※ 작업지시 물량은 예정물량으로 작업완료 후 정산

□ 기타 지시사항

○ 공사시방서 및 공사계약조건의 제규정을 준수할 것.

○ 현장의 차량 진․출입시 교통안전요원을 배치하고 안전표지판 등을 설치하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것.

○ 자전거 도로 작업시 보행자 및 자전거 이용 시민이 불편하지 않도록

안전사고에 유의할 것.

○ 작업자는 사전에 지시된 안전관리요령을 준수하여 규정된 복장과 안전모, 안전화 등을 착용하고 작업할 것.

○ 일기예보를 주시하여 강우시 작업 중지후 청천시 작업을 재개할 것

따로붙임 : 현황사진 및 설계도서 각 1부.  끝