문서번호	시설관리과-1663
결재일자	2014.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관	시설관리과장
협 조

『잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사』

제3차 설계변경 검토보고

2014. 02. 12.

체육시설관리사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

『잠실실내체육관 우수관 등 정비공사』

제3차 설계변경 검토 보고

『잠실실내체육관 우수관 등 정비공사』 시행과 관련하여 일부 공사범위 조정 및 공종 변경사항에 대하여 검토 보고합니다.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 잠실 실내체육관 우수관 등 정비공사

□ 공사기간 : 2013. 12. 03 ~ 2014. 02. 15

□ 시 공 자 : ㈜한기엔지니어링 대표 송 유 석

□ 도 급 비 : 355,350,000원

□ 주요 공사내용(당초 설계내용)

- 실내체육관 우수관 36개소 신설(스테인레스 D:200mm)

- 석면함유 천정텍스 및 바닥 비닐계타일 철거․설치(운영과사무실 일부, 관리실, 노조사무실, 삼성운영사무실, 노조사무실 등)

2		변경 사항검토

(단위 : 천원)

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견 (설계자 의견)	소요예산 (개산액)
∘ 우수관 설치	∘당초 36개소에서 32개소로 4개소를 설치제외 하였으나, 청사 출입구 2개소 및 실내체육과 매표소 2개소 등은 미관을 저해하는 것으로 판단되어 4개소에 대하여 추가 설치제외 검토	∘우수관 32개소 → 28개소로 변경설치 ∘ 금회 설치제외 되는 4개소는 (1개소당 총 32.385m) 실내는 이미 설치가 완료되었으나, 실외 13.085m는 설치제외로 감액처리 (설계자 의견 : 당초 우수관 34개소에서 28개소 감소할 경우 우수량 처리에 지장 없음)	감7,259

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견 (설계자 의견)	소요예산 (개산액)
∘ 우수관 설치	∘추가 설치제외된 구간의 지붕구배를 조정하여 인근 우수관으로 유도하여 배수 (규사우레탄 사용 구배조정)	∘설치제외 구간의 지붕 56㎡에 규사우레탄으로 도포하여 구배조정 및 방수공사 진행	증6,561
∘ 철거공사비	∘기초부분 바닥하부 철거공사비 4개소 제외	∘우수관 하단부 우수맨홀 그레이팅에 배수를 위한 기둥의 기초부분 4개소 철거제외로 인한 감액	감377
∘ 제경비 (퇴직공제부금비)	∘경비중 퇴직공제부금은 제2차 설계변경에서 제외하였으나 실제납부(영수증 제출)	∘퇴직공제부금 1,075천원 반영	증1,075
합 계			변경없음

□ 사업비 변경 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	계약금액	제1차 설계변경 ‘14. 1. 2 시행	제2차 설계변경	금회 설계변경	비 고
잠실실내체육관 우수관등 정비공사	도 급 금 액	350,720	355,350	355,220	355,220
	이 전 비 (냉․난방기 이전 등)	7,952	7,952	7,952	7,952
	총 공사금액	358,672	363,302	363,172	363,172

3		조 치 의 견

□ 위와 같이 공사내용을 변경 시행하고 설계변경(제3차) 처리하고자 함