잠실종합운동장 주경기장 리모델링

□ 사업개요

○ 위    치 : 송파구 올림픽로 25 (잠실종합운동장 내)

○ 규    모 : 주경기장 리모델링 (134,695㎡), 보조경기장 이전
(41,150㎡), 유스호스텔 신축(15,000㎡)

○ 사업기간 : '15.11 ~ '24. 11

○ 총사업비 : 약 2,800억원 (‘16년 390백만원, 타당성조사 및 기본계획)

○ 주요내용 : 역사적 상징성을 고려 원형유지하면서 복합화

- (주경기장) 제1종 종합경기장의 기능을 유지하고 리브와 캐노피를 원형으로 보존하되, 스포츠·문화·커뮤니티가 복합된 ‘도심형 스포츠 콤플렉스’로 조성

- (보조경기장) 주경기장 인접에 이전 배치하여 육상훈련 및 생활체육 용도로 겸용 가능한 공간으로 조성

- (유스호스텔) 한류 k-pop 관람객, 배낭여행 및 지방 운동선수 숙소로 조성

□ 추진경위

○ 잠실운동장 일대 시민‧전문가 의견 수렴계획 수립('14.11.~'15. 9.)

- 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모 실시(’15. 4.~9.)

‣ 수상자(8작품)에 주경기장 리모델링 설계공모 시 지명 초청권 부여

- 시민 아이디어 공모('15. 1.~ 5.) : 127건 중 18건 선정, 보행연계 등

- 천만상상 테마 제안('14.11.~12.) : 47건 접수, 스포츠, 공원활용 등

○ 올림픽주경기장 리모델링 타당성 조사 용역('15.11.~'16. 5.)

○ 리모델링 기본계획 수립 용역(수립중, '16. 7.∼)

- 민자사업제안시 토지의 효율적 이용을 위한 공간배치 및 입체적개발이  가능토록 가이드라인 마련 등

□ 향후계획

○ '17. 7  : 리모델링 기본계획 수립 완료

○ '17. 8~ '18. 5  : 국제 설계공모

○ '19. 1~ '20. 12  : 기본 및 실시설계

※ '19. 10 : 제100회 전국체전

○ '21. 1~ '24. 11  : 공사시행