문서번호	교량안전과-789
결재일자	2015.9.10.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
협조

잠실철교(도로교) 보수공사

실정보고 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

안전총괄본부

교량안전과

잠실철교(도로교) 보수공사

실정보고 검토결과 보고

잠실철교(도로교) 보수공사 시행 중 1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단 실정보고 승인요청에 따른 검토결과 보고임

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

공시기간 : 2015.5.7. ~ 2015.10.31

총공사비 : 472,094천원

(도급비 268,606천원, 관급비 194,512천원, 이전비 8,976천원)

공사내용

- 차량 방호울타리 교체 1,236m

- 차량 방호벽 콘크리트 표면보수 1,235㎡

- 신축이음장치 유간청소 등 부속시설 정비 1식

계약상대자 : ㈜아이엠유이엔지

감독기관 : 1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단

Ⅱ		실정보고 주요 내용

관련근거 : 잠실철교 보수공사 실정보고 검토결과 보고(1종교량-74호, ‘15.8.7)

차량 방호벽 단면복구 시행

차량 방호벽 단면복구부의 부착력저하 및 박리·박락이 진행되고 있으며

피복두께 부족, 철근부식에 따른 부식물 유출 발생

차량 방호울타리 지주철거(앵커볼트 절단부)부 단면복구 시행

기존 차량 방호울타리 지주철거에 따른 치핑부 단면복구 및 앵커볼트

절단부 부식물 유출 방지

신축이음장치 후타제 보수 시행

- A1, P1 신축이음장치 후타제 보수

Ⅲ		주요공종 공사비 증·감 내역

주요공종 증·감 내역

공 종	단위	수 량		공사비(원)
		당초	변경	당초	변경	증·감
방호벽 표면보수	㎡	1,235	1,201	32,699,095	31,798,877	-900,218
후타제 보수	개소	-	2	-	307,657	307,657
방호벽 단면복구	㎡	-	147	-	23,633,469	23,633,469
방호울타리 철거/설치	경간	618	624	87,270,252	88,117,536	847,284
직접공사비				142,080,581	166,295,842	24,215,261
제경비				106,525,919	115,335,158	8,809,239
P.S(LMC포장 균열보수)	식	1	-	20,000,000	-	-20,000,000

※LMC포장 균열보수는 당초 공사물량, 보수부위를  확정하지 않고 시공     비용을 P.S단가로 반영하였으나 공법 보유자와 협의 결과 잠실철교(도로교)     는 차량 및 지하철 통과에 따른 진동이 지속적으로 발생하여 시공효과를     담보할 수 없으므로 국부적인 시험시공을 무상으로 공법 보유자가 직접     시행하고 시공효과를 모니터링 하기로함에 따라 LMC포장 균열보수 감액     조치

공사비 증·감 내역

구 분	단위	수량	당초	변경	증·감
총공사비	식	1	472,095,500	472,095,500	-
도 급 비	식	1	268,605,500	281,631,000	증) 13,024,500
관급자재비	식	1	194,512,500	188,160,330	감) 6,352,170
이 전 비	식	1	8,976,500	2,304,170	감) 6,672,330

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

검토의견

1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고         내용을 검토한바 타당한 것으로 사료됨

조치계획

상기 검토의견과 같이 실정보고 내용을 승인 조치하여 공사추진에       만전을 기하고자 하며, 추후 설계변경시 실 정산 반영토록 통보        하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련문서 1부. 끝.