강북구 육아종합지원센터

「장난감도서관 지원」사업서(안)

<육아종합지원센터 기본현황>

○ 센 터  명 : 강북구 육아종합지원센터

○ 위     치 : 서울시 강북구 인수봉로66길 9

○ 면     적 : 2,240,57㎡

○ 홈페이지  : http:// childcare/gangbuk.go.kr

■ 필요성 및 목적

○ 2015년 강북구 육아종합지원센터 장난감나라 이용인원은 13,602명이고, 만족도 조사

결과  ‘만족한다’ 라고 답변한 비율이 92%로 나오는 등 지역 주민들의 만족도 및

호응도가 높음

○ 그러나 현재 장난감 나라 공간이 매우 협소하여(63.89㎡) 장난감 및 도서를 비치

할 수 있는 공간이 부족하고, 이용객들의 다양한 요구를 수용하기 위해 새로운

장난감 및 도서가 필요

■ 사업개요

○ 사 업 명 : 강북구 장난감도서관 시설 지원

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 사업장소 : 강북구 육아종합지원센터

○ 소요예산 : 201,250천원(시비)

■ 사업 내용

○ 환경개선공사

- 장난감나라와 연결된 외부 공간을 시설 확장공사 하여 협소한 내부 공간을 효율적으로 구성

- 노후 된 안내데스크 및 진열장을 제작하여 업무의 효율성을 제고

○ 물품구입

- 장난감 및 도서 대여 물품을 구입

- 자외선 살균소독기를 추가로 구입하여 장난감 및 도서를 위생적으로 관리

- 웹프로그램 최적화 적용 가능한 컴퓨터 구입

○ 시스템 리뉴얼 구축

- 현재 미흡한 회원관리체계를 효율적으로 재구성

- 무선 바코드 스캔화를 적용하여 이용자들의 대기 소요기간을 줄여 편리성을 도모

■ 세부 추진계획

○ 사업추진기간 : 2016년 3월 ~ 2016년 12월

○ 추진일정(안)

사업내용	추 진 일 정(월)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업 기초 계획
환경개선공사
물품 구입
시스템 리뉴얼구축

○ 사업예산 : 201,250천원                                           (단위:천원)

구분	사업내용		사 업 비	비고
총계	환경 개선 및 물품 구입		201,250
장난감 · 도서 지원 사업	환경개선공사	- 공간 확장 설계용역	12,500
		- 공간 확장 공사 (내부진열장포함)	138,000
		- 안내데스크 및 도서진열장 제작	8,400
	물품구입	- 장난감 구입	19,000
		- 도서 구입	8,700
		- 컴퓨터 구입	5,000
		- 소독기 구입	4,700
	시스템구축	- 대여시스템 최적화프로그램 구축	4,950

※추후 부분변경이 있을 수 있음.

○ 진행방법: 공개입찰 및 수의 계약

■ 기대효과

○ 장난감 정보 및 놀이방법 제공으로 영유아의 전인적 발달 도모하고 자녀 발달적 특성과       놀이에 대한 올바른 이해를 갖도록 지원함으로써 바람직한 양육을 지원

○ 가정에서 구입하기에 부담이 되는 장난감 및 육아용품을 대여해 줌으로써, 가정의 가계

부담 경감

○ 육아정보, 상담, 육아관련 서비스 등 연계하여 육아스트레스 및 양육부담 완화