문서번호	도시디자인과-9011
보존기간	5년
결재일자	2016.08.10.
공개여부	부분공개(4)

★주무관

광고물관리2팀장

도시디자인과장

도시관리국장

협조

<서울시 SDW시스템 자료 : 동대문구 법정동 인구분포현황>

장안동 먹자골목 활성화 환경개선사업 변경계획

2016. 8.

도시디자인과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
법령검토	●	법령	:	유 □	(	법규명	)		무 ■
	●	방침, 지침 등	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가 자문 등	:	유 □	(		)		무 ■
기관협의	●	상급기관	:	중앙 □ 서울시 ■ 기타 □					무 □
	●	관계부서	:	유 ■	(	부서명 : 서울시 도시빛정책과, 동대문구 기획예산과	)		무 □
	●	기타 (민간단체 등)	:	유 ■	(	서울특별시의회 의원 장흥순	)		무 □
재원확보	●	확보방안	:	국비 □ 시비 ■ 자체 □ 기타(민자,협찬) □					무 □
절차검토	●	추진절차	:	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 ■					무 □
주민참여 갈등관리	●	주민참여	:	설명회 □ 의견청취 □ 기타 □( )					무 ■
	●	민원소지	:	민원발생 가능 □				무 ■
			:	복합민원 □ 단순민원 □
			:	다수민원 □ 단수민원 □
	●	해소방안	:	대책마련 □ 이해·조정 □
홍보계획	●	홍보수단	:	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)					무 ■
기타 고려사항	●	기타사항	:	안전관리 □ 취약계층 □ 고용효과 □ 환경인지 □ 경제활성 □ 기타 ■( )					무 □

	장안동 먹자골목 활성화 환경개선사업 변경계획

장안동 먹자골목 명품디자인 거리조성을 위한 전면간판 교체 등 간판개선 정비사업 구간을 장한로(장안동사거리∼장안동삼거리) 구간으로 변경 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 경 위

장안동 먹자골목 활성화 환경개선사업 보조금 교부 알림

서울시 도시빛정책과-929(2015.09.22.)

※〔장흥순 시의원(환수위, 동대문4) 발의사업 ‘15.7.31.〕

장안동 일대 녹지환경개선사업으로 변경 요청

(2015.10.02.) 동대문구 ⇒ 서울시 도시빛정책과

장안동 일대 녹지환경개선사업으로 변경 불가 회신

(2015.10.12.) 서울시 도시빛정책과 ⇒ 동대문구

2016년 명시이월

(2016.01.05.)동대문구

2017년 장한로(장안동사거리∼장안동삼거리)간판개선사업 구간 선정

(2016.07.27.)동대문구

사업발의자인 장흥순 시의원의 변경계획 동의

(2016.08.08.)장흥순 시의원 ⇒ 동대문구

Ⅱ		당초 사업계획

사  업  명 : 『장안동 먹자골목 활성화 환경개선사업』

위      치 : ①장한로26길 6 ∼ 장한로26길 50

②장한로24길 8 ∼ 장한로24길 30-1

②

①

내      용 : 기존 노후간판을 디자인이 좋은 간판으로 개선하여

먹자골목 활성화

기      간 : 2016. 07. ∼ 2016. 12.

지원사업비 : 100,000천원(시비 100%)

□ 예산과목 : 맑고 매력있는 도시건설, 좋은 간판설치 및 불법옥외  광고물 정비, 광고물 단속 및 정비관리, 민간자본이전,  민간자본사업보조(402-01)

Ⅲ		변경후 사업계획

사  업  명 : 『장한로(장안동사거리∼장안동삼거리) 간판개선사업』

위      치 : ①장한로 137 ∼ 장한로 201

②장한로 140 ∼ 장한로 186

대      상

□ 2017년 장한로(장안동사거리∼장안동삼거리) 간판개선사업

- 정비대상 : 187개업소 중

40개업소(소요예산 : 100,000천원) 2016년 집행

기      간 : 2016. 07. ∼ 2016. 12.

시 보 조 금 : 1억원

- 지원기준 : 1업소 1간판지원(업소당 250만원 이내)

(40간판 × 2,500천원 = 100,000천원)

기 대 효 과

□ 기 완료한 구간(장한평역~장안동사거리)에서 장안동삼거리까지 연속성 있게 추진하여 장한로 특화권역의 주변 간판개선 환경제고

Ⅳ		변 경 사 유

장안동 먹자골목 활성화 환경개선사업 구간의 건물주 및 점포주의 반대로 사업추진이 불가하여 인근지역(장한로 간판개선사업)으로 사업구간 변경

붙임 : 동의서(장흥순 시의원) 1부. 끝.