업무연락전
작 성 자	이종근	작성일자	2014-12-02	문서번호	도시기반시설본부-14-46300
대상현장	[장충체육관 리모델링 기계설비공사]주식회사 아이티엠코퍼레이션건축사사무소, 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소
제 목	장충체육관 연결통로 건축공정 조속완료 촉구
내 용
1. 설비부-13380(2014.11.27.)호의 장충체육관 연결통로 에스컬레이터 설치를 위한 가설비계 철거요청과 관련입니다. 2. 지하철 연결통로(장축체육관~3호선동대입구 5번출구)의 건축 잔여공정(석공사, 캐노피 설치 등) 지연으로 후속공정인 에스컬레이터 설치가 장기간 중단상태에 있습니다. 3. 이에 따라 에스컬레이터 설치를 우선 시행할 수 있도록 연결 통로상에 있는 가설비계 철거를 요청한 바 있으나 아직까지 이행되지 않아 연말준공 및 내년 행사계획에 큰 차질이 우려되어 재 촉구하니 책임감리원은 후속 에스컬레이터 설치에 소요되는 절대작업기간을 감안, 2014.12.10.까지 건축 잔여공정 완료 및 비계가 철거될 수 있도록 특단의 대책을 강구 조치하시기 바랍니다. 가. 에스컬레이터 잔여공사 : 에스컬레이터 트러스 조정, 조정장치 설치, 배관배선작업, 가이드 레일 설치, 스테인레스 마감작업, 승강기안전관리원 검사, 시운전 등 나. 작업 소요기간 : 약 20일 소요 첨부 : 업무지시전(설비부-13380호, 2014.11.27.)
붙임 :

서울특별시