업무연락전
작 성 자	이종근	작성일자	2014-11-27	문서번호	도시기반시설본부-14-45896
대상현장	[장충체육관 리모델링 기계설비공사]주식회사 아이티엠코퍼레이션건축사사무소, 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소
제 목	장충체육관 연결통로 에스컬레이터 설치 촉구
내 용
1. 장충체육관 리모델링 기계설비공사와 관련입니다 2. 지하철 연결통로에 설치되는 에스컬레이터 설치와 관련, 선행 건축공정(석공사, 캐노피 등) 지연으로 에스컬레이터 잔여공사가 장기간 중단되어 연말 준공에 차질이 우려됩니 3. 이에 따라 업무 지시하니 책임감리원은 다음과 같이 잔여공사 및 작업일정을 감안하여 에스컬레이터 작업이 우선 시행될 수 있도록 연결통로상에 있는 가설비계를 2014.11월말 까지 철거 조치하여 에스컬레이터 준공에 차질 없도록 하시기 바랍니다 - 다 음 - 가. 에스컬레이터 잔여공사 : 에스컬레이터 트러스 조정, 조정장치 설치, 배관배선작업, 가이드레일설치, 스테인레스 마감작업, 승강기안전관리원검사, 시운전 등 나. 소요기간 : 약 20일
붙임 :

서울특별시