문서번호	보수과-666
보존기간	년
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		보수과장	구의아리수정수센터소장
협 조
	운영과장
	행정관리팀장

재건설 및 고도정수처리시설공사 관련

시설물 일제 합동 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

구의아리수정수센터

(보수과)

재건설 및 고도정수처리시설공사 관련

시설물 일제 합동 점검계획

우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사가 시운전이 6월 실시계획인 바, 시운전대비 일제 합동점검을 실시하여 미흡한 시설물에 대해서는 보완 및 개선 하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

❍ 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2014. 12. 20

❍ 공사규모 : 표준 정수처리 500,000m3/일, 고도처리 : 450,000m3/일

❍ 공사 추진계획

- 시설공사 완료(조경 및 부대공 준공일 이전) : 2014 6. 15

- 무부하 및 연속 시운전 : 2014. 6. 16 ~ 11. 10

- 공사 준공 : 2014. 12. 20

※ 구의재건설 신설 송수펌프 및 배출수시설 운영 : 2012. 4. 19

□ 점검계획

❍ 점검기간 : 2014. 3. 13(목) ~ 3. 14(금)

❍ 점검대상 : 재건설 및 고도정수처리시설공사 전반

❍ 점검방법 : 점검표 작성 제출

- 점검반 편성 : 3개반, 5개분야 30명

구 분	점검반장 (3명)	점검반원(27명)			비고
		정수센터(19명)	CM 단	시공사
운영분야	운영과장	정희중, 윤현진, 차재구, 조평대, 정미선, 김성재,	박주남, 이경환	허근, 천경운
기계분야	보수과장	이정원, 이규영, 강석윤, 김덕현	박주남	허근
전기분야		이무규, 노성제, 허도영, 함승훈	이경환	천경운
토목․분야		김달회, 김수영, 박광수	윤여일	문진환
본관 관리동	행정관리팀장	김점철, 김종삼	조원근	이호석

❍ 주요 점검내용

- 그 동안 시설물 개선 요청사항(미결, 진행, 계획)

- 시설물 인수․인계 수준의 점검으로 시운전 및 공사 준공관련 추가      개선 요구사항 등

• 시운전 관련 시설물 이상유무 및 적정여부 검토 등

• 중앙제어․감시설비 시스템 등 제반 운용실태 점검 등

• 향후 유지관리를 위해 분야별 시설물 기능 적정여부 검토 등

❍ 점검결과 조치

- 미비사항에 대해 공정보고회의 시 개선요구 ⇒ CM단, 시공사

- 중요사항에 대해 CM단, 시공사 수용불가의 경우 ⇒ 본부 보고 등

□ 행정사항

❍ 시설물 일제 합동점검계획 및 점검결과 미비 및 개선 요구사항 통보 : CM단, 시공사

※ 별첨 분야별 시설물 점검표 양식에 의거 2014 . 3. 14(금) 18:00한 제출

❍ 재건설공사 관련 공정회의 개최(예정)

- 일시 : 2014. 3. 20(목) 15:00~

- 장소 : 시공사 상황실

- 참석대상

• 본부 : 공사담당자

• 정수센터 : 5~6급, 연구사, 분야별 담당자

• CM 단, 시공사 차장급 이상 등

- 회의내용

• 금년도 재건설공사 추진계획

• 점검결과 미비 및 개선 요구사항에 대해 CM단, 시공사의 조치계획       검토(확인) 및 본부 보고 등

따로붙임 : 시설물 점검표 1부. 끝.