문서번호	정수시설과-1654
보존기간	년
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
협 조
	행정관리과장
	정수과장

재건설공사 본관관리동 이전 관련

시설물 일제 합동 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

재건설공사 본관관리동 이전 관련

시설물 일제 합동 점검계획

정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 관련하여 신설 본관 관리동 이전에 따른 시설물 일제 합동점검을 실시하여 시설물 보완 등 업무처리에 철저를 기 하고자 함.

□ 이전개요(계획)

❍ 시설물명 : 신설 본관 관리동

※ 공사규모 : 지하 1층, 지상 4층, 연면적 4,483㎡

❍ 이전기간 : 2014. 8. 7(목) ~ 8. 9(토)

❍ 이전대상 : 기존 본관 관리동 시설물 및 중앙제어실, 연구실 등

□ 점검계획

< 1차 점검 >

❍ 점검기간 : 2014. 7. 29(화) 10:00 ~ 11:20

- 일제 합동점검 : 7. 29(화) 10:00 ~ 10:40

- 점검결과 총평 및 토론 등(센터회의실) : 7. 29(화) 10:40 ~ 11:20

❍ 점검대상 : 사무실, 중앙제어실, 연구실, 공조기 등 일체

❍ 점검방법 : 점검반 편성(5개 분야 28명) 분야별 점검

구 분	점검반장	점검반원(25명)
		정수센터(19명)	CM 단	시공사
건물동 관리 (청사 시설물 등)	행정관리과장	김기상, 배준호, 김점철, 노성제, 함승훈	조원근 김석경	이호석, 허근, 노희룡
운영분야	정수과장	정희중, 차재구, 정미선, 김성재	김석경	허근, 노희룡
기계분야	정수시설 과장	이정원, 강석윤, 이규영, 김덕현	김석경	허근
전기분야		이무규, 노성제, 허도영, 함승훈	김석경	노희룡
토목분야		김달회, 김수영, 박광수	문진환	윤여일

❍ 주요 점검내용

- 관리본관 이전 관련 잔여 공정에 대해 이전일(8. 7~8. 9) 전 완료 가능여부 점검 등 : 점검표 작성 제출

※ 별첨 이전 관련 잔여공정 현황 참조

- 분야별 추가 시설물 개선 및 보완사항 확인 등

❍ 점검결과 조치

- 미비사항에 대해 개선 및 보완요구 ⇒ CM단, 시공사

< 2차 점검 >

❍ 점검기간 : 2014. 8. 5(화) 10:00 ~ 11:20

- 일제 합동점검 : 8. 5(화) 10:00 ~ 10:40

- 점검결과 총평 및 토론(센터 2층 회의실) : 8. 5(화) 10:40 ~ 11:20

❍ 점검대상 : 사무실, 중앙제어실, 연구실, 공조기 등 일체

❍ 점검방법 : 1차 합동 점검과 동일하게 5개 분야 28명

❍ 주요 점검내용

- 1차 합동 점검시 지적사항 이행여부 및 관리동 이전(8. 7~8. 9) 가능여부와 문제점 등 검토

- 분야별 추가 시설물 개선 및 보완사항 확인 등

❍ 점검결과 조치

- 시설물 미비로 관리동 이전(8. 7~8. 9)에 문제가 있는 경우 이전 연기 등

- 미비사항에 대해 개선 및 보완요구 ⇒ CM단, 시공사

□ 행정사항

❍ 본관 관리동 이전관련 시설물 일제합동 점검계획 통보 : CM단, 시공사

❍ 시설물 일제 합동점검계획 및 점검결과 미비 및 개선 요구사항 통보 :

CM단, 시공사

따로붙임 : 1. 본관 관리동 잔여 공정표 1부.

2. 시설물 검토 및 개선요구사항 양식 1부.

3. 본관 관리동 현황도 각 1부. 끝.