당현천1복개 구조물외 1개소 보수공사

과 장 : 이 근 봉	☎944-5403
담당자 : 오 광 준	☎944-5450

□ 사업부서 : 북부도로사업소 시설보수과

□ 사업개요

○ 위     치 : 상계동 112(당고개역) ~ 대림APT(상계역)

○ 규     모 : 폭 20.4 ~ 38.7m, 연장 825m

○ 공사개요

- 재포장 25.8a, 단면보수 2,869㎡

○ 총사업비 : 1,113,680천원

- 도급비 : 1,087,810천원– 관급비 : 15,870천원– 이전비 : 10,000천원

○ 사업기간 : 착수일로부터 12월 31일

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2017. 4. ~ 10. : 정밀안전진단 시행

○ 2018. 2. : 공사설계

○ 2018. 3. : 계약심사요청

○ 2018.  4. : 공사발주 및 착공

○ 2018. 4. ~ 12.  : 공사시행 및 준공

□ 예산배정계획                                          (단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	집행액	집행잔액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	1,140,000	0	0	0	1,113,680	-	총액 1,113,680
시설비	1,140,000	0	0	0	1,113,680	-	- 도급비 1,087,810 관급비 15,870 이전비 10,000

※ 예산과목 : (도시개발특별회계) 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리,

당현천1복개 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 배정사유

○  계약심사 완료 후 발주에 따른  예산 배정 요청.

□ 첨부 : 계약심사 결과 1부.  끝.