화곡1 재해위험지구 정비사업 추진계획서

《작성서식》

1. 지구지정 현황

ㅇ 지 구 명 : 화곡1 재해위험지구 정비사업(계속)

ㅇ 위    치 : 서울특별시 강서구 화곡동 1106-1 일원

ㅇ 유형 및 등급 : 침수위험지구/ “가”등급

ㅇ 지정면적 : 110,720㎡, 61필지

ㅇ 지정일자 : 2011년 4월 18일

2. ’15년도 사업계획

ㅇ 예산확보 : 4,844백만원(국비 2,422, 지방비 2,422)

ㅇ ’15년도 시행계획

공 종	세부 공종	사업 내용	사업비(백만원)	비 고
총 사업비			4,844
공사비	소 계		3,120
	토 공	터파기, 되메우기 등	497
	구 조 물 공	PC암거 설치 등	488
	가시설공	H-Pile+토류판 등	1,845
	포 장 공	도로포장 등	40
	계측및품질 관리	계측 및 GPR탐사 등	250
자재비	관 급 자 재	PC암거, 레미콘, 철근 등	592
이설비	-	광역상수도, 열배관, 한전, 도시가스 등	1,102
폐기물 처리비	-		30

ㅇ 시 행 자 : 서울특별시 강서구청

3. 추진일정 계획

ㅇ 15. 3. ~ 15. 9. : 지장물 이설공사(상수도, 열배관, 한전, 도시가스 등)

ㅇ 15. 4. ~ 15. 6. : 3단계 공사(2▣3.0×2.5m, L=880m) 및 건설사업관리 용역 발주

ㅇ 15. 9. ~ 15. 12. : 3단계 1차 공사시행(2▣3.0×2.5m, L=120m)

ㅇ 15. 12. : 공사완료