한강로 재해위험지구 정비사업 추진계획서

《작성서식》

1. 지구지정 현황

ㅇ 지 구 명 : 한강로지구 재해위험지구 정비사업(계속)

ㅇ 위    치 : 이촌동 372 ~ 갈월동 97-1번지(한강대교북단~남영역간)

ㅇ 유형 및 등급 : 침수위험지구, “가” 등급

ㅇ 지정면적 : 180,491㎡,

ㅇ 지정일자 : 2011년 3월 8일[고시]

2. ’15년도 사업계획

ㅇ 예산확보 : 9,422백만원(국비 2,422, 지방비 7,000)

ㅇ ’15년도 시행계획

공 종	세부 공종	사업 내용	사업비(백만원)	비 고
총 사업비			9,422
공사비	소 계		7,672
	구 조 물 공	레미콘타설	2,773
	관 부 설 공	토축관로공사	1,265
	포 장 공	아스콘포장	16
	건 축 공 사	건축동, 외벽공사	1,713
	기 계 공 사	지배수펌프, 배관설치	955
	전 기 공 사	전기, 계측제어공사	950
자재비	사 급 자 재		950
감리비	감 리 비		800

ㅇ 시 행 자 : 용산구청장

3. 추진일정 계획

ㅇ ‘15. 1월 : 가시설 및 복공판 설치 완료

ㅇ ‘15. 2월 : 토공 완료

ㅇ ‘15. 3월~ : 구조물 공사

ㅇ ‘15. 6월~ : 토출관로 공사