문서번호	토목부-19322
결재일자	2015.9.15.
공개여부	비공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

전기 배전실 캐노피 설치 검토보고

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

전기 배전실 캐노피 설치 검토보고

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

녹지대에 노출되어 설치되어 있는 전기 배전실에 대해 시설물 인수부서인 강서도로관리사업소에서 빗물유입 방지 및 미관향상을 위해 캐노피 설치 및 기계실 내·외부 시설물 보완요청에 대한 검토보고임.

관련근거

○ 남부순환로 개봉지하차도 현장점검 결과에 따른 업무협조(기전과-11119호, ‘14. 9. 2.)

○ 기전분야 현장점검 결과 운영기관 요구사항 통보(설비부-9974호, ‘14. 9.11.)

○ 남부순환로 개봉지하차도 인수대상 시설물 업무협조(기전과-6265호‘15.5.22.)

○ 기전분야 인수기관 요구사항 재 통보(설비부-6162호, ‘15. 5.27.)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015.10.31.

○ 총사업비 : 668억원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

검토

○ 시설물 인수부서인 강서도로관리사업소에서는 전기 배전실 빗물 차단 시설이 없어 향후 점검시 안전사고가 우려되므로 빗물 유입 방지 및 미관향상을 위해 캐노피 설치를 지속적으로 요구하여 설치가 필요함.

○ 또한, 지하차도 출입구는 당초 설계상 콘크리트면을 마감처리 되도록 되어 있으나, 시설물 인수부서인 강서도로관리사업소에서는 주변 경관과 조화를 이룰수 있는 목재데크 등을 요청함에 따라 반영이 필요함.

○ 인수전 합동점검 결과 지하차도내 집수정 출입문은 스텐레스 재질로 설치되어 있으나, 화재, 소음 등에는 취약함으로 추가로 방화문 설치, 바닥 에폭시 라이닝, 스크린 망 설치 등을 요청하여 반영이 필요함.

○ 구조 기술지원감리원 검토의견

구분	검토자	검토 의견
캐노피 설치	구조기술사 허동녕 (감리제15-245호2015.8.17) (감리제15-245호2015.8.28)	- 1차 검토 지적사항 조치결과에 대하여 의견없음 - 다만, 방음벽 기둥재, 지붕재등의 부재 접속부(도면에서 지붕 마감 상세 피스 등)의 적정성 검토는 현장에서 시공 상세와 자재 검수시 철저히 확인하기 바람

○ 수량 현황

시설 위치			설치수량	설치규격	형식	공사비 (천원)	비고
기전 시설물	옥외전기실 #1		1개소	H=4.15mxW=5.0mxL=5.0m	캐노피	26,893
	옥외전기실 #2		1개소	H=4.15mxW=5.0mxL=15.0m	캐노피	67,433
	기계실	외부 출입구	1개소	H=2.65mxW=1.5mxL=7.7m	데크마감	6,840
		내부	1식	W=3.2 x L=12.0m	바닥 에폭시마감	270
		집수정	5개소	W=1.0 x H=0.20m	스크린설치	176
		출입문	1개소	H=2.5 x W=3.0	방화문설치	1,953
공사비 계						103,565

신규 단가 검토

구 분	공 종	단위	단 가	단가산출기준	비고
설계변경 시점	- 2014년 12월 기준
신규단가 적용공종 (협의율) 82.868%	케노피설치(전기실 #1)	개소	20,964,787	① 시공비 - 2014년 표준품셈 및 실적공사비 적용 ② 자재비 : 2014년12월 기준 정보지 및 조달가격 비교후 최저가 적용 ③ 적용단가 산출 [산출단가x혐의율(82.868%)
	케노피설치(전기실 #2)	개소	52,814,805
	데크설치(기계실 출입부)	개소	5,402,592
	에폭시라이닝(기계실바닥)	M2	5,568
	스크린망 설치(기계실)	개소	33,460
	출입문 설치(방화문) [H=2.5mxW=3.0m]	개소	1,574,492	① 업체별 견적가중 최저가 적용

※ 신규단가는 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정) ②항에 의거

설계가에 협의율(강제) 82.868%적용(65.736%+ 100% / 2 = 82.868%)

공사비 증․감

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	수량	공사비	비고
[전력시설물 캐노피 및 기타시설물 보완]
캐노피설치(전기실#1)	[H=4.15xW=5.0xL=5.0]	개소	1	20,964,787
캐노피설치(전기실#2)	[H=4.15xW=5.0xL=15.0]	개소	1	52,814,805
데크마감(기계실)	[H=2.65xW=1.5xL=7.7]	개소	1	5,402,592
에폭시 라이닝	기계실 바닥	M2	38.2	212,697
스크린설치	기계실 거름망 [200x1000x32T]	개소	5	167,300
출입문설치	방화문(지하차도부) [H=2.5mxW=3.0m]	개소	2	1,574,492
직접공사비				81,136,673
제경비				13,013,327
공급가액				94,150,000
부가가치세				9,415,000
도급공사비				103,565,000

감리단 검토 의견

○ 시설물 인수부서인 강서도로사업소에서 ‘기전시설물에 대한 캐노피(빗물유입 및 미관저해 방지) 설치 및 기계실 내·외부 기타시설물 보완’ 설치 요청에 대하여는 인수부서 의견대로 시행하는 것이 타당하다고  판단되며,

○ 증액되는 공사비 103,565천원에 대하여는 본부 승인 후 설계변경심의위원회 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

조치계획

○ 전기 배전실 캐노피설치, 기계실 내·외부 기타시설물 보완 설치에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고 증액되는 공사비(103,565천원)에 대하여 추후 설계변경소위원회 심의결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  :  감리 검토의견서 1부.  끝.