투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전농교 보수보강공사 설계변경(총차 1회, 1차 1회) 시행

1. 서울특별시시설관리공단 강북공사관리처-13530(2013.12.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 “전농교 보수.보강공사”와 관련하여 아래와같이 설계변경(총차회, 1차1회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 전농교 보수․보강공사

나. 공사기간 : 2013.04.19 ~ 2014.04.29

- 금차(1차) 공사기간 : 2013.04.19 ~ 2013.12.31

다. 도 급 사 : ㈜제이에스 건설안전 대표 이성우 외 1개사

- 교량관리, 일반교량관리, 전농교 보수․보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경(총차 1회) 내역

구 분		당 초	변 경	증.감액	비고
총 공사비		1,923,328,700	1,923,000,000	감) 328,000
도급액	공급가액	1,670,367,000	1,679,091,819	증) 8,724,819
	부 가 세	167,036,700	167,909,181	증) 872,481
	계	1,837,403,700	1,848,001,000	증) 9,597,300
교통소통용역		30,470,000	20,544,000	감) 9,926,000
관급자재비		47,425,000	47,425,000	0
건설폐기물		8,030,000	8,030,000	0

* 설계변경(1차 1회) 내역

구 분		당 초	변 경	증.감액	비고
총 공사비		1,017,925,000	1,000,000,000	감) 17,925,000
도급액	공급가액	847,272,728	890,414,546	증) 43,141,818
	부 가 세	84,727,272	89,041,454	증) 4,314,182
	계	932,000,000	979,456,000	증) 47,456,000
교통소통용역		30,470,000	20,544,000	감) 9,926,000
관급자재비		47,425,000	-	감) 47,425,000
건설폐기물		8,030,000	-	감) 8,030,000

바. 설계변경사유

○ 관련문서 : 강북공사관리처-11889(2013.11.14)

○ 변경내용

- 첨가시설물 간섭으로 설치불가한 강연선 이동설치(측면→하면)

- PSC빔 인강 강연선 직경변경(15.2mm ⇒ 12.7mm)

- 강연선 긴장력 조정(250Kn, 500Kn, 600Kn ⇒ 250Kn, 600Kn)

붙임  1. 설계변경 관련 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

★주무관			시설보수과장			성동도로사업소장
협조자	관리단속과장			계약1팀장
시행	시설보수과-4498	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 성동 용답동 자동차시장길 41 성동도로사업소 시설보수과	/
전화	02-2210-1551	/전송	02-2210-1562	/	aslee828@seoul.go.kr	/	대시민공개