문서번호	토목부-23439
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조
	주무관

정기안전점검비 적용(PS금액) 검토보고

【목동교 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

정기안전점검비 적용(PS금액) 검토보고

【목동교 성능개선공사】

『목동교 성능개선공사』의 정기안전점검비 적용(PS금액)에 대한 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

※관련근거 : 한국종합(목동교) 제2015-19호(2015.11.05)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 목동교 성능개선공사

○ 공사규모 : 교량성능개선 폭 20m, 연장 240m(DB-18→DB-24)

○ 도 급 비 : 10,202백만원(1차 : 4,420백만원)

○ 공사기간 : ‘15. 8.12.～’17. 8.11.(1차 : ‘15. 8.12∼‘15.12.31)

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술

○ 시 공 사 : 용일토건㈜

2		보고내용

○ 목동교 성능개선공사와 관련하여 계약상 제경비(PS 금액) 항목으로 분류되어 있는 정기안전점검비를 비교 검토하여 적정 금액을 반영하고자 함.

- 정기안전점검비(계약금액) : 21,000천원

3		감리단 보고내용

○ 정기안전점검비(PS금액)를 타업체 등과 비교 검토한 바, 최저가 업체에게 의뢰하여 실시하고, 공사비는 설계변경 조치함이 타당할 것으로 판단됨

(단위:천원)

구 분	계약금액	타견적 비교			적용금액
		백양엔지니어링(주)	대진컨설턴트(주)	㈜청운구조 안전연구원
안전점검비	21,000	20,000	22,100	21,000	20,000
선정업체		◎

4		조치계획

○ 정기안전점검비(PS 금액)는 타업체 등을 비교검토하여 최저가 업체(백양엔지니어링)를 선정한 사항으로 감리단 검토의견이 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙  임 : 감리단 검토의견서  1부.  끝.