서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

정거장 영상설비

설치계획서(관제실)

2014. 10. 20

	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품 구매설치	문서번호
		개정일자	2014. 10. 27
	정거장영상설비 설치계획서(관제실)	개정번호	1.00

목   차

1. 개요	2

2. 구성도	3

2.1 관제 구성도	3

2.2 운영자 PC/유지보수 관리서버 설치도	3

3. 설치 및 시험내역	4

4. 설치 및 시험절차	5

4.1 1단계 방송랙 이전/설치	5

4.2 관제 통신랙 결선 및 정리	5

4.3 관제 콘솔데스크 및 운영설비 설치	5

4.4 관제 화면분할/관리프로그램 및 인터페이스 시험	6

5. 예정공정표	7

6. 안전관리 및 환경관리 계획	9

7. 출입자 명단	11

1. 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(2단계) 통신설비 구축
2. 공정명	정거장영상설비 2단계용 설치 및 시험(관제실)
3. 공사위치	관제실, 통신기계실
4. 공사목적	서울지하철 9호선 연장건설(2~3단계) 정보통신설비(정거장영상 설비)의 2단계용 설비 설치 및 시험(프로그램,인터페이스연동)
5. 주요공종	1. 1단계 관제용 방송랙 이전설치 작업 2. 관제 통신랙 결선 및 정리작업 - 전원/접지 케이블 - MIS 네크워크 케이블 - 인터폰/TTC 연동케이블 - 70“ 관제모니터 케이블 - 서버 전원/네트워크 케이블 3. 관제실 콘솔데스크 및 관제용 설비 설치작업 4. 관제화면분할/관리프로그램 및 인터페이스 시험
6. 공사기간	2014/11/11 ~ 2014/11/14 (00:00~04:30 야간작업만 시행) 2014/11/21 ~ 2014/11/21 (00:00~04:30 야간작업만 시행) 2014/11/25 ~ 2014/11/28 (10:00~18:00)
7. 주요자재목록	2단계 반입 장비 일체 (각종 서버 등) 공사용 전동공구 (전동드릴, 드라이버, 직소 등) 랜/전원/접지 케이블

2. 구성도

2.1 관제 구성도

데스크  설치

랙 설치

2.2 운영자PC/유지보수 관리서버 설치도

※ 관제설비 설치작업은 기 운영중인 1단계 영업에 방해를 주지 않도록 열차운행이 중단된 야간에만 진행하고, 작업 후, 주변을 깨끗이 정리하여 익일 영업운영에 영향이 없도록 합니다.

3. 설치 및 시험내역

설비명	작업명	설치 내역	수량	설치예정위치	세부위치	비고
종합관제실 정보통신설비	1단계 방송랙 이전/설치		1식	종합관제실	관제실	이동설치
	관제 통신랙 결선 및 정리	영상 View서버 (모니터 포함)	2대	종합관제실	통신랙	기설치
		KVM스위치	1대	종합관제실	통신랙	기설치
		모니터 19“	1대	종합관제실	통신랙	기설치
		접점연동장치	2대	종합관제실	통신랙	기설치
		접점연동장치 (Shelf)	1대	종합관제실	통신랙	기설치
		L3 스위치	1대	종합관제실	통신랙	기설치
		장비렉	1대	종합관제실	통신랙	기설치
		키보드 트레이	1대	종합관제실	통신랙	기설치
	운영설비 설치작업	콘솔데스크	1대	종합관제실	관제실	신규설치
		운영자서버 (모니터 포함)	2대	종합관제실	관제실	신규설치
		컨트롤 키보드	2대	종합관제실	관제실	신규설치
		유지보수 관리서버 (모니터 포함)	1대	종합관제실	관제실	신규설치
	관제화면분할 관리프로그램 및 인터페이스 시험	화면분할/관리프로그램	S/W 동작시험	종합관제실	관제실	신규설치
		TTC 연동시험		종합관제실	관제실	신규설치
		화재 연동시험		종합관제실	관제실	신규설치
		비상인터폰 연동시험		종합관제실	관제실	신규설치

4. 설치 및 시험절차

4.1 1단계 방송랙 이전/설치

1) 작업일시 : 11/11(화) 00:00 ~ 04:30

2) 작업장소 : 관제실

3) 작업예정사항

- 방송랙 케이블 연결해제 -> 방송랙 이전 -> 케이블 재연결 -> 정상가동 전원/동작 시험

4) 협조요청사항

- 방송랙 이설후 정상작동 여부 확인요청

4.2 관제 통신랙 결선 및 정리

1) 작업일시 : 11/12(수) 00:00 ~ 04:30

2) 작업장소 : 관제실, 통신기계실, MIS실

3) 작업예정사항

- 통신랙내의 각종 케이블 루트 확보를 위한 하단 액서스 플로어 절단작업

- MIS망 네트워크케이블 포설작업 (MIS실->통신기계실->4층 관제실 통신 랙)

- 기 포설된 인터폰 및 TTC 연동케이블 성단작업 ( 통신기계실->4층 관제실 통신 랙)

- 기 포설된 전원/접지케이블 성단작업 (UPS실->4층 관제실 통신 랙)

- 기 포설된 70“ 모니터 케이블 연결작업 (모니터->통신랙 영상 뷰 서버)

- KVM 스위치 및 키보드/마우스 연결작업

- 통신랙 바닥 고정작업

4) 협조 요청사항

- MIS망 케이블 포설을 위한 운영사(운영본부, SPC) 협의 및 확인 요청

- MIS망 케이블 연결은 운영사 협의후 진행

4.3 관제 콘솔데스크 및 운영설비 설치

1) 작업일시 : 11/13(목) ~ 11.14(금) 00:00 ~ 04:30

2) 작업장소 : 관제실

3) 작업예정사항

- 2단계 관제용 콘솔데스크 설치작업

- 운영자서버 및 관리서버 설치작업

- 전원/네트워크 등 각종 케이블 연결작업

- 운영자서버 및 관리서버 전원인가 및 정상동작 시험

4) 콘솔데스크 도면

4.4 관제화면분할 / 관리프로그램 및 인터페이스 시험

1) 작업일시 : 야간시험 11/21(금) ~ 11/21(금) 00:00 ~ 04:30

주간시험 11/25(화) ~ 11.28(금) 10:00 ~ 18:00

2) 작업장소 : 관제실

3) 작업예정사항

[야간시험]

- 영상View서버를 통한 영상확인(실시간/저장) 및 화면분할(4/9/16 등) 시험

- 영상View서버를 통한 이벤트 팝업 및 이미지 맵 표출시험

- 관리서버를 통한 사용자 관리기능(권한설정) 시험

- 화재 연동시험 및 이벤트 영상/이미지 맵 표출시험

(실제 화재장비 연동은 하지않고, 시뮬레이션으로 진행)

- 비상인터폰 연동시험 및 이벤트 영상/이미지 맵 표출시험

[주간시험]

- TTC 연동시험 및 이벤트 영상/이미지 맵 표출시험

일정	작업내용	작업시간	작업위치	작업 인원	항목	세부 작업	설치장소	비고
11/11 (화)	1단계 방송랙 이전	00:00 ~ 04:30 (야간)	종합관제	강종진 외 4명	1단계 방송랙	- 방송설비 케이블 연결해제 - 방송랙 이전 - 케이블 재 연결	종합관제
11/12 (수)	관제 통신랙 결선 및 정리	00:00 ~ 04:30 (야간)	종합관제	강종진 외 4명	케이블 포설	- 통신랙 바닥 액세스 플로어 타공 - MIS망 케이블 포설 - 인터폰/TTC 연동케이블 포설 및 연결	종합관제
					통신랙 설비 케이블 결선	- UPS실과 전원/접지케이블 연결 - 영상뷰서버/연동장치/L3스위치 결선 - 케이블 정리 및 통신랙 바닥 고정 - 설비 동작시험
11/13 (목)	관제 콘솔데스크 및 운영설비 설치	00:00 ~ 04:30 (야간)	종합관제	강종진 외 4명	콘솔데스크 설치	- W:H:D (1360:820:1120)	종합관제
					전원/네트워크 케이블 결선 및 각종 서버 결선	- 전원 케이블 연결 - 운영자서버/관리서버 설치 - 서버 동작시험
11/14 (금)	관제 콘솔데스크 및 운영설비 설치	00:00 ~ 04:30 (야간)	종합관제	강종진 외 4명	콘솔데스크 설치	- W:H:D (1360:820:1120)	종합관제
					전원/네트워크 케이블 결선 및 각종 서버 결선	- 전원 케이블 연결 - 운영자서버/관리서버 설치 - 서버 동작시험
11/21 (금)	관제화면분할 관리프로그램 및 인터페이스 시험	00:00 ~ 04:30 (야간)	종합관제	강종진 외 4명	화면분할 및 관리프로그램 시험	- 화면분할 및 관리프로그램 시험	종합관제
					인터페이스 시험	- 화재연동시험 및 이벤트 팝업 - 비상인터폰연동시험 및 이벤트팝업
11/26(화) ~ 11/28(금)	인터페이스 시험	10:00 ~ 18:00	종합관제	강종진 외 4명	인터페이스 시험	- TTC 연동시험 및 이벤트 팝업	종합관제

5. 예정공정표

6. 안전관리 및 환경관리 계획

6.1 안전관리 계획

(1) 합동안전관리

2단계 정거장영상설비 작업원으로 인하여 1단계 영업운전에 지장을 주는 사항발생시 모든 민,형사상의 책임과 영업손실(이행 과징금등) 일체 배상을 책임진다.

(2) 관리감독

담당감리원 및 현장공사 관계자 입회하여 안전대책에 최선을 다한다.

(3) 안전점검구분

안전점검관리자 구분

총괄 책임자 : 현장대리인

공사관리 및 안전관리자 : 담당관리자

작업장별 관리자 : 현장투입 직원(관리감독자)

6.2 안전교육

(1) 작업 전 각 호의 안전교육 실시

1) 당일작업내용

2) 위험용인 및 방지대책

3) 참여기술자 및 작업자 개인별 임무 숙지

4) 안전사고 발생시 응급조치 요령

(2) 안전보호구 착용

1) 안전모, 안전화, 보안경등 개인보호구를 반드시 착용

(3) 사전점검

1) 전기용품 사용시 접지를 하여 작업원의 감전사고 예방

2) 작업원 적합성 점검(신체이상유무, 음주여부)

6.3 환경관리 계획

1) 작업 전, 주변 정리정돈 및 작업후 작업 폐기물을 수거후 분리 배출

6.4 사고보고 계통도

7. 출입자 명단

□ 공사명 : 서울지하철9호선 연장건설 통신설비 구축

번호	이름	주민번호	주소	소속	핸드폰	비고
1	강종진	*******xxxxxxx		현대정보기술	*************
2	윤병렬			투빅스	*************
2	전뇌진			투빅스	*************
3	박영태			투빅스	*************
4	강성렬			투빅스	*************

* 감독자 (서울시, 감리단) 출입사항은 명단 제외.