설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 박상철

요청일

2015년 7월   일

공 사 명

구리암사대교연결도로건설공사

공사개요

공사규모

사업연장(L) = 1.88km

폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장

공사기간

2012. 8. 2 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합 건축사사무소

설 계 사

(주)경화엔지니어링

시 공 사

㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경

자문 안건명

절토사면 보강

요청금액

증) 368백만원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

ㆍ구리암사대교연결도로 건설로 암사정수장 부지 일부가 편입됨으로 인해 재설치되는 경계용휀스 재질변경    (능형철망→메탈철망) 및 도로 신설로 정수장이 노출되어 차폐시설 설치 요청반영

ㆍ정수장 후문 당초 계획 진입로가 선사로~고덕지구 확장공사의 정수장사거리에서 진입토록 변경되어      주변 구조물 공법 변경

원설계자 의견(요약)

○ 내용 :

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

구 분	당 초	변 경
울타리	능형철망(h=2.2m)	메탈철망(h=2.7m)
진동감지기	센서 및 케이블 1열	센서 및 케이블 2열
차폐시설	-	-옹벽형 H=4m, L=200m -EGI 휀스 H=2.4m, L=150m
공사중가림막		-EGI 휀스 H=2.4m, L=150m
전술마대		-전술마대 : 3,600장 -전술마대보관함 : 6개소
사면 구조물	PRN 옹벽 -H=0.6~5.1m, L=43m	게비온옹벽 -H=2~3.1m, L=60m

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 343백만원

- 변 경 : 711백만원

-  증   : 368백만원

별첨서류

1. 감리단 검토보고서  1부

2. 설계내역서 1부

3. 변경전후 도면  1부

▪ 공사예정시기

: 2015. 8 ~ 9

▪ 소요관급자재 : 있음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	구리암사대교연결도로건설공사
계약금액	18,242,000 천원	계약일	2012. 7. 27	시공사	(주)신성건설 외 2개사
공사기간	2012. 8. 2 ~ 2015.12. 31	낙찰율	80.405%	설계자	(주)경화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)도화엔지니어링 (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소
공사규모	사업연장(L) = 1.88km 폭원(B) = 신규 35.0m(6차로) 및 기존25.0m→35.0m(6차로) 확장			※ 작성자 : 박상철 (☎ 3708-2559)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증
변 경 개 요	- 울타리 (능형철망) : H=2.2m, L=705m 진동감지 센서, 케이블 1열 - PRN 옹벽 : H=0.6~5.1m, L=43m		- 울타리(메탈철망) : H=2.7m, L=705m - 진동감지 센서, 케이블 2열 - 게비온 옹벽 : H=2~3.1m, L=60m - 차폐시설 : 옹벽형 H=4m, L=200m : EGI 휀스 H=2.4m, L=150m 공사중가림막 : EGI 휀스 H=2.4m, L=150m 군 전술시설 : 마대 3,600장, 보관함 6EA	- 웉라리 : 능형망→메탈 : H=2.2m→2.7m - 진동감지 센서, 케이블 1열 - PRN 옹벽 →게비온 옹벽 - 차폐시설 : 옹벽형 H=4m, L=200m : EGI 휀스 H=2.4m, L=150m 공사중가림막 : EGI 휀스 H=2.4m, L=150m 군 전술시설 : 마대 3,600장, 보관함 6EA
공 사 비	343백만원		711백만원	368백만원
적 용 요 율			협의율 90.202%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	공사계약일반조건 제7절1의나
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 (업무연락전 도시기반시설본부-15-3823 (‘15. 7. 17)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절1항의가4)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⓺공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	구리암사대교연결도로 건설로 암사정수장 부지 일부가 편입됨으로 인해 재설치되는 경계용휀스 재질변경(능형철망→메탈철망) 및 도로 신설로 정수장이 노출되어 차폐시설 설치 요청과 정수장 후문 당초 계획 진입로가 선사로~고덕지구 확장공사의 정수장사거리에서 진입토록 설치토록 계획 변경되어 이를 설계변경
효 과	① 공기단축( 월), ⓶ 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⓹ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

1. 업무연락전 : 도시기반시설본부-15-3823 (2015. 7. 17)

2. 실정보고 검토보고 (감리단) : 고덕(감리) 2015-305 (2015. 7. 8)

3. 실정보고 (시공사) : 신성암사 2015-204 (2015. 7. 7)