승강장안전문설비(PSD) 자동 안열림 관련

정위치검지센서[±650mm] 개선품 설치

Ⅰ		개 요

❍ 전동차 조기정차 시(-650mm 근처) 정위치정차 검지센서의 반사면이 전동차 헤드부(금속재질 곡면)에 위치하여 센서 감도가 약할 경우 열차검지 불가

❍ 검지 불가 시 승강장안전문이 자동으로 열리지 않는 상황이 발생하여 강한 감도 특성을 지닌 센서 사용 필요성 증대

Ⅱ		진행현황

2015. 10월: 기관사이례상황정보를 활용한 PSD 고장장애 원인 분석

↓

2016. 04월: PSD 미개방 및 출입문 장애증가 관련 대책회의 시행지시

(사장지시사항 제50호)

↓

2016. 04월: 출입문 및 승강장안전문 장애 대책회의

↓

2016. 05월: PSD 정위치검지센서(-650mm) 개선 관련 시범설치

(4개소 설치 → 설치 이후 장애 발생 0건)

↓

2016. 09월: 5호선 27역 정위치센서 교체 계획 수립

(예산: 약 5,000만원)

↓

2016. 09월: 관련 사업 예산 편성 요구

→ 우리 공사 효율적 예산 집행 관련 및 통합 경영상의 이유로 2017년 미반영

↓

2017. 03월: 미열림 횟수가 많은 개소에 대해 예비품 활용 작업 시행 중

(신정, 행당 2개소)

Ⅲ		현황보고

❍ 일부 장애 다발개소에 대해 예비품 활용하여 작업 시행 중

❍ 5호선 27역(기설치 구간 제외)에 대해 향후(2018년 등) 예산 편성하여 사업 시행 계획