공 종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	55,503,860	137,998,700	11,506,700	205,009,260	최초계약금액	205,009,260
			80,237,820	220,496,193	18,758,203	319,492,216	최종준공금액	319,492,216
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율 (%) =		0.1050	23,152,100		14,489,863
					0.1050	23,152,100		23,152,100
운반비 및 기타	1	식				0		0
						0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율(%) =		0.0380	9,258,635		5,794,565
					0.0380	9,258,635		9,258,635
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	2,119,740		1,326,650
					0.0087	2,119,740		2,119,740
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0196	0		2,698,341
					0.0000	0		0
노인장기요양보험료	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0655	0		176,741
					0.0000	0		0
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0286	0		3,952,276
					0.0000	0		0
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0230	495,600		3,173,970
					0.0022	495,600		495,600
안전관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노 무비) × 요율(%) =		0.0620	20,080,939		12,895,530
					0.0620	20,080,939		20,080,939
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경 비) × 요율(%) =		0.0080	0		1,640,074
					0.0000	0		0
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경 비) × 요율(%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경 비) × 요율(%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경 비) × 요율(%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
경비 계						73,865,217		57,654,710
						73,865,217		73,865,217
소 계						374,599,230		251,157,270
						374,599,230		374,599,230
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율 (%) =		0.0600	22,475,953		15,069,436
					0.0600	22,475,953		22,475,953
이 윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율(%) =		0.1492	47,224,817		31,439,994
					0.1491	47,224,817		47,224,817
설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상)						0		0
						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						0		0
						0		0
공 급 가 액	1	식				444,300,000		297,666,700
						444,300,000	0	444,300,000
E/S 적용금액(계)
						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10(%) =			44,430,000		29,766,670
						44,430,000		44,430,000
도 급 비						488,730,000		327,433,370
						488,730,000		488,730,000
관급자재대						0		0
						0		0
총 공 사 비						488,730,000		327,433,370
						488,730,000		488,730,000

검증 확인서

(2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가

)-정산설계변경)

착공일자 :

2014-04-07

준공기한 :

2015-02-28

설계변경 계약금액조정 검증완료 기술심사 담당관 확인필

검증일자 :

2015-01-20