공사진행중 현황

□ 토목부

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모	공정(%, ○○공사중)	비 고
1	종로구 돈화문 ~원남동 사거리	29,187	L=420m H=5.0m	43.1%, 종묘측 통로BOX구조물 공사중	율곡로 구조개선
2	성동구응봉동 685-355	35,669	3.0m×113m	공정 82%, 경원선(중앙선)구간 기존구조물 철거 공사중	응봉교 확장
3	성동구응봉동 100대		3.0m×265m
4	동부간선도로확장공사(2공구) (도봉구 창동)	17,500㎡	300m	48.4% 도봉지하차도 6단계 하천구간	동부간선 2공구
5	금천구 독산동 ~광명시 소하동 ~금천구 시흥동	95,655	H=2.5m, L=64m	공정(52%,교량공사중)	강남순환 4공구
6	관악구 신림동	42,034	H=5.5m (423m), H=2.0m (591m)	58%, 보강토 옹벽공사 중	강남순환 6-1공구 (민자)
7	관악구 봉천동	16,113	H=5.0m L=514m	58% 신림1터널 라이닝 공사 중
8	관악구 봉천동 244-1	12,040 (개착구간)	140m*2m (양방향)	지하차도 토공 및 가시설공 진행 중 (공정율 67.8%)	강남순환 6-2공구 (민자)
9	서초구 방배동	90,000㎡	600m (H=3m)	64.5%, 사당IC 공사중	강남순환 7-1공구 (민자)
10	서초구 양재동	28,213㎡	510m (H=3m)	69.7%, 선암교 공사중	강남순환 7-2공구 (민자)
11	서초구 양재동	429,347	H=2m, B=1m L=564m	공정(21.71%,가시설공사중	강남순환 8공구

□ 건축부

연번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모	공정(%, ○○공사중)	비 고
1	마포구 상암동 1,648번지 (IT-Complex 건립공사)	6,605㎡	재질 : RPP W : 195m, H : 6m	75% (내부마감 공사중)
1	노원구 하계동 산11일대 (서울과학관건립공사)	25,839㎡	재질 : RPP W : 120m, H : 4m	24%(오픈주차장 공사중)
1	구로구 고척동 60-6외 13필지 (서남권돔야구장건립공사)	58,906㎡	재질 : RPP W : 70m, H : 4m	79%(내외부 마감 공사중)

□ 도시철도토목부

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모	공정(%, ○○공사중)	비 고
1	선수촌아파트 ~ (구)잠실병원	5,363	1,178m	55.8%, 지하구조물 공사중	918공구
2	(구)잠실병원 ~ 석촌역	12,248	140m	41.07%, 지하구조물 공사중	919공구
3	석촌역 ~올림픽공원남4문	14,816	1,116m	49.6%, 지하구조물 공사중	920공구
4	올림픽공원남4문 ~올림픽공원역	15,891	764m	46%, 지하구조물 공사중	921공구
5	올림픽공원역 ~둔촌동 산29번지	4,084	160m	54.5%, 지하구조물 공사중	922공구
6	둔촌동 산29번지 ~보훈병원	24,494	1,640m	54%, 지하구조물 공사중	923공구

□ 도시철도사업부

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사(1공구)

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모	공정(%, ㅇㅇ공사중)	비 고
1	차량기지(우)	7,800	2m*100m (200㎡)	구조물공사중 64.8%	공사 진행에 따라 가림막 철거 및 이동 예정
2	차량기지(좌)	1,790	2m*80m (160㎡)	구조물공사중 64.8%
3	차량기지 원형광장	425	1.2m*80m (96㎡)	구조물공사중 64.8%
4	차량기지 견인차보관소앞	350	1.2m*100m (120㎡)	구조물공사중 64.8%
5	L01정거장 금천옥앞	420	1.2m*100m (120㎡)	구조물공사중 64.8%
6	L01E환기구 민물장어앞	315	1.2m*90m (108㎡)	구조물공사중 64.8%
7	본선2구간 CNG충전소앞	300	1.2m*86m (103㎡)	구조물공사중 64.8%
8	본선2구간 이마트앞	385	1.2m*110m (132㎡)	구조물공사중 64.8%
9	본선2구간 하나은행앞	350	1.2m*100m (120㎡)	구조물공사중 64.8%
10	L01정거장(좌)	420	1.5m*15m (23㎡)	구조물공사중 64.8%
11	L01정거장(우)	300	1.5m*40m (60㎡)	구조물공사중 64.8%
12	L01E환기구 솔밭공원앞	210	1.2m*60m (72㎡)	궤도공사중 64.8%
13	L03정거장 (본선)	280	1.2m*80m (96㎡)	구조물공사중 64.8%
14	L03정거장(우)	220	1.5m*35m (53㎡)	구조물공사중 64.8%

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사(2공구)

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모	공정(%, ○○공사중)	비 고
1	본선1구간	8,063㎡	6m(B) x 47m(L) = 280㎡	구조물 공사중, 94%	공사 진행에 따라 가림막 철거 및 이동 예정
2	본선2구간, LO3E환기구	6,096㎡	-	완료, 100%
3	LO4정거장	1,170㎡	6.3m(B) x 50.7m(L) = 320㎡	건축공사중, 89%
4	본선3구간, L04E 환기구	5,450㎡	7~7.4m(B) x 290m(L) = 2,020㎡	구조물 공사중, 54%
5	본선4구간	4,150㎡	7m(B) x 100m(L) = 700㎡	구조물 공사중, 20%
6	L05 정거장	1,461㎡	7m(B) x 40m(L) = 280㎡	구조물 공사중 ,19%
7	본선5구간	4,276㎡	7m(B) x 40m(L) = 276㎡	구조물 공사중, 85%
8	L05E 환기구	323㎡	3.5m(B) x 20m(L) = 120㎡	구조물 공사중, 73%
9	L06 정거장	1,185㎡	7.5m(B) x 70m(L) = 510㎡	구조물 공사중, 61%
10	L06E 환기구	389㎡	7.2m(B) x 70m(L) = 504㎡	구조물 공사중, 46%
11	L07 정거장	1,362㎡	7.2m(B) x 70m(L) = 504㎡	구조물 공사중, 63%

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사(3공구)

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모 (둘레x높이)	공정(%, ○○공사중)	비 고
1	L07E환기구	252㎡	101m×3.5m	60%,토공굴착 완료	공사 진행에 따라 가림막 철거 및 이동 예정
2	L08정거장	875㎡	63m×3.5m	65%,구조물공 진행중
3	L08E환기구	287㎡	52m×3.5m	60%,토공굴착 완료
4	L09정거장	945㎡	150m×2.0m	61%,구조물공 진행중
5	L09E환기구	500㎡	70m×3.5m	60%,토공굴착 완료
6	L10정거장	322㎡	90m×2.0m	63%,구조물공 진행중

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사(4공구)

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	가림벽 규모	공정(%, ○○공사중)	비 고
1	성북구 동선동5가 아리랑로	351	70m×6m	토공완료(100%) 구조물 공사준비중(0%)	공사 진행에 따라 가림막 철거 및 이동 예정
2	성북구 동선동1가 동소문로	883	43m×1.5m 43m×1.5m	토공완료(100%) 구조물 공사중(30%)
3	성북구 동선동1가 동소문로	224	55m×1.5m	토공완료(100%) 구조물 공사준비중(0%)
4	성북구 보문동1가 보문로	298	69m×5.0m	토공완료(100%) 구조물 공사준비중(0%)
5	성북구 보문동1가 보문역 사거리	619	60m×1.2m 60m×1.2m	연결통로 토공(99%) 구조물 공사중(79%)
6	성북구 보문동7가 보문로	223	36m×1.2m 36m×1.2m	토공완료(100%) 구조물 공사중(43%)
7	동대문구 신설동 오거리	967	111m×1.2m 111m×1.2m	토공완료(100%) 구조물 공사중(86%)

공사예정 현황

□ 토목부

연 번	위 치	사업부지 면적(㎡)	착공예정시기 (상반기/하반기)	착공예정일	비 고
1	관악구 남현동 산99-20	31,869	상반기	2015.03월	강남순환 6-2공구 (민자)

□ 방재시설부

연번	위 치	사업부지 면적(㎡)	착공예정시기 (상반기/하반기)	착공예정일	비 고
1	서강동, 신수동 효창역주변	25,350	‘15년 상반기	2015. 3월	경의선숲길 공원조성공사 (2단계 2차분)