실 정 사 항 보 고 (1차)

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 시민의숲 CPTED공원 조성공사

나. 도 급 액 : 금255,343,000원

다. 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 04. 10

라. 발 주 처 : 동부공원녹지사업소 공원운영과

마. 도 급 자 : (주)지산랜드 대표 김지현

2. 보 고 내 용 :

가. 발주청 지시사항

구 분	발주청 요청사항	검 토 의 견	비 고
시설물공사	▶ 안내판 변경 -구역안내판 : 공원입구 기설치분 1개소는 물량에서 제외 -방향안내판 : 필요지역에 추가 설치	▶해당 공종 내역 반영 -구역안내판 : 3개소→2개소(감 1개소) -방향안내판 : 7개소→9개소(증 2개소)	* 현장협의시 구두지시
식재공사	▶ 공원등 및 CCTV주변에 저촉되는 기존 교목 143주를 전정하도록 설계되어 있으나 저촉면 위주의 전정시 수형이 흐트러지고 개엽후에는 전정효과가 떨어지므로 전정을 제외하고 저촉이 심한수목 위주로 이식 시행	▶교목 전정제외후 수목이식 시행 -교목전정 : 143주→0주(감 143주) -교목이식(R16) : 0주→1주(증 1주) -교목이식(R21) : 0주→1주(증 1주) -교목이식(R22) : 0주→2주(증 2주) -교목이식(R26) : 0주→1주(증 1주) -교목이식(R27) : 0주→2주(증 2주) -교목이식(R28) : 0주→1주(증 1주)	* 현장협의시 구두지시

나. 현장실정사항 (지산********901 2014.02.24)

구 분	현실태 및 문제점	검 토 의 견	비 고
철거공사 포장공사 기타공사	▶화장실가벽 철거시 기초콘크리트부분의 철거와 폐기물처리 및 가벽부분의 포장재 재포장이 설계에서 누락됨	▶현장여건을 감안하여 해당공종 반영 -화장실가벽 기초콘크리트 철거 : 0개소→3개소(증 3개소) -보도블럭포장:0㎡→22.68㎡(증 22.68㎡) -폐콘크리트처리 : 25.37ton→35.14ton(증 9.77ton) -폐기물운반 : 30.01ton→39.78ton(증 9.77ton)

3. 변경금액(개략)

가. 총  괄                                                (단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	공사비(천원)			증감	비고
		전회	금회(증감)	누계
순공사비	187,871		-2,109	185,762	-2,109
제 경 비	67,472		-1,827	65,645	-1,827
도 급 비	255,343		-3,936	251,407	-3,936

나. 세부내역 : 따로붙임

※ 상기내용은 개략적인 물량과 금액이며 시공시 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영

4. 조치의견

상기내용에 대하여 승인을 득하여 선 시행하고 추후 설계변경 처리코자 함.

따로붙임 :  1. 변경내역서 1부.

2. 변경도면 1부.  끝.