설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이석우					요청일자			2014. 10
공 사 명			겸재교 건설 및 연결도로 확장공사										심의안건		① 접속교량 배수시설 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 도로확장 1식, 교량 3개소, 램프 2개소
			공사기간				2008. 10. 23 ~ 2015. 12. 31
			감 리 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			설 계 사				(주)동일기술공사
			시 공 사				(주)한진중공업, (주)서우건영
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 94,000천원
설계변경 사유(요약) ○ 접속교량의 제원이 변경됨에 따라(B=15.0m→9.0m / 종단구배:4%→10% ) 접속교량에 설치되는 집수구의 설치간격 및 종배수관에 대한 변경
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 배수구(집수구) 설치시 수평부분 곡관으로 인한 토사 등 막힘현상 발생우려가 있으니 재검토하여 조정할 수 있는지 대책을 강구해 볼 것 ※향후, 도로공용개시후 배수관 청소가 용이하도록 설치하고 시공중, 준공전 배수시설 정비를 철저히 할 것 ○ 종배수관로는 유지관리가 용이한 탈부착식으로 재검토해 볼 것 ○ 교량배수시설 설치 장비 규격이 과하다는 생각이 듬, 장비규격을 재검토하여 반영할 것 → 내역에 반영된 트럭크레인 15톤을 5톤으로 변경 재검토 ○ 기타, 교량배수시설의 내역서 규격 및 수량이 1식으로 되어 있어 확인하기에 어려움이 있으니 규격 및 수량을 명시할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김 구					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(8공구)건설공사										심의안건		② 염곡지하차도구간 상수도 이설비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 폭원4-10차도, 연장 7.96KM, 지하차도(4개소) : 2,790M 교량(2개소) : 540M
			공사기간				2002. 07. 03 ~ 2018. 07. 31
			감 리 사				㈜동명기술공단건축사사무소
			설 계 사				㈜수성엔지니어링
			시 공 사				롯데건설(주)외 1
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 844,300천원
설계변경 사유(요약) ○ 상수도 지장물 이설관련 관리주체인 강남수도사업소 협의결과 주･야간 병행작업으로 관련비목(염곡교차로 시상수도 이설) 증액 필요
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 아스팔트포장 장비조합(소규모)은 다짐 밀도가 확보되지 않을 것으로 판단되니, 다짐 밀도 확보가 가능한 장비로 조합이 되도록 재검토해 볼 것 ○ 양재대로 야간공사(횡단)시에는 안전사고 발생 우려가 있으니 야간 안전요원을 추가 배치하고 내역에 반영되도록 재검토 할 것 ○ E/S 물가변동 제외금액과 적용대상 금액을 확인할 수가 없으니 내역서 등 보완할 것 ○ 라인스토핑 주철관(600A) 4개소 견적서 대비표 및 내역 적용이 불분명하니 보완할 것 ○ 포장공사중 타공종 이기수량을 확인할 수 없으니 위치별 집계표를 작성할 수 있도록 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		③ 본선교(P7) 지장건물 철거수량 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 197,100천원
설계변경사유(요약) ○ 건물 확대보상 및 유관기관(한국철도공사)에 의하여 공법 및 철거수량이 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 구조물철거 절단부재인양에 사용한 장비규격은 신규단가와 비교하여 재검토 후 반영할 것 ※철거부재 중량에 따른 장비조합 재검토 ○ 내역서 수량적용시 소수점이하 자리수는 품셈기준을 적용하여 정리할 것 ○ 부직포, 필터매트, 벌크 콘테이너백 등 견적대비표가 없으니 보완할 것 ○ Wheel Saw 절단단가는 신규단가와 비교하여 재검토 후 반영할 것 ○ PP마대 자재대와 자재조서가 상이하니 보완할 것(p39, p61, p62) ○ 단가산출서 철거품중□설치비의 40%□적용근거가 불분명하니 적용근거를 명시할 것(p35~p37)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		④ 건설기계대여금 지급보증수수료 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 299,182천원
설계변경사유(요약) ○ 건설산업기본법 변경(2013.06.19.)에 따른 잔여공사비에 대하여 건설기계대여대금 지급보증수수료를 도급에 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 총괄내역서상 건설기계대여대금 제경비 요율(0.41%)에 대한 산출근거를 명시할 것(p10)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		⑤ 교대 골재 뒷채움 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 36,252천원
설계변경사유(요약) ○ 설계서에 누락된 교대 뒷채움을 설계에 반영 및 시공하여 부등침하 등에 의한 품질저하를 사전에 방지
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 수량산출서상 공제수량 적용이 불분명하니 재검토하여 조정할 것 → 바닥헌치부 공제수량 불분명(p32~p36) ○ 뒷채움 자재의 내역상 규격이 명시되어 있지 않으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 10
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		⑥ 홍보물 및 안전시설 설치비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 123,700천원
설계변경사유(요약) ○ 고가차도 철거공사로 인하여 교통 차단시 극심함 교통체증 및 수많은 교통민원 발생이 예상됨에 따라 사전 홍보계획수립에 따른 홍보물 설치 및 공사중 안전시설을 추가 및 변경 설치
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 방호벽휀스 및 가림막휀스는 규격 표시가 제대로 되어 있지 않고 단가적용이 불분명하니 재검토하여 반영할 것 ○ 자재비 비교표를 재검토하여 반영할 것(p42) → 견적가 누락 및 품명(견적1,2→상호) 표기 수정 → 견적단가에서 적용단가에 대한 근거가 불분명하니 확인후 보완할 것 → 신규단가는 예산절감 및 경제적인 측면에서 물가자료, 거래가격, 물가정보, 조달청단가를 비교하여 반영할 것 ○ 내역서상 공사안내표지판 설치 및 철거 규격(치수 단위)이 불분명하니 재검토하여 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 10
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		⑦ 모범운전자 배치 및 운영비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 87,527천원
설계변경사유(요약) ○ 당고가차도 철거공사로 인하여 교통 차단시 극심함 교통체증 및 수많은 교통민원 발생이 예상됨에 따라 전문교통 통제수(모범운전자)를 배치하여 원활한 교통소통 및 안전하고 신속한 철거공사를 하고자 함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음 ※개인정보보호법에 따라 주민등록번호 전체 명기는 정보유출시 분쟁소지가 발생할 수 있으니 불필요한 부분은 삭제하도록 할 것(p111~p113)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 10
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		⑧ 지장물 저촉으로 인한 환기구 변경시공
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 49,500천원
설계변경사유(요약) ○ 약수고가차도 철거에 따른 환기구(#98) 이설 작업중 설계당시 조사되지 않은 지장물(통신박스2.5x2.7)이 저촉되어 유관기관(서울메트로, KT)과 협의후 환기구를 통신박스 하부로 변경(굴착고 6.1m→9.3m)
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 발파암깨기 단가산출적용이 불명확하니 확인가능하도록 보완할 것 (치즐 자재대 등) → 단가산출서와 발파암 일위대가가 서로 상이하니 확인하여 반영할 것 (p295~p301) ○ 풍화암 천공에 대한 단가산출근거가 누락되어 있으니 보완할 것(p209) ○ 자재비교표상 신규단가는 예산절감 및 경제적인 측면에서 물가자료, 거래가격, 물가정보, 조달청단가를 비교 검토하여 반영할 것(p297) ○ 미끄럼방지시설 내역서상에 규격 명시할 것 ○ 기타, 환기구 통풍구간(보도 돌출부)은 안전사고에 대응 가능한 구조물로 조치할 수 있도록 검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 10
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		⑨ 미끄럼방지시설 및 점멸등 설치비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 79,900천원
설계변경사유(요약) ○ 약수고가차도 철거공사로 인하여 유관기관(서울특별시지방경찰청)과 협의한 결과에 따른 미끄럼방지시설 및 점멸등 설치
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 미끄럼방지시설 도심할증 적용근거가 불분명하니 재검토하여 반영할 것(p356)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 10
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		⑩ 교통안전시설물(차선, 표지) 등 설치비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 103,180천원
설계변경사유(요약) ○ 교통안전시설물(차선, 표지) 원인자부담공사부분에 대한 유관기관(서울시서부도로사업소)과 협의결과 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원