설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		③ 본선교(P7) 지장건물 철거수량 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 197,100천원
설계변경사유(요약) ○ 건물 확대보상 및 유관기관(한국철도공사)에 의하여 공법 및 철거수량이 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 구조물철거 절단부재인양에 사용한 장비규격은 신규단가와 비교하여 재검토 후 반영할 것 ※철거부재 중량에 따른 장비조합 재검토 ○ 내역서 수량적용시 소수점이하 자리수는 품셈기준을 적용하여 정리할 것 ○ 부직포, 필터매트, 벌크 콘테이너백 등 견적대비표가 없으니 보완할 것 ○ Wheel Saw 절단단가는 신규단가와 비교하여 재검토 후 반영할 것 ○ PP마대 자재대와 자재조서가 상이하니 보완할 것(p39, p61, p62) ○ 단가산출서 철거품중□설치비의 40%□적용근거가 불분명하니 적용근거를 명시할 것(p35~p37)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		④ 건설기계대여금 지급보증수수료 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 299,182천원
설계변경사유(요약) ○ 건설산업기본법 변경(2013.06.19.)에 따른 잔여공사비에 대하여 건설기계대여대금 지급보증수수료를 도급에 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 총괄내역서상 건설기계대여대금 제경비 요율(0.41%)에 대한 산출근거를 명시할 것(p10)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제10차)

【2014. 10. 24(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 10
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		⑤ 교대 골재 뒷채움 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 36,252천원
설계변경사유(요약) ○ 설계서에 누락된 교대 뒷채움을 설계에 반영 및 시공하여 부등침하 등에 의한 품질저하를 사전에 방지
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 수량산출서상 공제수량 적용이 불분명하니 재검토하여 조정할 것 → 바닥헌치부 공제수량 불분명(p32~p36) ○ 뒷채움 자재의 내역상 규격이 명시되어 있지 않으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원