제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
공사개요	공사규모		- 진입연결로 Ramp-A L=638m, 1차로(B=6.0m) - 진출연결로 Ramp-B L=455m, 1차로(B=6.0m) - 견인차량보관소 및 탄천변 화장실
	공사기간		2017. 6. 13. ~ 2019. 9. 30.
	감 리 사		㈜동일기술공사 외 2개사
	설 계 사		㈜동일기술공사
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			아스팔트 포장 1등급 골재 사용			요청금액		증) 85,800천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			제도, 기준변경
설계변경사항(요약) ○ 서울시 도로관리과 “차도혁신 종합대책 검토보고(2015.09)”에 의거 서울시내 모든 간선도로에 대하여 중차량에 의한 균열·소성변형에 저항하고자 아스팔트 포장시 1등급 골재를 사용하도록 되어 있어 이를 반영, 아스팔트 포장시 3등급 골재에서 1등급 골재로 변경하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 골재 1등급 적용시 내구성이 향상되나 공사비 증가요인이 발생함에 따라 관계기관 협의 후 협의 의견을 발주처 보고 후 수행하는 것이 타당함
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 가격정보 자료, 조달청 단가 자료 등을 재검토하여 단가 반영바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
공사개요	공사규모		- 진입연결로 Ramp-A L=638m, 1차로(B=6.0m) - 진출연결로 Ramp-B L=455m, 1차로(B=6.0m) - 견인차량보관소 및 탄천변 화장실
	공사기간		2017. 6. 13. ~ 2019. 9. 30.
	감 리 사		㈜동일기술공사 외 2개사
	설 계 사		㈜동일기술공사
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			교량 점검시설 설치			요청금액		증) 253,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			유관기관 요청
설계변경사항(요약) ○ 교량유지관리 점검시설이 미설치된 교각에 대하여 시설관리 주체인 서울시설공단으로부터 전구간에 교량점검시설을 설치하는 것으로 검토함에 따라 이동식 접근장비에 의한 점검시 안전사고와 교통혼잡 우려 등 점검의 효율성을 감안하여 교각 전개소에 교량점검시설을 설치하는 것으로 변경하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 서울시설공단 경사형 계단 설치요구에 대해 수직계단 설치 반영사유 명기 바람(P134) ○ Ramp-B의 P-4 단가산출서 누락되어 있으니 확인바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
공사개요	공사규모		- 진입연결로 Ramp-A L=638m, 1차로(B=6.0m) - 진출연결로 Ramp-B L=455m, 1차로(B=6.0m) - 견인차량보관소 및 탄천변 화장실
	공사기간		2017. 7. 1. ~ 2019. 9. 30.
	감 리 사		㈜동일기술공사 외 2개사
	설 계 사		㈜동일기술공사
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			교각 노출면 세라믹 도장 시공			요청금액		증) 81,400천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			유관기관 요청
설계변경사항(요약) ○ RAMP-A 종점부와 기존 탄천우안진출램프가 접속되어 교각의 연속성과 미관을 고려하고, 물리·화학적 성능이 우수하여 구조물 내구연한 증진 및 유지관리에 용이한 세라믹계 도장을 교각 전 개소로 확대 적용코자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 세라믹도장 적용시 내구성, 유리관리성이 개선되고 기시공된 탄천우안 진출램프와의 연계성 확보 측면에서 합리적일 것으로 판단하며 공사비 증액에 대한 사항을 발주처와 협의 후 적용 여부를 결정하는 것이 타당함.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 향후 유지관리부서인 서울시설공단 공문(P21) 첨부바람 ○ 세라믹 도장 교대부에 적용 배제한 사유명기 바람 ○ 수량산출에서 교량받침자리 수량누락되어 있으니 보완바람 ○ 수량산출서 [0∼7m]4.140→4.240으로 수정바람(P55)

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
공사개요	공사규모		- 진입연결로 Ramp-A L=638m, 1차로(B=6.0m) - 진출연결로 Ramp-B L=455m, 1차로(B=6.0m) - 견인차량보관소 및 탄천변 화장실
	공사기간		2017. 6. 13. ~ 2019. 9. 30.
	감 리 사		㈜동일기술공사 외 2개사
	설 계 사		㈜동일기술공사
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			교량 종방향 신축이음장치 변경			요청금액		증) 986,700천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			유관기관 요청
설계변경사항(요약) ○ 당초 레일형 종방향 신축이음장치 보다 차량 주행안전이 우수하고 내구성 확보에 유리한 단차 조정형 신축이음장치로 변경하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 특허제품 사용에 따른 서울시 특정공법 심의상정을 검토바람 (특허 및 신기술 자재 5천만원 이상, 시공 1억원 이상 대상) ○ 향후 유지관리부서인 서울시설공단 공문첨부 필요 ○ 폐기물처리비 확인바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부	요청일		2018년 9월 일
공 사 명	반포천 유역 분리터널 건설공사
공사개요	공사규모		□ 유역분리터널(▣4.5×4.5m~D6.5m,연장 1,162m □ 조경공사: 1식
	공사기간		2018. 02. 01 ~ 2021. 01. 30
	감 리 사		(주)도화엔지니어링외 2개사
	설 계 사		제일엔지니어링외 2개사
	시 공 사		(주)호반산업외 1개사
자문 안건명			연도변 사전/사후조사 변경			요청금액		증) 146,348천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 반포천 유역분리터널 공사에 따른 공사구간 주변 건축물에 대하여 영향이 미칠 것으로 판단되는 인접 건축물을 대상으로 균열,변위등 연도변 건물관리를 위해 사전.사후조사를 실시하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 해상 없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 단가산출시 (지침에 의한 산출×협의율) 적용금액과 견적가중 작은 것 적용이 타당하므로 재검토 바람(P44) ○ 설계단가의 100% 반영(P43)근거 첨부바람 ○ 제잡비 적용요율 당초 계약 비율 적용 재검토 바람 ○ 협의율 적용을 검토 바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부	요청일		2018년 9월 일
공 사 명	반포천 유역 분리터널 건설공사
공사개요	공사규모		□ 유역분리터널(▣4.5×4.5m~D6.5m,연장 1,162m □ 조경공사: 1식
	공사기간		2018. 02. 01 ~ 2021. 01. 30
	감 리 사		(주)도화엔지니어링외 2개사
	설 계 사		제일엔지니어링외 2개사
	시 공 사		(주)호반산업외 1개사
자문 안건명			공사손해보험료			요청금액		증) 64,169천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 반포천 유역분리터널 공사 입찰공고에 공사손해보험료 가입대상 공사로 명기 되었으나 설계서 및 도급계약서상 공사손해보험료가 누락되어 있으므로 관련 근거에 따라 공사손해보험료를 반영하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 해당 없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 원설계사 의견 첨부 바람 ○ 공사손해보험 가입대상(P174)을 보면 터널공사의 경우 터널부의 공사금액만 반영하도록 있으니 재검토 바람(P139) ○ 또한 당초 설계시 공사 손해보료 반영 누락사유 명시된 원설계자 의견서 첨부 바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부	요청일		2018년 9월 일
공 사 명	반포천 유역 분리터널 건설공사
공사개요	공사규모		□ 유역분리터널(▣4.5×4.5m~D6.5m,연장 1,162m □ 조경공사: 1식
	공사기간		2018. 02. 01 ~ 2021. 01. 30
	감 리 사		(주)도화엔지니어링외 2개사
	설 계 사		제일엔지니어링외 2개사
	시 공 사		(주)호반산업외 1개사
자문 안건명			지장물(상수도)이설공사			요청금액		증 373,967천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이(지질, 용수 등) 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 반포천 유역분리터널 건설공사와 관련하여 법원로에 매설되어 있는 상수관이 유입부box 공사와 간섭되어 이설 및 철거를 시행하고자 함,
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :.없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 라인스토핑 D300㎜ 개소 4개소인 이유 명기하고(P200), 라인스토핑 상세도(1,2) 수정 바람 ○ 라인스토핑 부단수시공(300㎜, 200㎜, 100㎜) 수량확인(P221) ○ 당초 설계시 누락원인 명시된 원설계자 의견서 첨부 바람 ○ 단가적용시 서울시 상수도사업본부 단가 적용을 검토 바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 08월 일
공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
공사개요	공사규모		○ 총공사구간 연장 L = 251m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 3대 등
	공사기간		2016.04.29. ~ 2018.11.30.(30개월)
	감 리 사		(주)대한콘설탄트, (주)한맥기술
	설 계 사		(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사
	시 공 사		한양산업개발(주)
자문 안건명			역사 슬래브(기초) 철거공법 변경 및 야간 적용			요청금액		증)112,288천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등) 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 월계역 연장공사 중 교각7(선하역사 철거) 공사 관련하여 선하역사 기초 철거가 wheel saw 절단으로 설계되었으나, 하부 슬래브(T=1.2m) 절단이 불가능 하여 코어드릴 공법으로 변경 ○ 교각7(선하역사 상부슬래브 철거)공사 위치가 철도레일과 근접하여 철도보호지구내 행위신고 사항에 따라 야간(01:30~04:30)작업으로 적용 코져 하오며, 슬래브 절단시 낙하방지를 위한 크레인을 적용하여 변경 코져함.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 시공 불가능한 부적정 설계된 사유로서 원설계사 의견 첨부 바람 ○ 할증산출근거 검토바람(P39) ○ 야간 작업시간 관련근거 P10야간작업시간 3시간이나 p39단가산출서 2∼3시간으로 상이하니 검토바람 ○ 야간 할증 수정을(2.625→2.4) 검토 바람 ○ 협의율 93% 산출근거 명시 바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 08월 일
공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
공사개요	공사규모		○ 총공사구간 연장 L = 251m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 3대 등
	공사기간		2016.04.29. ~ 2018.11.30.(30개월)
	감 리 사		(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술
	설 계 사		(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사
	시 공 사		한양산업개발(주)
자문 안건명			교각7 구조형식 변경(콘크리트→강구조물)			요청금액		증) 51,779천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			제도, 기준변경
설계변경사항(요약) ○ 교각7의 경우 월계역 철도레일 인접구간으로 철도보호지구 내 행위신고 사항에 따라 야간에 공사를 시행되어야 하나, 관급자재(레미콘) 야간 출하가 불가하고 작업시간이 짧아 안전 및 품질관리에 어려움이 발생함 ○ 철근콘크리트 구조물을 강구조형식으로 변경하여 안전사고 발생 차단및품질성 확보를 위해 변경 코져함
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 원설계사 의견 첨부 ○ 구조분야 기술지원감리원 검토의견서 실명으로 첨부바람 ○ 자재단가 산정시 조달처 가격정보 적용바람(P104) ○ 강구조물 자재비에서 앙카볼트 누락되어 있으니 적용 검토 바람

제0차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			안양교(A1,P5) 및 광복교 말뚝기초 변경			요청금액		증) 980,020천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등) 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 안양교 A1은 말뚝장비가 광명고가차도와 간섭되고, P5는 서부간선도로 교통통제가 곤란하여 말뚝기초공법을 마이크로 파일(Φ65mm)로 변경하고, 광복교 A1~A2은 말뚝기초 강관파일 수량을 정산하여 설계에 반영
원설계자 의견(요약) ○ 마이크로 파일 사례를 면밀히 검토하고 현장여건에 따라 마이크로 파일 적용
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 신규단가에 지세할증 적용 재검토 바람 ○ 원설계자의견서 첨부 바람 ○ 도급자와 발주자간의 협의율 서류 첨부바람(P37) ○ 기술지원감리원 검토서(P222)에 보완요청사항 첨부바람 ○ 재하시험 마이크로 파일로 수정, 횟수와 방법변경검토바람(P45) ○ P5교각공 재하시험 적용 검토 바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			안양교 말뚝기초(P1~P4, A2) 수량변경外			요청금액		증)128,101천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등) 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 안양교 지반조사 결과에 따라 P1~P3 말뚝길이 및 A2 말뚝배치를 조정하고, 시공중 확인된 지장물을 고려하여 P4 말뚝의 위치 및 기초높이를 변경후 설계에 반영
원설계자 의견(요약) ○ P4 기초변경으로 인해 기둥길이가 짧아졌으나, P1과 비교하여 기둥길이가 길고 경간길이가 상대적으로 짧으므로 내진검토는 실시하지 않고, A2는 수평변위와 관련하여 안정성 재검토 실시
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 스페이서 제작 및 설치수량 재검토 바람 ○ 신규단가에 지세할증 적용 재검토 바람 ○ 기술지원감리원 검토서(P314)에 추가 요청사항 첨부 바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			광복교 가시설 변경外 3건			요청금액		감) 126,924천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등) 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 광복교 가시설 설계가 현장여건과 상이하여 변경, 광복교 강박스 가설 및 목감천 이용자 편의증진을 위한 가축도 변경, 광복교 하부 자전거도로 포장 및 우기전 톤마대 및 천막설치, 광복교 및 철산펌프장 수위계 설치를 설계에 반영
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ E/A 감108공 사유 명기바람(P22) ○ H-pile 매몰(손료100%) 사유 명기 바람(P63) ○ 정부노임단가 적용(P75)시 2018년 상반기 단가적용이 타당하므로 검토 바람 ○ 어스앙커 공시간당 Q=5.2m/hr→P.69품셈 6.4m/hrP67 수정을 검토바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 8월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			안양교 아치교 가설벤트 변경			요청금액		증) 482,240천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 안양교 가설벤트가 기존 안양교 우물통 기초와 간섭되고 현장여건이 상이하여, 가설벤트 구조 변경 및 장비작업용 가축도를 추가설치하고 수량을 정산
원설계자 의견(요약) ○ 기존 안양교 우물통 기초와 간섭되는 벤트는 위치를 변경하여도 문제가 없을 것으로 판단되며 지반조사 결과에 따라 엄지말뚝 길이를 변경하고 하부벤트 변경에 맞게 상부벤트도 변경하여 감독관 승인후 조치
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 설계누락에 대한 원설계사 의견 첨부바람 ○ P66 자재비 현장도착도 적용(P61 강재운반 중복계산 사유) ○ 파일천공 품셈적용 여부확인 바람 ○ 신규단가 지세할증 재검토

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 9월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			보강토 옹벽 관급자재 변경 외			요청금액		증 55,544천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 보강토 옹벽의 수량산출 오류수정 및 현장여건 변동에 따른 절토부·성토부 수량변경, 그리드 자재 사급자재 변경 및 기술지원기술자 검토결과 반영
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 산근1 그리드설치 품 산출근거 첨부 바람(P51) ○ 성토시 물성치 확인바람

제10차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2018년 9월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			안양교 및 광복교 공사용 가도 사토처리			요청금액		증435,160천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등) 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 공사용 가도에 대해 현장 유용토록 설계되어 있으나, 하천 내 조성한 공사용 가도에 대해 안양천 하천점용허가 승인사항 및 구로구청 요청으로 우기시작일(05.15) 전 철거해야 하고, 공정 진행상 유용이 불가능하여 사토장 선정 후 사토처리하고 이를 설계에 반영코자 함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 덤프 1대상 사토량 산출근거 첨부 바람 ○ 양택리 518-55구간의 민간사토 요청 문서 첨부바람