설계변경 자문회의(소위원회) 결과 (제11차)

문서번호			요청부서	방재시설부 담당 이병환	요청일		2016년 11월 일
공 사 명	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사
공사개요	공사규모	□ 저지유도터널:L=887.1m, D=5.5m □ 고지유도터널:L=219.9m, D=5.5m □ 저류배수터널 : L=3,629.7m, D=10.0m □ 수직구 6개소, CSOs시설, 유수지개선, 건축, 조경 등
	공사기간	2013. 05. 27 ~ 2018. 1. 22
	감 리 사	(주)수성엔지니어링, 동일, 천일, 범한, 한방
	설 계 사	㈜건화 외 2개사
	시 공 사	현대건설(주) 외 2개사
자문 안건명		신월홍보관건립(목동1빗물펌프장 재설치 포함)				요청금액		증 24,157,000천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 설계는 목동1빗물펌프장은 리모델링하며, 홍보관은 계약상대자가 설치계획을 수립하여 발주기관과 협의후 계약 변경하는 것으로 계획되었으나, 행정2부시장 방침 제285호(‘16.10.18)에 의거 목동1빗물펌프장과 홍보관을 일체형 건물로 건립하여 통합 운영하는 것으로 결정
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 세부 내역서 항목별 감리단의 설계변경 검토의견서 첨부할 것 ○ 턴키 신규 비목 협의율을 낙찰률로 적용검토(Tnnkey-도면에 노선명기한 시공사 설계) ○ 설계비 산출을 실비정액가산방식으로 검토할 것

설계변경 자문회의(소위원회)결과 (제11차)

문서번호		요청부서		토목부 김 구	요청일		2016년 10월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사
공사개요	공사규모		-폭원 4-10차도 , 연장 7.96 KM -지하차도(4개소) : 2,790 M -교량(2개소) : 540 M
	공사기간		2002. 07. 03. ~ 2018. 07. 31
	감 리 사		㈜동명기술공단건축사사무소
	설 계 사		㈜수성엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)외 1개사
자문 안건명			거푸집형식 변경 설치 정산 보고			요청금액		증 353,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 민자접속구간 공기단축 방안으로 본선고가교 교각 기둥 및 코핑 거푸집 형식 변경(목재→강재), 선고가교 기초 합판거푸집 전용횟수 변경(버림 6회→3회, 기초 4회→3회)
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 증감수량은 기계약단가, 신규비목은 강제협의율 적용을 검토할 것 ○ 견적서 3개사 단가비교표 추가할 것(P54~P90)

설계변경 자문회의(소위원회)결과 (제11차)

문서번호		요청부서		방재시설부 조동협	요청일		2016년 10월 일
공 사 명	도림천상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모		□ 빗물저류조 65,000톤 □ 구조물 공사레미콘타설:13,754㎥,철근가공조립:2,316ton,PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간		2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사		(주)신명건설기술공사
	설 계 사		한국종합기술 외
	시 공 사		남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명			품질관리활동비 반영.			요청금액		증 70,840천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			제도 ,기준변경
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 품질관리비 산출 및 사용기준에 따르면 품질관리비는 품질시험비와 품질관리활동비를 구분 지어 계상토록 되어있음.(건설기술진흥법 제56조1항/시행규칙 제53조1항) 품질시험비는 공사비에 계상되어 있으나, 품질관리활동비는 계상되지 않아 공사비에 반영.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 품질관리자 인건비에 대한 제경비 적용여부 검토바람

설계변경 자문회의(소위원회)결과 (제11차)

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협	요청일		2016년 10월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		□ 도로개설 폭 20~26m 1.28㎞(터널 355m.포함)
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			지하철(7호선) 구조물 안전점검비			요청금액		증 77,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사구간 중 시점(내방역) U-TYPE구간 및 개착터널 구간이 지하철7호선과 인접해 있어 관계법령에 의거 도시철도공사와의 사전협의 결과에 따라 지하철 안전점검을 시행하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 각 업체 견적단가 기준이 상이하므로 동일 기준 적용할 것 ○ 시특법 기준 공사비 산출 시 최소요율 적용할 것 ○ 지침에 적용되는 대가인원수와 조정비율이 견적업체 별로 상이하게 적용되어 조정요함 ○ 투입기술자 인원, 여비현장체제비(국내여비 지급표)단가가 과다하므로 조정할 것

설계변경 자문회의(소위원회)결과 (제11차)

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협	요청일		2016년 10월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설 폭 20~26m 1.28㎞(터널 355m.포함)
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			유용토사 처리방안			요청금액		감 284,800천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 현장에서 발생되는 토사를 현장내 임시야적(정보사령부 연병장 부지활용)후 구조물 되메우기 및 성토구간에 유용하도록 되어 있으나, 정보사령부 부지는 현재 매각절차 진행중으로 임대가 어려우며, 또한 사토처리 대비 토지임대료가 비싼 실정으로 공정관리를 위한 최소한의 유용토를 현장내 야적(3,000m3)후 나머지 토사를 사토처리하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
자문결과 : 원안가결 ※ 순성토 사용계획 수립하고 사토수량에 대한 토석정보공유시스템에 등록 적용하여 사토처리비용 정산처리할 것