설계변경자문회의(소위원회)결과(제2차)

【2015. 2. 12(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2015. 1
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		⑥ 교량구간 방호벽 및 LMC포장 물빼기공 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km - 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				글로웨이(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 765,000천원
설계변경사유(요약) ○ 교량구간 방호벽의 난간 및 LMC포장구간 교면 물빼기공에 대하여 설계자 검토의견과 같이 시공하지 않아도 별문제없기에 설계에 반영(삭제)코자 함.
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 철근구매시 운반비 적용은 점포상차도 가격이 아닌 현장도착도 가격을 적용해야 될 것으로 판단되니 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제2차)

【2015. 2. 12(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2015. 1
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		⑦ 본선교 A2 가시설 및 가설방음벽 설치
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km - 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				글로웨이(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 38,100천원
설계변경사유(요약) ○ 철제상가 변전소(특고압 전선로)이설 불가 및 거주민 민원(소음 등)으로 본선교A2에 가시설 및 가설방음벽을 설치하고 암판정 결과에 따른 암 물량 정산
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 강재구매시 운반비 적용은 점포상차도 가격이 아닌 현장도착도 가격을 적용해야 될 것으로 판단되니 재검토해 볼 것 ○ 철근(소량) 운반거리를 공장상차도(인천제철)에서 현장도착도까지 적용하였으나, 시청에서 현장도착도를 기준으로 적용해야 될 것으로 판단되니 재검토해 볼 것 ○ 내역서상 H-pile 박기(천공후 항타), 케이싱 설치 및 철거 공종은 연암구간에서는 제외되어야 할 것으로 판단되니 재검토해 볼 것 - 토사구간과 동일하게 적용됨 ○ 띠장 설치 철거 공종의 단가산출시 실적공사비 또는 표준품셈기준을 추가 비교검토하여 적용하도록 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제2차)

【2015. 2. 12(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2015. 1
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		⑧ 자동차전용도로 및 교량하부 메쉬휀스 설치
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km - 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				글로웨이(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 227,000천원
설계변경사유(요약) ○ 자동차전용도로에 사람이나 동물의 무단횡단으로 인한 사고방지와 교량하부 불법주차 및 화재로 인한 교량시설물 보호를 위한 출입금지구역 설정
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 메쉬휀스 기초가 확실히 시공될 수 있도록 시공관리에 철저를 기할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원