제261회 시의회 정례회 교통위원회 ‘15.6.25(목) 10:00

따뜻하고 편안한 도시·사회 인프라 건설
주요현안 업무보고

2015. 6. 25

도시기반시설본부

( 도시철도국 )

보고순서

Ⅰ.	일 반 현 황		1
Ⅱ.	주요 추진사업		3
	1. 9호선 3단계 건설공사	4
	2. 우이∼신설 경전철 민간투자사업	6
	3. 신림선 경전철 민간투자사업	8
	4. 동북선 경전철 민간투자사업	9
	5. 면목선 경전철 민간투자사업	10
	6. 하남선(5호선 연장) 건설사업	11
	7. 진접선(4호선 연장) 차량기지 건설사업	13

Ⅰ. 일반현황

□ 조  직 : 1본부 2국 10부 50과

												본 부 장
				시 설 국																		도시철도국
	건설총괄부			토목부			건축부			설비부			방재시설부						도시철도계획부			도시철도사업부			도시철도토목부			도시철도건축부			도시철도설비부
																안전관리과
	(4과)			(6과)			(6과)			(5과)			(5과)			(1과)			(4과)			(5과)			(4과)			(3과)			(7과)

□ 인   력 : 정원 337명 / 현원 337명

○ 시설국 : 정원 208명, 현원 208명, 도시철도국 : 정원 129명, 현원 129명

□ 주요업무

부 서		주 요 업 무
도시 철도국	도시철도계획부	□도시철도 건설계획 수립 및 재정사업 설계 수행 □진접선(4호선 연장) 차량기지 건설사업
	도시철도사업부	□경전철 민간투자사업 추진 □민자사업 실시협약 관리 및 제도개선
	도시철도토목부	□지하철 9호선 2·3단계 건설공사 추진 □하남선(5호선 연장) 건설사업 추진 □우이∼신설 및 9호선 3단계 궤도공사 추진
	도시철도건축부	□도시철도 정거장 기본 디자인 계획 □도시철도 건축분야 설계․공사추진
	도시철도설비부	□전력설비(송변전, 전차선, 정거장 전기 등) 공사 추진 □기계․통신․신호설비, 차량수급 등 공사 추진

Ⅱ. 주요 추진사업

	9호선 3단계 건설공사
	우이∼신설 경전철 민간투자사업
	신림선 경전철 민간투자사업
	동북선 경전철 민간투자사업
	면목선 경전철 민간투자사업
	하남선(5호선 연장) 건설사업
	진접선(4호선 연장) 차량기지 건설사업

1		9호선 3단계 건설공사

□ 지하철 9호선 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 송파지역 주민불편 해소 및 지역간 균형발전 도모

1		사업개요

○ 위    치 : 잠실동 종합운동장 ~ 오륜동 올림픽공원 ~ 둔촌동 보훈병원

○ 규    모 : 총 연장 9.1㎞, 정거장 8개소(환승역 2개소)

○ 공사기간 : '09. 12. ∼ '16. 03.

○ 총사업비 : 1조 3,077억원

- '15년 예산 : 203,978백만원(채무 70,000백만원 포함)

2		추진현황

(공정률 : 54.4%)

○ ´09. 12.       : 토목공사 착수

○ ´12. 07.       : 쉴드터널 굴진

○ ´13. 02.        : 시스템공사(송변전, 전차선, 통신, 신호) 실시설계

○ ´13. 10.        : 궤도 실시설계 착수

○ ´15. 6월 현재  : 본선 및 정거장 구조물 공사중

3		향후계획

○ '15.10 : 사업계획 조정

○ '15.11 : 궤도공사 착수

작 성 자	도철토목부 :한동근 ☎772-7040 토목1과장 :김성호 ☎7041 담당 : 김용선 ☎7211

【 위치도 및 현장사진 】

〈정거장 구조물 공사〉	〈터널 방수 공사〉
〈터널 구조물 공사>	〈쉴드터널 공사>

2		우이~신설 경전철 민간투자사업

□ 도시철도 소외지역인 동북부지역의 교통기반 마련을 위한 우이～신설

경전철 민간투자사업 추진으로 지역 균형발전에 기여

1		사업개요

○ 위    치 : 우이동~정릉~성신여대역(4호선)~보문역(6호선)~신설동역(1,2호선)

○ 규    모 : 연장 11.4km, 정거장 13개소, 차량기지 1개소

○ 공사기간 : '09. 9. 15 ~ '16. 11. 30

○ 사업방식 : 민간투자사업(BTO)

○ 시 행 자 : 우이신설경전철(주)(주간사 : 포스코건설)

○ 총사업비 : 8,122억원(건설보조금 3,681, 약정투자금 1,010, 타인자본 3,431)

○ 시 공 사 : 4개사(1공구: 대우, 2공구: 두산, 3공구: 고려개발, 4공구: 포스코)

2		추진현황

(공정률 : 63.2%)

○ '09. 9. 3     : 실시계획 승인

○ '09. 9.15    : 공사 착수

○ '14.10.22    : 실시계획 변경 승인(공기연장 26.5개월)

○ '15. 6월 현재 : 전 구간 공사 정상 진행 중

3		향후계획

○ '15.  6 : 토목 본체구조물 완료, 건축 및 설비 공사 추진중

○ '15. 12 : 주요공사(궤도, 송변전, 통신, 신호 등)완료

○ '16.  11 : 시운전 및 공사완공

작 성 자	도철사업부 :이은상 ☎772-7030 경전철1과장 :박동룡 ☎7033 담당 : 위성환: ☎7178

【위치도 및 공사현황】

[차량기지 건축동]	[구조물 완료]
[궤도부설]	[차량제작 완료]

3		신림선 경전철 민간투자사업

철도 중심의 대중교통체계를 구축하여 서울 서남부지역의 대중교통난 해소

1		사업개요

○ 구  간 : 여의도(9호선)~서울대입구

○ 규  모 : 연장 8.06㎞, 정거장 11개소,

차량기지 1개소

○ 사업비 : 8,329억원 (‘13년 기본계획안 기준)

2		추진현황

○ '10. 3 ∼ 4월 : 우선협상대상자 지정 및 협상 개시

- 가칭) 남서울경전철 주식회사 [고려개발(주) 등 18개사 컨소시엄]

○ '12. 3.20 : 출자자 및 주간사 변경(고려개발 → 대림산업)

○ '13.12. 8 : 서울시 10개년 도시철도기본계획 변경(안) 수립

○ '15. 1월 : 협상 완료, 서울공공투자센터 검토

○ '15. 4월 : 민간투자사업심의위원회 심의(기획재정부)

○ '15. 6월 현재 : 실시협약 체결 준비 중

3		향후계획

○ '15. 6월 : 실시협약 체결

○ '15. 하반기 : 실시설계 및 실시계획 승인, 착공

○ '15 ~ '20 : 공사시행

작 성 자	도철사업부 :이은상☎772-7030 경전철관리과장 :최병훈☎7032 담당 :이재혁☎7171

4		동북선 경전철 민간투자사업

철도 중심의 대중교통체계를 구축하여 서울 동북부지역의 대중교통난 해소

1		사업개요

○ 구  간 : 왕십리역 ~ 상계역(4호선)

○ 규  모 : 연장 13.34㎞, 정거장 15개소,

차량기지 1개소

○ 사업비 : 1조 5,754억원 (‘13년 기본계획안 기준)

2		추진현황

○ '10.10~'10.11 : 우선협상대상자 지정 및 협상개시

- 가칭) 동북뉴타운 신교통주식회사 [경남기업㈜ 등 9개사 컨소시엄]

○ '13.12. 8  : 서울시 10개년 도시철도기본계획 변경(안) 수립

○ '14. 2.13  : 적격성 재조사 의뢰(서울시 → 공공투자관리센터)

- 도시철도기본계획 변경(상계역까지 1km연장)으로 민자 적격성 재조사 대상

○ '15. 1.22 : 민자 적격성 재조사 결과 통보(공공투자관리센터 → 서울시)

- 타당성 및 적격성 판단결과 민자사업 적격성 확보

○ '15. 4. 7 : 경남기업 기업회생절차 개시결정

○  '15. 6월 현재 : 경남기업 사업추진 의사여부 의견제출 요청(4회)

3		향후계획

○ ‘15년 하반기 : 주간사 경남기업과 컨소시엄 회원사의 사업추진 의사결정 결과에 따라 지분 재조정 또는  차순위 협상대상자와 협상 재추진

작 성 자	도철사업부 :이은상☎772-7030 경전철계획과장 :박용우☎7031 담당 :김정수☎7161

5		면목선 경전철 민간투자사업

철도 중심의 대중교통체계를 구축하여 서울 동북부지역의 대중교통난 해소

1		사업개요

○ 구  간 : 청량리역 ~ 신내역(6호선)

○ 규  모 : 연장 9.1㎞, 정거장 12개소,

차량기지 1개소

○ 사업비 : 8,894억원 (‘13년 기본계획안 기준)

2		추진현황

○ '07.12.21 : 최초제안서 접수

- 가칭) 청량리신내 경전철 주식회사 [포스코건설(주) 등 10개사 컨소시엄]

○ '11.07.28 : 제3자 제안공고

○ '11.12.15 : 협상대상자 지정을 위한 제안서 평가

- “제3자 제안공고 규정(700점이상)” 미달로 우선협상대상자 미선정.

○ '13.12.08 : 서울시 10개년 도시철도기본계획 변경(안) 수립

○ '14.10. ~ ‘15. 4 : 수요예측 재조사 완료(공공투자관리센터)

○ '15. 6월 현재 : 기획재정부 협의중(투자위험 분담방식 적용관련)

3		향후계획

○ ‘15년 하반기 : 투자위험분담방식 적용에 따른 기재부 업무 협의결과에 따라 제3자제안 재공고등 관련절차 이행

작 성 자	도철사업부 :이은상☎772-7030 협상진단과장 :박용택☎7051 담당 :이상석☎7151

6		하남선(5호선 연장) 건설사업(서울시 구간)

□ 지하철 5호선을 상일에서 하남시까지 연장하는  광역철도사업 추진으로 수도권 동남부 개발(하남미사지구 등)에 따른 광역교통수요에 대응

1		사업개요	(서울시 시행구간)

○ 위    치 : 강동구 상일동~ 서울시계

○ 규    모 : 총연장 1.1㎞, 정거장 1개소, 차량기지 입출고선 1.37㎞

- 궤도 및 시스템 등은 전구간(7.7㎞) 설계 및 공사시행

○ 기    간 : '15.03 ～ '19.03(전구간  '20.12)

○ 사 업 비 : 3,575.3억원

(공사비 3,182.4, 설계비 97.7, 보상비 46.9, 감리비 139.1, 시설부대비 109.2)

합 계	국 가	서울시	경기도	LH공사
3,575.3	1,163.4	922 ※ SH부담금 850	365.7	1,124.2

◆ 하남선 전구간 사업개요

‣ 위  치 : 강동구 상일동 ~ 하남미사 ~ 하남시 창우동

‣ 규  모 : 총연장 7.7㎞, 정거장 5개소

‣ 사업비 : 10,090억원(사업기간 : 2015년~2020년)

※ 강일동(서울시계) ~ 하남시 창우동 : 경기도시행

2		추진현황

○ '11. 4.28	: 예비타당성조사 완료(기재부)

○ '13.11.20	: 하남선 복선전철 기본계획 고시(국토부)

○ '14. 3.18	: 하남선 건설협약 체결(서울시,경기도,하남시,LH공사,서울시도시철도공사)

○ '14.12.16	: 총사업비 조정 결과 통보 (국토부)

○ '14.12.30	: 공사 입찰 공고 (조달청)

○ '15. 3.27  : 공사 계약 및 착공(서울시 구간)

○ '15. 6월 현재 : 사업계획 승인 요청 및 인허가 협의 중

작 성 자	도철토목부 :한동근☎772-7040 궤도과장 :명경출☎7045 담당 :성원배☎7241

3		향후계획

○ '15. 7      : 실 착공(토목, 건축)

○ '17. 상반기 : 후속착공(궤도,시스템) 공사계약

○ '19. 3	: 1단계 공사완료(서울시 구간)

※ '20. 12   : 2단계 공사완료(하남시 구간)

【위 치 도】

서울시구간

7		진접선(4호선 연장) 차량기지 건설사업

수도권 동북부 개발(별내 진접 등)에 따른  광역교통 체계구축으로 대중교통난 해소

1		사업개요

○ 위    치 : 남양주 진접읍 금곡리 일원

○ 규    모 : 차량기지 254,666㎡,

인입선 3,07㎞,

창동차량기지 철거1식

○ 사업기간 : ‘15 ~ ’19

○ 사 업 비 : 4,037억원

2		추진현황

○ '10.09.   : 예비타당성조사 완료(기획재정부)

○ '13.12.19 : 진접선 복선전철 기본계획 고시(국토교통부)

○ '14.12.12 : 4호선연장(진접선) 사업추진계획(서울특별시)

○ '15.01.09 : 진접선(4호선연장) 사업추진 계획수립

○ '15. 04. 30  : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

3		향후계획

○ '16. 10.   : 기본 및 실시설계용역 준공

○ '16. 10.   : 공사계약 및 착공

○ '19. 12.   : 공사완료(예정)

작 성 자	도철계획부 :박상돈☎772-7020 도시철도설계과장 :이명수☎7022 담당 :박창복☎7141