제3차 지하역사 공기질 개선대책(안)에 대한 검토의견

□ 검토 기관 : 궤도처(장태경, 전화번호 9763)

□ 검토 의견

페이지

대책(안)

수정(안)

수정 사유

28

○ 자갈도상 콘크리트 개량(km)

○ 조정내용 세부내용 참조

○ 추진계획 조정

세부내용

(변경 전)

(단위 : km, 백만원)

주요사업	세부사업		계	2018	2019	2020	2021	2022
터널 미세먼지 발생차단 및 저감	자갈도상 콘크리트 개량(km)	물량(km)	18	6.3	3	3	3	3
		사업비	54,900	18,900	9,000	9,000	9,000	9,000
		국비	10,800	-	2,700	2,700	2,700	2,700

세부내용

(변경 후)

(단위 : km, 백만원)

주요사업	세부사업		계	2018	2019	2020	2021	2022
터널 미세먼지 발생차단 및 저감	자갈도상 콘크리트 개량(km)	물량(km)	19.3	7.3	3	3	3	3
		사업비	57,900	21,900	9,000	9,000	9,000	9,000
		국비	10,800	-	2,700	2,700	2,700	2,700