설계변경자문회의(소위원회)결과(제3차)

【2015. 4. 2(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			한병찬					요청일자			2015. 2
공 사 명			구리암사대교 건설공사										심의안건		⑨ 경관조명 지지대 고정용 볼트 설치
공 사 개 요			공사규모				○ L=2.74km, B=4~6차로 ○ 암사대교 L=1.13km, 접속도로 L=1.61km, IC2개소(암사,아천)
			공사기간				2006. 04. 05. ~ 2015. 6. 30.
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링종합건축사무소
			설 계 사				(주)도화엔지니어링
			시 공 사				현대건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 137,000천원
설계변경사유(요약) ○ 구리암사대교 주교량부 아치 경관조명의 지지대가 턴버클 형식으로 설계되어 있으나(전기공사계약분) 교량의 미관 및 강풍에 취약하고, 경관조명 지지대 폭이 협소하여 조명투광 각도가 좁아 조명효과가 미흡한 것으로 검토되어 경관조명(LED) 지지대 형식을 변경하고(전기공사분) 주교량 아치부 및 V각부 외측에 볼트고정 방식으로 변경하고자 함(토목공사분)
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 견적서 제출자료중 B/T중량 및 단가 적용이 3개사 업체 모두 상이하니 동일한 조건으로 견적서를 제출받아 비교검토후 이를 반영하도록 할 것(p37~p41, LED조명 설치용 볼트설치품)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제3차)

【2015. 4. 2(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			한병찬					요청일자			2015. 2
공 사 명			구리암사대교 건설공사										심의안건		⑩ 교량본선 강교 신축이음장치 변경
공 사 개 요			공사규모				○ L=2.74km, B=4~6차로 ○ 암사대교 L=1.13km, 접속도로 L=1.61km, IC2개소(암사,아천)
			공사기간				2006. 04. 05. ~ 2015. 6. 30.
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사무소
			설 계 사				(주)도화엔지니어링
			시 공 사				현대건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 149,000천원
설계변경사유(요약) ○ 강교와 강교가 맞닿는 구간의 신축이음 형식이 후타재 타설형으로 설계되어 있으나, 유지관리부서(서울시 도로시설과) 현장점검시(‘12.06.12) 강재와 직접 체결 가능한 제품으로 검토하라는 지시에 의해 강재 용접형으로 변경하여 공용중 후타재의 파손 및 신축이음 교체시 상부구조물의 손상을 방지하고자 함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 자재조서상 신축이음장치 단가를 단일 견적으로 처리하였으나, 예산절감 및 경제적인 측면에서 타 견적(3개사 이상), 물가정보지, 조달청 단가 등을 추가 비교검토하여 반영하도록 할 것(p98)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제3차)

【2015. 4. 2(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			한병찬					요청일자			2015. 2
공 사 명			구리암사대교 건설공사										심의안건		⑪ 군벙커 신설
공 사 개 요			공사규모				○ L=2.74km, B=4~6차로 ○ 암사대교 L=1.13km, 접속도로 L=1.61km, IC2개소(암사,아천)
			공사기간				2006. 04. 05. ~ 2015. 6. 30.
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사무소
			설 계 사				(주)도화엔지니어링
			시 공 사				현대건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 190,000천원
설계변경사유(요약) ○ 구리암사대교 건설공사 암사IC 올림픽대로 중분대 구간 내 기설치되어 있던 군벙커가 철거되어 발주처인 서울시 도시기반시설본부와 군부대(수방사 및 제52보병사단)와 협의결과 암사IC 제외지(올림픽대로 법면)에 신설토록 합의각서를 체결하여 이를 설계에 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 차량통행에 따른 추가 공사비 발생이 최소화되도록 설치할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제3차)

【2015. 4. 2(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			한병찬					요청일자			2015. 2
공 사 명			구리암사대교 건설공사										심의안건		⑫ 차선도색 변경
공 사 개 요			공사규모				○ L=2.74km, B=4~6차로 ○ 암사대교 L=1.13km, 접속도로 L=1.61km, IC2개소(암사,아천)
			공사기간				2006. 04. 05. ~ 2015. 6. 30.
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사무소
			설 계 사				(주)도화엔지니어링
			시 공 사				현대건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 464,000천원
설계변경사유(요약) ○ 구리암사대교 차선도색이 가열형(3종) 및 상온형(1종)으로 설계되어 있으나, 개정된 관련규정 「차선도색 특별시방서 표준(안)」(‘11.2 국토해양부)에 의해 유지관리부서(서울시 교통운영과)와 협의결과, 재귀반사성능에 대한 요구사항 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 차선도색 단가를 품셈기준을 적용하여 산출하였으나, 서울시 공통대가 기준도 있으니 비교검토하여 반영하도록 할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원